Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

28. 07. 2021 года.                                                         Дело № А40-87208/21-43-606

Резолютивная часть решения объявлена 19. 07. 2021 года.

Решение изготовлено в полном объеме 28. 07. 2021 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО " Создание " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " Альянс Строй Монтаж " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 22 900 211 руб. 24 коп. – суммы предварительной оплаты,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность б/н от 11.03.2021 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя,  арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 22 900 211 руб. 24 коп. – суммы предварительной оплаты, на основании статей 15, 309, 310, 405, 450.1, 708, 715 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении и в  письменных пояснениях, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

1) 11.02.2019 между ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ МОНТАЖ» (Субподрядчик) и ООО «Ресурс» (Генподрядчик, в настоящее время ООО «СОЗДАНИЕ») заключен договор № 7-КР/19 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт подъездов) в многоквартирных домах: г. Москвы, С АО, ФИО3 ул., 50 к.1, Онежская ул., 53 к.1, Петрозаводская ул. 9 к.4 (далее Договор № 7-КР/19), в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее Работы) в соответствии с графиком производства и стоимости работ, по адресам: г. Москва, САО, ФИО3 

<

...>; Онежская 

<

...>; Петрозаводская 

<

...> (далее Объекты), включая выполнение строительно-монтажных работ на объектах, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу объектов по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.

В соответствии с п.3.1 Договора № 7-КР/19 цена Договора определяется на основании расчета стоимости работ и составляет 13 407 746 руб. 47 коп. и включает все затраты Субподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объектах.

Платежными поручениями № 12 от 05.07.2019 на сумму 3 000 000 руб. 00 коп. и № 13 от 11.07.2019 на сумму 1 200 000 руб. 00 коп. Генподрядчик во исполнение п.3.4 Договора № 7-КР/19 произвел выплату Субподрядчику аванса.

Согласно п.4.1 Договора № 7-КР/19 Субподрядчик обязуется выполнить работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с графиком производства и стоимости работ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Субподрядчиком сроков производства работ.

Пунктом 4.2.1 Договора № 7-КР/19 предусмотрено, что начало выполнения работ по Договору № 7-КР/19 - с даты подписания настоящего Договора № 7-КР/19.

Окончание выполнения работ по Договору № 7-КР/19 - последний день установленного срока выполнения работ согласно графику производства и стоимости работ (п.4.2.2 Договора № 7-КР/19).

Пунктом 12.1 Договора № 7-КР/19 стороны согласовали срок действия Договора № 7-КР/19 до 01.10.2019.

В установленные Договором № 7-КР/19 сроки полный объем работ Субподрядчиком выполнен не был, акты сдачи-приемки выполненных работ между сторонами не подписывались.

2) 07.02.2019 между ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ МОНТАЖ» (Субподрядчик) и ООО «Ресурс» (Генподрядчик, в настоящее время ООО «СОЗДАНИЕ») заключен договор № 5-КР/19 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт подъездов) в многоквартирных домах: г. Москвы, САО, Хорошевский 1-й пр. 10 к.2, Хорошевский 1-й пр. 14 к.3, Хорошевский 1-й пр. 16 к.2 (далее Договор № 5-КР/19), в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее Работы) в соответствии с графиком производства и стоимости работ, по адресам: г. Москва, САО, Хорошевский 1-й 

<

...>; Хорошевский 1-й 

<

...>; Хорошевский 1-й 

<

...> (далее Объекты), включая выполнение строительно-монтажных работ на объектах, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу объектов по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.

В соответствии с п.3.1 Договора № 5-КР/19 цена Договора № 5-КР/19 определяется на основании расчета стоимости работ и составляет 4 150 065 руб. 09 коп. и включает все затраты Субподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объектах.

Платежными поручениями № 4 от 17.04.2019 на сумму 1 092 225 руб. 01 коп. и№ 7 от 19.06.2019 на сумму 210 320 руб. 00 коп. Генподрядчик во исполнение п.3.4. договора № 5-КР/19 произвел выплату Субподрядчику аванса.

Согласно п.4.1 Договора № 5-КР/19 Субподрядчик обязуется выполнить работы по Договору № 5-КР/19, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с графиком производства и стоимости работ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также, работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Субподрядчиком сроков производства работ.

Пунктом 4.2.1 Договора № 5-КР/19 предусмотрено, что начало выполнения работ по Договору № 5-КР/19 - с даты подписания настоящего Договора.

Окончание выполнения работ по Договору № 5-КР/19 - последний день установленного срока выполнения работ согласно графику производства и стоимости работ (п.4.2.2 Договора № 5-КР/19).

Пунктом 12.1 Договора № 5-КР/19 стороны согласовали срок действия Договора 5-КР/19 до 01.10.2019.

В установленные Договором № 5-КР/19 сроки полный объем работ Субподрядчиком выполнен не был, акты сдачи-приемки выполненных работ между сторонами не подписывались.

3) 11.02.2019 между ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ МОНТАЖ» (Субподрядчик) и ООО «Ресурс» (Генподрядчик, в настоящее время ООО «СОЗДАНИЕ») заключен договор № 8-КР/19 на выполнение аварийных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: г. Москвы, САО, Авангардная ул. 18 (далее Договор № 8-КР/19), в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее Работы) в соответствии с графиком производства и стоимости работ, по адресу: г. Москва, САО, Авангардная ул., д. 18 (далее Объект), включая выполнение строительно-монтажных  работ  на  объектах,   сооружение  и  демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу объектов по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.

В соответствии с п.3.1 Договора № 8-КР/19 цена Договора № 8-КР/19 определяется на основании расчета стоимости работ и составляет 2 739 350 руб. 00 коп. и включает все затраты Субподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объектах.

Платежными поручениями № 1 от 17.04.2019 на сумму 669 010 руб. 48 коп. и № 10 от 19.06.2019 на сумму 196 000 руб. 00 коп. Генподрядчик во исполнение п.3.4 Договора № 8-КР/19 произвел выплату Субподрядчику аванса.

Согласно п.4.1 Договора № 8-КР/19 Субподрядчик обязуется выполнить работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с графиком производства и стоимости работ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Субподрядчиком сроков производства работ.

Пунктом 4.2.1 Договора № 8-КР/19 предусмотрено, что начало выполнения работ по Договору № 8-КР/19 - с даты подписания настоящего Договора.

Окончание выполнения работ по Договору № 8-КР/19 - последний день установленного срока выполнения работ согласно графику производства и стоимости работ (п.4.2.2 Договора № 8-КР/19).

Пунктом 12.1 Договора № 8-КР/19 стороны согласовали срок действия Договора до 01.10.2019 г.

В установленные Договором № 8-КР/19 сроки полный объем работ Субподрядчиком выполнен не был, акты сдачи-приемки выполненных работ между сторонами не подписывались.

4) 08.02.2019 между ООО «АЛЬЯНС СТРОИ МОНТАЖ» (Субподрядчик) и ООО «Ресурс» (Генподрядчик, в настоящее время ООО «СОЗДАНИЕ») заключен договор № 3-ВР/19 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт подъездов) в многоквартирном доме: г. Москва, ВАО, Вешняковская ул. 5 к.4 (далее Договор № З-ВР/19), в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее Работы) в соответствии с графиком производства и стоимости работ, по адресу: г. Москва, ВАО, Вешняковская ул., д.5, корп.4 (далее Объект), включая выполнение строительно-монтажных работ на объектах, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу объектов по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.

В соответствии с п.3.1 Договора № З-ВР/19 цена Договора № 3-ВР/19 определяется на основании расчета стоимости работ и составляет 15 140 724 руб. 00 коп. и включает все затраты Субподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объектах.

Платежными поручениями № 5 от 17.04.2019 на сумму 2 875 350 руб. 28 коп. и № 6 от 19.06.2019 на сумму 312 170 руб. 00 коп. Генподрядчик во исполнение п.3.4 Договора № 3-ВР/19 произвел выплату Субподрядчику аванса.

Согласно п.4.1 Договора № З-ВР/19 Субподрядчик обязуется выполнить работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с графиком производства и стоимости работ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Субподрядчиком сроков производства работ.

Пунктом 4.2.1 Договора № З-ВР/19 предусмотрено, что начало выполнения работ по Договору № З-ВР/19 - с даты подписания настоящего Договора.

Окончание выполнения работ по Договору № З-ВР/19 - последний день установленного срока выполнения работ согласно графику производства и стоимости работ (п.4.2.2 Договора № З-ВР/19).

Пунктом 12.1 Договора № З-ВР/19 стороны согласовали срок действия Договора до 01.10.2019.

В установленные Договором № З-ВР/19 сроки полный объем работ Субподрядчиком выполнен не был, акты сдачи-приемки выполненных работ между сторонами не подписывались.

5) 11.02.2019 между ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ МОНТАЖ» (Субподрядчик) и ООО «Ресурс» (Генподрядчик, в настоящее время ООО «СОЗДАНИЕ») заключен договор № 4-КР/19 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт подъездов) в многоквартирных домах: г. Москвы, САО, Ангарская ул. 41, Ангарская ул. 45 к.4, Ангарская ул. 47 (далее Договор № 4-КР/19), в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее Работы) в соответствии с графиком производства и стоимости работ, по адресу: г. Москва, САО, Ангарская ул., д.41; Ангарская ул., д.45, корп.4; Ангарская ул., д.47 (далее Объекты), включая выполнение строительно-монтажных работ на объектах, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу объектов по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.

В соответствии с п.3.1 Договора № 4-КР/19 цена Договора № 4-КР/19 определяется на основании расчета стоимости работ и составляет 8 176 753 руб. 26 коп. и включает все затраты Субподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объектах.

Платежными поручениями № 2 от 17.04.2019 на сумму 2 300 231 руб. 46 коп. и № 9 от 19.06.2019 на сумму 281 300 руб. 00 коп. Генподрядчик во исполнение п.3.4 Договора № 4-КР/19 произвел выплату Субподрядчику аванса.

Согласно п.4.1 Договора № 4-КР/19 Субподрядчик обязуется выполнить работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с графиком производства и стоимости работ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Субподрядчиком сроков производства работ.

Пунктом 4.2.1 Договора № 4-КР/19 предусмотрено, что начало выполнения работ по Договору № 4-КР/19 - с даты подписания настоящего Договора.

Окончание выполнения работ по Договору № 4-КР/19 - последний день установленного срока выполнения работ согласно графику производства и стоимости работ (п.4.2.2 Договора № 4-КР/19).

Пунктом 12.1 Договора № 4-КР/19 стороны согласовали срок действия Договора до 01.10.2019.

В установленные Договором № 4-КР/19 сроки полный объем работ Субподрядчиком выполнен не был, акты сдачи-приемки выполненных работ между сторонами не подписывались.

6) 07.02.2019 между ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ МОНТАЖ» (Субподрядчик) и ООО «Ресурс» (Генподрядчик, в настоящее время ООО «СОЗДАНИЕ») заключен договор № 6-КР/19 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт подъездов) в многоквартирных домах: г. Москвы, САО, Квесисская 2-я ул. 11, Полтавская ул. 16 к.2 (далее Договор № 6-КР/19), в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее Работы) в соответствии с графиком производства и стоимости работ, по адресу: г. Москва, САО, Квесисская 2-я ул., 

<

...> (далее Объекты), включая выполнение строительно-монтажных работ на объектах, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу объектов по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.

В соответствии с п.3.1 Договора № 6-КР/19 цена Договора № 6-КР/19 определяется на основании расчета стоимости работ и составляет 3 003 495 руб. 10 коп. и включает все затраты Субподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объектах.

Платежными поручениями № 3 от 17.04.2019 на сумму 748 254 руб. 01 коп. и № 8 от 19.06.2019 на сумму 200 210 руб. 00 коп. Генподрядчик во исполнение п.3.4 Договора № 6-КР/19 произвел выплату Субподрядчику аванса.

Согласно п.4.1 Договора № 6-КР/19 Субподрядчик обязуется выполнить работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с графиком производства и стоимости работ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Субподрядчиком сроков производства работ.

Пунктом 4.2.1 Договора № 6-КР/19 предусмотрено, что начало выполнения работ по Договору № 6-КР/19 - с даты подписания настоящего Договора.

Окончание выполнения работ по Договору № 6-КР/19 - последний день установленного срока выполнения работ согласно графику производства и стоимости работ (п.4.2.2 Договора № 6-КР/19).

Пунктом 12.1 Договора № 6-КР/19 стороны согласовали срок действия Договора до 01.10.2019.

В установленные Договором № 6-КР/19 сроки полный объем работ Субподрядчиком выполнен не был, акты сдачи-приемки выполненных работ между сторонами не подписывались.

7) 28.02.2019 между ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ МОНТАЖ» (Субподрядчик) и ООО «Ресурс» (Генподрядчик, в настоящее время ООО «СОЗДАНИЕ») заключен договор № 002723/19 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: г. Москвы, СВАО, Абрамцевская ул. 9, корп.1 (далее Договор № 002723/19), в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себяобязательство в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее Работы) в соответствии с графиком производства и стоимости работ, по адресу: г. Москва, СВАО, Абрамцевская ул., д.9, корп.1 (далее Объект), включая выполнение строительно-монтажных работ на объектах, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу объектов по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.

В соответствии с п.3.1 Договора № 002723/19 цена Договора № 002723/19 определяется на основании расчета стоимости работ и составляет 97 959 368 руб. 52 коп. и включает все затраты Субподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объектах.

Платежными поручениями № 14 от 12.07.2019 на сумму 8 800 000 руб. 00 коп. и № 19 от 25.07.2019 на сумму 1 015 140 руб. 00 коп. Генподрядчик во исполнение п.3.4 Договора № 002723/19 произвел выплату Субподрядчику аванса.

Согласно п.4.1 Договора № 002723/19 Субподрядчик обязуется выполнить работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с графиком производства и стоимости работ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Субподрядчиком сроков производства работ.

Пунктом 4.2.1 Договора № 002723/19 предусмотрено, что начало выполнения работ по Договору № 002723/19 - с даты подписания настоящего Договора.

Окончание выполнения работ по Договору № 002723/19 -последний день установленного срока выполнения работ согласно графику производства и стоимости работ (п.4.2.2 Договора № 002723/19).

Пунктом 12.1 Договора № 002723/19, а также графиком производства и стоимости работ стороны согласовали срок действия Договора до 01.10.2019.

В установленные Договором № 002723/19 сроки полный объем работ Субподрядчиком выполнен не был, акты сдачи-приемки выполненных работ между сторонами не подписывались.

В соответствии с ч.2 ст.715 ГК РФ, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. В случае одностороннего отказать от договора, если такой отказ осуществляется в соответствии с законом, договор считается расторгнутым (часть 2 статьи 450.1 ГК РФ).

В соответствии с ч.3 ст.708 ГК РФ, указанные в ч.2 ст.405 ГК РФ последствия просрочки исполнения обязательств наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно ч.2 ст.405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника (Подрядчика) исполнение утратило интерес для кредитора (Генерального подрядчика), он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно ст.450.1 ГК РФ предоставленное договором или законом право на односторонний отказ от исполнения договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от исполнения договора.

Согласно п. 13.1 вышеуказанных Договоров их расторжение возможно по инициативе Генподрядчика, в том числе в виде одностороннего расторжения Договоров.

Генподрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 дней по любому из объектов (п. 13.7.6. Договоров).

Решение Генподрядчика об одностороннем расторжении Договора направляется Субподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре (п. 13.9 Договоров).

По основаниям, предусмотренным вышеуказанными статьями Гражданского кодекса РФ, ООО «РЕСУРС» направило в адрес ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ МОНТАЖ» уведомление от 02.10.2020 о расторжении Договора и претензию о возврате аванса по Договору.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Направленная в адрес ответчика претензия осталась без ответа.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя  из смысла указанной  нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости  собственного  имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того  имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за  счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за  счет другого.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Требование истца о взыскании 22 900 211 руб. 24 коп. – суммы предварительной оплаты - законное и обоснованное, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Требование истца об отнесении на ответчика судебных расходов, связанных с оплатой юридических услуг  в сумме 75 000 руб. - подтверждено имеющимися в деле документами (Договора №3-04/2021 об оказании услуг от 08.04.21г., платежное поручение от 09.04.21г. № 520), не оспорено ответчиком и подлежит удовлетворению в размере 50 000 руб. 00 коп., в соответствии со статьями 106, 110, 112 АПК РФ. В остальной части требование удовлетворению не подлежит в связи с несоразмерностью.

Расходы по уплате госпошлины, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ, относятся на Ответчика. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 401, 420-424, 431-434, 450, 452, 453, 702, 709, 711, 720, 740, 746, 753, 1102, 1103 ГК РФ, руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 65, 66, 71, 75, 81, 106, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " Альянс Строй Монтаж " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Создание " (ОГРН 

<

***>) 22 900 211 руб. 24 коп. – суммы предварительной оплаты, а также судебные издержки на оплату услуг представителя в сумме 50 000 руб. 00 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 137 501 руб. 00 коп.

Требование истца об отнесении на ответчика судебных издержек на оплату услуг представителя в сумме 25 000 руб. 00 коп. оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья

ФИО1