Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-12857/2023

28 октября 2024 года

г. Челябинск

 

 Судья Арбитражного суда Челябинской области Гордеева Н.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Рубцовой М.Д. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению Органа местного самоуправления «Комитет по  управлению имуществом Златоустовского городского округа», ОГРН  1027400579733, г. Златоуст, к обществу с ограниченной ответственностью  «Златоустгазстрой», ОГРН 1027400576378, г. Златоуст, о взыскании убытков  в размере 111 523 руб. 20 коп., об обязании произвести ремонтные работы,  при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора: акционерное  общество «Газпром газораспределение Челябинск», ОГРН: 1037403898058;  общество с ограниченной ответственностью «Уральская газовая служба- Финанс», ОГРН: 1217400024225  

при участии в судебном заседании представителя: 

от ответчика: ФИО1, на основании доверенности от 09.01.2024г.,  личность удостоверена паспортом, представлен диплом;  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167–171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Принять отказ Органа местного самоуправления «Комитет по  управлению имуществом Златоустовского городского округа» от исковых  требований в части:  

 Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на  объекте: ГРП высокого давления в районе АГНКС группы коттеджей (пос.  Красная горка). Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, в районе АГНКС  группы коттеджей (пос. Красная горка). Нежилое здание, литер А, этажность 1.  Реестровый номер: 42840 (договор № 121 от 29.04.2021 г.), а именно:  

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементным раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 

- Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным  раствором при толщине намета: до 10 мм;  

- Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен,  ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой  краски более 35%;  

- Ремонт штукатурки потолков побетону цементным раствором, площадью  отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 10 мм;  

- Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным  раствором при толщине намета: до 5 мм;  

- Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков,  ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой  краски более 35%;  

- Разборка покрытий полов: цементных; 

- Армирование стяжки сеткой кладочной 100x100x5 мм;  - Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм;  

- Шлифовка поверхности полов; - Покрытие полов лаком кремнеорганическим КО-174 на 2 слоя; 

- Демонтаж металлических дверных блоков размер 2,1x1,0 м;  - Монтаж металлических дверей противопожарных размер 2,1x1,0 м;  

- Снятие металлических решеток для замена оконных блоков;  - Демонтаж деревянных оконных блоков размером 2,1x2,4 м;  - Монтаж легкосбрасываемых конструкций окон размером 2,1x2,4 м;  

- Смена отливов из оцинкованной стали; - Штукатурка оконных откосов; 

-Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее  окрашенных:»» масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%;  

- Установка металлических решеток; - Разборка покрытия кровли из рубероида; 

- Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной 30 мм;  - Огрунтовка основания кровли праймером битумным;  

- Устройство покрытий кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя (Унифлекс); - Смена карнизных свесов шириной 700 мм; - Разборка бетонной отмостки; 

- Разборка грунта вручную на глубину 0,15 м по периметру;  - Устройство щебеночного основания толщиной 150 мм по периметру;  

- Армирование стяжки сеткой кладочной 100x100x5 мм;  - Устройство бетонной отмостки толщиной 150 мм из бетона класса В15;  

- Демонтаж газового котла; 

- Разборка трубопроводов отопления и газоснабжения диаметром 89 мм;  - Демонтаж кранов шаровых диаметром 80 мм;  

- Монтаж котла газового теплопроизводительность 18 кВт;  - Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения диаметром 89 мм;  

- Установка кранов шаровых диаметром 80 мм; - Прокладка дымоходов диаметром 180 мм; - Маслянная окраска трубопроводов диаметром 89 мм. 

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на  объекте: Подземный газопровод высокого давления к АРП. Местонахождение:  Челябинская обл., г. Златоуст, подземный газопровод высокого давления к АРП,  протяженностью 172 м., заложение подземное. Реестровый номер: 41796  (договор № 68 от 20.01.2017 г.), а именно:  

- Демонтаж чугунного канализационного люка колодца; - Разборка бетонной горловины люка колодца; - Демонтаж железобетонной плиты перекрытия колодца размером 2,2x2,2 м; - Очистка газового колодца от грязи и ила; - Монтаж плиты перекрытия колодца ПП20-2; - Монтаж опорного кольца КО-6; - Монтаж люка; 

- Разработка грунта вручную по периметру колодца диаметром 2,2 м на  глубину 0,15 м, ширина отмостки 0,5 м;  

- Устройство щебеночной подготовки по периметру колодца диаметром 2,2  м на глубину 0,15 м, ширина 0,5 м;  

- Устройство бетонной отмостки из бетона класса В15 толщиной 150 мм  по периметру колодца, ширина отмостки 0,5 м;  

- Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ  на глубину 2,2 м, длина траншеи 15,0 м, группа грунтов 3;  

- Устройство щебеночного основания по дну траншеи из щебня фр.40-70 толщиной  0,55 м;  

- Сверление отверстий в трубе д. 159x4,5 м для перфорации по всей длине трубы; - Монтаж дренажной трубы д. 159 мм; 

- Сверление отверстий диаметром 160 мм в стенке колодца толщиной 100  мм под дренажную трубу;  

- Герметизация ввода в колодец дренажной трубы; 

- Засыпка щебнем фр.40-70 мм траншеи по все длине на толщину 0,5 м;  - Засыпка щебнем фр.20-40 мм траншеи по все длине на толщину 0,3 м;  - Обратная засыпка траншеи грунтом механизированным способом;  

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; 

- Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью  0,25 м3;  

-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;  

- Планировка площадей механизированным способом; 

- Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 на  глубину 3,0 м, группа грунтов 3 (котлован размер по низу 1,0x1,0 м, по верху  4,0x4,0 м);  

- Засыпка щебнем фр.40-70 мм котлована толщину 1,85 м; - Засыпка щебнем фр.20-40 мм котлована на толщину 0,3 м; - Обратная засыпка котлована грунтом механизированным способом; 

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками;  

- Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25; 

-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;  

- Планировка площадей механизированным способом. 

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на  объекте: Подземный газопровод среднего давления по ул.  Машиностроителей, пос. 40 лет Октября. Местонахождение: Челябинская  обл., г. Златоуст, подземный газопровод среднего давления по ул.  Машиностроителей, в пос. 40 лет Октября, протяженность 730 м. Заложение  подземное. Реестровый номер: 41795 (договор № 68 от 20.01.2017 г.), а  именно:  

- Разработка грунта экскаватором ковшом вместимостью 0,25 мЗ,  группа грунтов 3 на глубину 2,2 м, длина 3,0 м, с двух сторон газового  колодца (приямки под установку фитингов системы "Стоп-система");  

- Доработка грунта вручную в приямках, группа грунтов 3;  - Очистка участков газопровода д.219 мм от изоляции с двух сторон газового  

колодца; 

- Монтаж фитинга д.219 мм для монтажа "Стоп-системы";  - Монтаж фитинга д. 159 мм для монтажа "Стоп-системы";  - Монтаж фитинга д.32 мм для монтажа "Стоп-системы";  

- Контрольная опрессовка фитингов "Стоп-системы";  

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода 200 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего  давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 200 мм (д.219 мм  длиной 0,5 м -4 участка, д.219 мм длиной 0,2 м - 2 участка);  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода, условным диаметром 200 мм;  

- Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки,  диаметр трубопровода: 219 мм, толщина стенки до 5 мм;  

- Монтаж системы по двухстороннему перекрытию газопровода  под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;  

- Контрольная опрессовка трубопровода байпасной линии д. 100 мм; 

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода 100 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего  давления (до 0,ЗМПа),  

4к условный диаметр газопровода 100 мм; 

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность  и герметичность газопровода, условным диаметром 100 мм;  

- Перекрытие действующего газопровода при помощи оборудования  

технологии "СтопТрон"; - Демонтаж газовой задвижки д.200 мм в газовом колодце; - Демонтаж компенсатора д.200 мм в газовом колодце; - Демонтаж участка газопровода д.219 мм; - Монтаж отводов стальных д.219 мм; 

- Монтаж участка газопровода д.219 мм (в земле -8,0 м, надземная прокладка  -3,0 м);  

- Монтаж крана шарового д.200 мм в надземном исполнении;  

 - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных  липких лент газопровода д.219 мм;  

 -Монтаж футляра д.325 мм длиной 1,0 м в местах выхода газопровода из земли;  - Заделка битумом и каболкой концов футляра д.325 мм; 

- Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из  полимерных липких лент футляра д.325 мм;  

- Контрольная опрессовка смонтированного участка газопровода д.219 мм;  

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода 200 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего 

давления (до О.ЗМПа), | условный диаметр газопровода 200 мм;  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода, условным диаметром 200 мм;  

- Демонтаж оборудования системы по двухстороннему перекрытию  газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;  

- Монтаж заглушек на фитинги д.219 мм; - Монтаж заглушек на фитинги д. 159 мм; - Монтаж заглушек на фитинги д.32 мм; 

- Продувка газом смонтированного участка газопровода д.219 мм;  - Огрунтовка газопровода д.219 мм грунтом ГФ-021 на 1 раз;  

- Окраска газопровода д.219 мм эмалью ПФ-115 желтой на 2 раза;  - Засыпка приямков песком (в местах выхода газопровода из земли);  

- Демонтаж плиты перекрытия газового колодца; - Засыпка вручную грунтом колодца (2,5*2,3*2,0 ); 

- Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью  0,25 мЗ;  

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;  

- Бурение ям на глубину 1 м под фундаменты стоек ограждения; 

- Устройство фундаментов-столбов под стойки ограждения;  - Монтаж ограждения из сетчатых панелей; '  

- Огрунтовка ограждения грунтом ГФ-021 на 1 раз; 

- Окраска газопровода д.219 мм эмалью ПФ-115 желтой на 2 раза.  

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на  объекте: Газовые сети (среднего давления) квартала Орловский. Местонахождение:  

<

...> протяженностью 2815 м.,  заложение надземное. Реестровый номер: 29189 (договор № 66 от 21.11.2016 г.), а  именно:  

- Очистка газопровода д.108 мм от краски в местах врезки фитингов (д.108  мм длиной 0,5 м -2 участка, д.108 мм длиной 0,2 м - 2 участка);  

- Врезка фитинга д.108 мм для монтажа "Стоп-системы"; - Врезка фитинга д.32 мм для монтажа "Стоп-системы"; - Контрольная опрессовка фитингов "Стоп-системы"; 

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода 100 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления  (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 100 мм (д.108 мм длиной 0,5 м -2  участка, д.108 мм длиной 0,2 м - 2 участка);  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода, условным диаметром 100 мм;  

- Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр  трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм;  

- Монтаж системы по двухстороннему перекрытию газопровода под  давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;  

- Контрольная опрессовка трубопровода байпасной линии д.50 мм;  

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода 50 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления  (до 0,3 МПа), условный диаметр газопровода 50 мм;  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода, условным диаметром 50 мм;  

- Перекрытие действующего газопровода при помощи оборудования технологии  "СтопТрон»  

- Демонтаж поврежденного участка газопровода д.108 мм; - Монтаж участка газопровода д.108 мм; 

- Контрольная опрессовка смонтированного участка газопровода д.108 мм;  

монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода 100 мм;  

 - подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до  0,ЗМПа),  

условный диаметр газопровода 100 мм; 

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность  

газопровода, условным диаметром 100 мм; 

-Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, диаметр  трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм;  

- Демонтаж оборудования системы по двухстороннему перекрытию  газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;  

- Монтаж заглушек на фитинги д. 159 мм; - Монтаж заглушек на фитинги д. 32 мм; 

- Продувка газом смонтированного участка газопровода д. 108 мм;  - Огрунтовка газопровода д. 108 мм грунтом ГФ-021 на 1 раз;  

- Окраска газопровода д. 108 мм эмалью ПФ-115 желтой на 2 раза.  

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на  объекте: Газораспределительная сеть. Газоснабжение № 1. Местонахождение:  Челябинская обл., г. Златоуст, газораспределительная сеть, газоснабжение № 1,  протяженность 30 м., заложение подземное, диаметр 108 м.м. материал: сеть.  Реестровый номер: 36982 (договор № 66 от 21.11.2016 г.), а именно:  

- Отключение станции ЭХЗ; - Оповещение потребителей о прекращении подачи газа;  - Закрыть краны на вводах; 

- Закрытие задвижек д. 100 мм с установкой заглушек (в газовом колодце);  

- Освобождение газопровода от газа с продувкой воздухом, диаметром 57  мм., диаметром 76 мм., диаметром 89 мм., диаметром 108 мм., диаметром 159  мм.;  

- Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная  лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 мЗ, группа грунтов 3;  

- Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с  откосами, группа грунтов: 3;  

- Засыпка вручную приямков песком строительным; - Обратная засыпка приямков механизированным способом; 

- Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью  0,25 мЗ;  

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;  

- Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2;  

- Очистка участка подземного газопровода диаметром 108 мм в месте  врезки (длина участка 0,5 м) с двух строи;  

- Обрезка, демонтаж подземного участка газопровода диаметром 108 мм; 

- Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа  РВА с последующим демонтажом по окончании работ;  

- Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения  прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT,  KRANZ-GRUPPE;  

- Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м  машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания  203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с  

одновременным продавливанием отрезков сваренных между собой  

полиэтиленовых трубопроводов диаметром: 200 мм (труба напорная из  полиэтилена РЕ 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 200x18,2 мм);  

-Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при  автоматическом управлении процессом сварки диаметром трубопровода 200  мм;  

- Протаскивание в футляр труб диаметром: 110 мм (труба напорная из  полиэтилена РЕ 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110x10,0 мм);  

- Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом:  при автоматическом W управлении процессом сварки диаметром  

трубопровода 100 мм; 

- Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" SDR 11 110х10,0/СТ108;  - Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 200 мм;  

- Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода в ковере;  

- Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм; - Установка столбиков сигнальных опознавательных; 

- Контрольная опрессовка смонтированного участка газопровода; 

- очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр  газопровода: до 100 мм;  

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода 100 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого  давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 100 мм;  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода, условным диаметром 100 мм;  

- Демонтаж станции ЭХЗ; - Контрольная опрессовка участка наружного газопровода; 

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода 150 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого  давления (до О.ЗМПа), диаметр газопровода 57 мм  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого  давления (до 0,ЗМПа), диаметр газопровода 76 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого  давления (до О.ЗМПа), диаметр газопровода 89 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого  давления (до О.ЗМПа),  диаметр газопровода 108 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого  давления (до О.ЗМПа), диаметр газопровода 159 мм;  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода;  

- Повторный пуск многоквартирных домов; 

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода до 50 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого  давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода до 50 мм;  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода;  

- Повторный пуск жилых домов частного сектора; 

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода до 50 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого  давления (до О.ЗМПа), условный диаметр газопровода до 50 мм;  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода;  

- Повторный пуск нежилых зданий; 

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода до 50 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого  давления (до О.ЗМПа), условный диаметр газопровода до 50 мм;  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода.  

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы 

на объекте: Газораспределительная сеть. Местонахождение: Челябинская обл., г.  Златоуст, газоснабжение жилых домов 

<

...> протяженность 1 306 м., заложение надземное,  диаметр (м.м.) 108*89*76*57, материал сталь. Реестровый номер: 3690^  (договор № 66 от 21.11.2016 г.), а именно:  

- Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;  - Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор  

- Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 (серия  Нормаль Нг-011), объем фундамента 0,245 мЗ;  

 - Замена опор, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м (серия Нормаль Нг-011),  вес 1 опоры 24,018 кг;  

- Огрунтовка опор грунтом ГФ-021 на 1 раз; - Окраска опор эмалью ПФ-115 на 2 раза; 

- Правка положения опор газопровода, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м серия нормаль  Нг-011;  

- Усиление сваркой основания опор газопровода (фасонки, труба);  - Замена хомутов из круга диаметром 14 мм, длина хомута 408 мм;  - Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;  

- Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор;  

- Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12,5 (серия  Нормаль Нг-011), объем 1 фундамента 0,245 мЗ.  

Обязать 000 «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на  объекте: Газораспределительная сеть. Местонахождение: Челябинская обл., г.  Златоуст, газораспределительная сеть. Газоснабжение жилых домов по ул. Дачная,  ГРП 2. Реестровый номер: 37000 (договор № 66 от 21.11.2016 г.), а именно:  

- Демонтаж железобетонной плиты перекрытия колодца размером 2,5x2,3 м;  - Очистка газового колодца от грязи и ила;  

- Монтаж плиты перекрытия колодца ПО-4 (размер 2300x1500x200 мм);  - Монтаж деревянной крышки-щита размером 1,0x1,0м;  

- Разработка грунта вручную по периметру колодца размером 2,30x3,00  м на глубину 0,15 м, ширина отмостки 0,5 м;  

- Устройство щебеночной подготовки по периметру колодца размером  2,30x3,00м на глубину 0,15 м, ширина 0,5 м;  

- Устройство бетонной отмостки из бетона класса В15 толщиной 200 мм  по периметру колодца, ширина отмостки 0,5 м;  

- Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ  на глубину 2,2 м, длина траншеи 15,0 м, группа грунтов 3;  

- Устройство щебеночного основания по дну траншеи из щебня фр.40-70 толщиной  0,30 м;  

- Сверление отверстий в трубе д. 159x4,5 м для перфорации по всей длине трубы; - Монтаж дренажной трубы д. 159 мм; 

- Сверление отверстий диаметром 160 мм в стенке колодца толщиной 100 мм  под дренажную трубу;  

- Герметизация ввода в колодец дренажной трубы; 

- Засыпка щебнем фр.40-70 мм траншеи по все длине на толщину 0,5 м;  - Обратная засыпка траншеи грунтом механизированным способом;  

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; 

- Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью  0,25 м3;  

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10  т, работающих вне * карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;  

- Планировка площадей механизированным способом; 

- Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ  на глубину 3,0 м, группа грунтов 3 (котлован размер по низу 1,0x1,0 м, по  верху 4,0x4,0 м);  

- Засыпка щебнем фр.40-70 мм котлована толщину 1,85 м; - Засыпка щебнем фр.20-40 мм котлована на толщину 0,3 м; - Обратная засыпка котлована грунтом механизированным способом; - Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; 

- Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью  0,25 мЗ;  

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;  

- Планировка площадей механизированным способом. 

 Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на  объекте: Газовые сети (наружные). Местонахождение: Челябинская обл., г.  Златоуст, газовые сети (наружные) жилых домов по ул. Аносова, Средняя  Ветлужская, Верхняя Ветлужская, Малая Ветлужская, 3-я Тесьминская, 4-я  Тесьминская. Реестровый номер: 29185 (договор № 66 от 21.11.2016 г.), а именно:  

-Закрытие задвижки д. 100 мм и установка заглушки (газопровод низкого  давления);  

- Очистка газопровода д.89 мм от краски в местах врезки фитингов (д.89 мм  длиной 0,5 м - 1 участок, д.89 мм длиной 0,2 м -1 участок);  

- Врезка фитинга д.89 мм для монтажа "Стоп-системы"; ^ 

- Врезка фитинга д.32 мм для монтажа "Стоп-системы";  - Контрольная опрессовка фитингов "Стоп-системы";  

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,  условный диаметр газопровода 80 мм;  

- подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления  (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 80 мм (д.80 мм длиной 0,5 м -1  участок, д.80 мм длиной 0,2 м - 1 участок);  

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и  герметичность газопровода, условным диаметром 80 мм;  

- Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр  трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 5 мм;  

- Монтаж системы по перекрытию газопровода под давлением по технологии  "СтопТрон";  

- Перекрытие действующего газопровода при помощи оборудования технологии  "СтопТрон";  

- Демонтаж задвижки д.50 мм (газопровод среднего давления); - Монтаж крана шарового фланцевого д.50 мм; - Замена ИФС д.50 мм; - Замена задвижки д. 100 мм (газопровод низкого давления); 

- Замена пункта редуцирования газа (ГРПШ-13-1Н-У1);  - Пусконаладочные работы пункта редуцирования газа (ГРПШ-13-1Н-У1).  

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на  объекте: Объект: Газопровод - закольцовка среднего давления от ул. Береговая  Ветлужская до ул. Миасская. Местонахождение: 

<

...> до точки врезки в  существующий газопровод по ул. Миасская, протяженность трассы 5319 м.,  протяженность  

трубопровода 5474. Реестровый номер: 40953 (договор № 66 от 21.11.2016 г.), а  именно:  

- Правка положения опор газопровода, диаметр опор 108 мм, Н=2,2 м серия  нормаль Нг-011;  

- Усиление сваркой основания опор газопровода (фасонки, труба);  - Замена хомутов из круга диаметром 14 мм, длина хомута 408 мм;  

- Разработка грунта вручную на глубину 150 мм по периметру фундамента  на ширину 300 мм, размер фундамента 500x500 мм;  

- Устройство щебеночного основания на толщину 150 мм по периметру  фундамента на ширину 300 мм, размер фундамента 500x500 мм;  

- Обетонирование фундамента бетоном класса В15 по периметру на  ширину 300 мм, высота 300 мм.  

Требуемые работы (согласно дефектной ведомости № 8):  - Демонтаж станции катодной защиты;  

- Демонтаж кабеля; - Устройство бетонной подготовки из бетона класса В15 под постамент станции; - Отсыпка щебнем по периметру станции; 

- Монтаж преобразователя для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-Т-У1 с  постаментом;  

- Замена бокса модульного КМПн 2/4; 

- Замена автоматического выключателя 2 полюсного 32 А;  - Монтаж трубы гофрированной диаметром 50 мм "ДКС";  - Затягивание кабеля ВВГ 3x4 в гофротрубу диаметром 50 мм;  

- Огрунтовка грунтом ГФ-021 на 1 слой полосы заземления, стойки СКИП; - Окраска эмалью ПФ-115 на 2 слоя полосы заземления, стойки СКИП; -Наклейка знаков безопасности 

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на  объекте: Газовые сети. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст,  

ул. Восточная, Мебельная, Трудовая. Спортивная, протяженность 2337 м.,  заложение наземное. Реестровый номер: 23202 (договор № 66 с^р  21.11.2016 г.), а именно:  

- Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;  - Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор;  

- Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 (серия  Нормаль Нг-011), объем 1 фундамента 0,245 мЗ;  

- Замена опор, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м (серия Нормаль Нг-011), вес 1 опоры  24,018 кг;  

-Огрунтовка опор грунтом ГФ-021 на 1 раз; - Окраска опор эмалью ПФ-115 на 2 раза; 

- Правка положения опор газопровода, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м серия нормаль  Нг-011;  

- Усиление сваркой основания опор газопровода (фасонки, труба);  - Замена хомутов из круга диаметром 14 мм, длина хомута 408 мм;  - Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;  

- Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор;  

- Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 (серия  Нормаль Нг-011), объем 1 фундамента 0,245 м3.  

Производство по делу в данной части прекратить. Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Златоустгазстрой» в пользу Органа местного самоуправления «Комитет по  управлению имуществом Златоустовского городского округа» убытки по  оплаченному ремонту в размере 111 523 руб. 20 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Златоустгазстрой» в доход федерального бюджета сумму государственной  пошлины в размере 4 346 руб.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья Н.В. Гордеева 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно  получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://18aas.arbitr.ru