Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-5224/2021

«10»

августа

2021 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

рассмотрев в упрощенном порядке дело по иску ООО "КАЛИНИНГРАДФУНДАМЕНТСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "СК "РЕАЛСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании 220 520 рублей

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНИНГРАДФУНДАМЕНТСПЕЦСТРОЙ" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СК "РЕАЛСТРОЙ"  о взыскании основного долга  в сумме 220 520 рублей.

Дело рассмотрено в упрощенном порядке.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен договор субподряда от 20.04.2020 года № 20/04/СП. 

По условиям договора ООО "КАЛИНИНГРАДФУНДАМЕНТСПЕЦСТРОЙ" (субподрядчик) обязалось выполнить работы по устройству шпунтованного ограждения на территории строительной площадки, расположенной по адресу: 

<

...> на объекте: «К3.2 Резервуары аварийного слива», а ООО "СК "РЕАЛСТРОЙ" (подрядчик) обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 3.1 договора стоимость работ согласована 220 520 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 договора срок выполнения работ 30.11.2020 года.

В соответствии с пунктом 4.3 договора расчет за выполненные работы в размере 95% производится в течение 10 дней с даты подписания акта выполненных работ.

В   соответствии с пунктом 4.6 договора 50% от гарантийного удержания уплачивается в течение 20 дней по результатам испытаний и пуско-наладочных работ; оставшаяся часть оплачивается после принятия объекта приемочной комиссией.

   Из материалов дела следует, что подрядчик передал заказчику акт о приемке выполненных работ от 30.11.2020 года № 1 на сумму 220 520 рублей.

Письмом от 19.02.2021 года подрядчик направил в адрес заказчика исполнительную документацию и акт.

14.04.2021 года подрядчик направил в адрес заказчика претензию об оплате работ, указав, что  сроки оплаты по пунктам 4.3, 4.6, 4.7 договора уже наступили.

В связи с тем, что работы не оплачены, подрядчик обратился в суд с настоящим иском.

Суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

     По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

  В силу статьи 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

  В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

  Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ при отказе одной из сторон от подписания акта приемки работ в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

При этом бремя доказывания обоснованности отказа от приемки результата работ возлагается на заказчика.

Суд извещал ответчика по адресу, указанному в договоре и в ЕГРЮЛ.

Ответчик мотивированных возражений в  отношении работ и сроков оплаты не представил.Доказательств оплаты работ ответчиком также не представлено.

Требования истца подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310 ГК РФ, положений договора. 

Руководствуясь статьями  167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК "РЕАЛСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "КАЛИНИНГРАДФУНДАМЕНТСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) основной долг по договору субподряда от 20.04.2020 года № 20/04/СП в сумме 220 520 рублей, расходы по госпошлине в сумме 7410 рублей.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяО.Н. Шкутко