АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-147509/19-27-1240

город Москва

19 ноября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 октября 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 19 ноября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ" (350911, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 231201001, Дата регистрации 25.06.2008)

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" (107996, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, , ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 770101001, Дата регистрации 19.08.2008)

третье лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" (109507, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ФЕРГАНСКАЯ, 25, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 772101001,  Дата регистрации 17.09.2008)

о взыскании 1 925 823,72 рублей по договору №777//08108/378 ДС 16-60 от 25.08.2016 года,

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 по дов. 23АА7277388 от 15.08.2017; 

от ответчика: ФИО3 по дов. №77АГ0104387

от третьего лица: не явился, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ", с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ", о взыскании задолженности по договору подряда №777//08108/378 ДС 16-60 от 25.08.2016г. в размере 1 925 823,72 рублей.

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме, представил письменные пояснения на отзыв третьего лица.

Ответчик возражал против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, о дате, времени и месте проведения судебного заседания извещено надлежащим образом, представил отзыв на исковое заявление. 

Дело рассмотрено в отсутствие третьего лица в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 25.08.2016г. между АО «Атомэнергопроект» (Генподрядчик) и ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» (Подрядчик) заключен договор подряда № 777//08108/378 ДС 16-60, согласно условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства выполнить электро-монтажные работы по сооружению объекта Электроблока №2 «20UJA Реакторное здание. Электромонтажные работы. Монтаж систем автоматического пожаротушения и АСУ ТП», по адресу: г. Нововоронеж, Промплощадка и сдать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями договора.

Согласно п. 3.1 договора, стоимость работ по договору определена на основании Расчета цены Работ и услуг (приложение № 3 к договору) в соответствии с Порядком определения Цены работ и услуг (приложения №4 к договору) и составляет 1 850 000 000 руб.

Цена работ по договору в текущем уровне цен является приблизительной, уточняется в соответствии с порядком определения Цены работ и услуг.

Дополнительным соглашением №12 от 31.10.2018 г. ответчик поручил истцу выполнить работы по сметам №W2P.D.120.2.0UJL&&&&&&&.031.TL.0007 на  сумму 82 665 (в базисном уровне цен 2000 г.) и №W2P.D.120.2.0UJL&&&&&&&.0031.TL.0024 на сумму 12 989 (в базисном уровне цен 2000 г.).

В соответствии с п. 19.2 Договора «Сдача-приёмка выполненных строительно-монтажных работ за текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по:

«Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а);

Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) .

Журнал учета выполненных работ» (форма КС-6а) и Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) за текущий период Подрядчик предоставляет Генподрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом.»

В соответствии с п. 4.2. «Генподрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ согласно договору, после сдачи Подрядчиком исполнительной и отчетной документации в соответствии с условиями Договора. Датой приемки работ считается дата подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).»

В соответствии с п. 4.9 Договора Генподрядчик осуществляет оплату, выполненных работ по договору в течении 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами документов, указанных в п.4.7 договора и получения оригиналов счета-фактуры и счета, но не ранее получения соответствующих денежных средств от Заказчика.

Согласно п. 19.4. Договора Сдача-приемка выполненных работ за текущий отчетный период будет осуществляться ежемесячно путем оформления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик выполнил работы за период с 01.05.2017г. по 30.06.2017г. 

14.11.2017г. во исполнение п. 20.2. 4.7 Договора сопроводительным письмом №1190/49-01.1 Истец направил Ответчику документы, подтверждающие выполнение работ, что подтверждается почтовыми квитанциями, опись и выписка с сайта «Почта России» о вручении прилагается). Ответа в отношении указанного письма, либо мотивированного отказа от приемки выполненных работ Истцу от Ответчика не поступало.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии со ст.ст.309, 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Поскольку ответчик в нарушение условий договора приемку работ не осуществил, акты без законных на то оснований не подписал, то в соответствии со ст. 753 ГК РФ работы, указанные в односторонних актах считаются, принятыми ответчиком и подлежат оплате.

Каких-либо доказательств фактического неисполнения спорных работ ответчиком в материалы дела не представлено, фактическое выполнение спорных работ подтверждается представленными в дело доказательствами, наличие результата работ ответчиком не оспорено.

Поскольку доказательств оплаты задолженности в размере 1 925 823,72 руб. ответчиком не представлено, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что исковое заявление подлежит удовлетворению.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве, судом рассмотрены и отклонены как недоказанные и необоснованные, противоречащие представленным истцом доказательствам.

Довод ответчика о том, что срок исполнения обязательства по оплате выполненных работ, возникшего из договора №777//08108/378 ДС 16-60 от 25.08.2016 г., поставлен сторонами в зависимости от «получения денежных средств от заказчика», противоречит российскому законодательству.

П. 4.9. договора предусмотрено: Генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ по договору в течении 30 банковских дней с даты подписания сторонами документов указанных в п. 4.7 и получения оригиналов счета-фактуры и счета, но не ранее получения соответствующих средств от заказчика.

В соответствии со ст. 190 ГК РФ, установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.         

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

В данном случае имело место указание в пункте 4.9 договора на получения денежных средств от заказчика как на событие, которое не должно неизбежно наступить, что в смысле ст. 190 ГК РФ не является согласованием срока оплаты.  

В отношении довода о том, что спорные работы были включены истцом в состав накладных расходов при сдаче иных работ, суд считает необходимым отметить, что исходя из пункта 1.2. «МДС81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 №6 – «Накладные расходы как часть сметной себестоимости строительно – монтажных работ представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием».

В рассматриваемом споре, истцом предъявлены к ответчику требования по оплате выполненных работ, которые были разбиты на виды и подвиды с указанием соответствующих расценок. Кроме того, локальные сметы содержат самостоятельную графу «Накладные расходы». 

- по локальной смете №W2P.D.120.2.0UJL&&&&&&&.031.TL.0007 – лист 7;

- по локальной смете №W2P.D.120.2.0UJL&&&&&&&.0031.TL.0024 – лист 9;

На основании главы 4 применении нормативов накладных расходов при составлении сметной документации на строительство объектов и расчетах за выполненные работы, «МДС81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 №6 – при использования укрупненных нормативов накладных расходов по видам строительства начисление накладных расходов производится в конце сметы (расчета) за итогом прямых затрат. В случае отсутствия нормативов накладных расходов по видам работ при строительстве атомных электростанций допускается применение укрупненного норматива накладных расходов по виду строительства. Сама сущность накладных расходов не подразумевает виды и подвиды работ с указанием применимых в ходе выполнения работ материалов и расценок по каждому из них. Судом учтено отсутствие формирования сметных расчетов по накладным расходам.

Данные виды затрат закладываются сторонами сразу при формирование локальных сметных расчетов на выполнение поручаемых работ строительного подряда. 

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 71, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 1 925 823 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот двадцать три) рубля 72 копейки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 32 258 (тридцать  две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

            Судья                   В.И. Крикунова