АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А84-1886/19

10 марта 2020 года

город Севастополь

Полный текст судебного акта изготовлен 10.03.2020

Резолютивная часть судебного акта оглашена 04.03.2020

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Архиповой С.Н.,

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ООО «Баутерм-Юг» ИНН 

<

***>, г. Симферополь

к ООО «Доринвест-Крым» ИНН 

<

***> г. Симферополь

о взыскании задолженности по субподрядным контрактам от 15.09.2017, 15.01.2018, 22.02.2018, 07.08.2018,

встречное исковое заявление ООО «Доринвест-Крым»

к ООО «Баутерм-Юг»

о взыскании неустойки по субподрядным контрактам от 15.09.2017, 15.01.2018, 22.02.2018, 07.08.2018,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2,

от ответчика – ФИО3,

у с т а н о в и л :

19.04.2020 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратилось общество с ограниченной ответственностью «Баутерм-Юг» (истец, Субподрядчик) с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Доринвест-Крым» (ответчик, Генподрядчик) задолженности по субподрядным контрактам №15.09-17П от 15.09.2017, №4-18 от 15.01.2028, №26-18 от 22.02.2018, №27-18 от 22.02.2018, №79-18 от 07.08.2018 в сумме 9 783 399,71 руб. долга, 41 846,423 руб. неустойки, 178 450,92 руб. неустойки за несвоевременную оплату счетов (размер требования уточнен истцом и принят судом к рассмотрению).

Ответчик, не согласившись с иском, 12.08.2019 предъявил встречный иск, в котором просит взыскать с истца сумму пени за просрочку выполнения обязательств по субподрядным контрактам в размере 2 604 117,83 руб. (размер требования уточнен ответчиком и принят судом к рассмотрению).

Определением суда от 05.06.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, на стороне истца привлечен Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Выслушав доводы сторон, исследовав и оценив представленные письменные доказательства, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в полном объеме и встречного иска в части.

Из материалов дела следует, что 15.09.2017 между истцом как Субподрядчиком и ответчиком как Генподрядчиком был заключен субподрядный контракт №15.09-17П, по условиям которого Субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт 67 Н-190 «пр-кт Октябрьской революции (ПОР) (устройству наружного освещения, контактной сети и светофоров), а Генподрядчик – принять и оплатить их. 

Согласно п.2.1. договора цена контракта составляет 67 185 899,52 руб.. 

В соответствии с п.2.4.4. контракта расчет за выполненные Субподрядчиком и принятые Генподрядчиком работы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных Подрядчиком счетов, счетов-фактур. 

По условиям п.5.1. контракта Субподрядчик не позднее следующего дня послу окончания работ направляет в адрес Генподрядчика извещение о готовности работ к сдаче. Одновременно с указанным извещением Субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации, акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, Общий журнал работ, Журнал входного контроля поставляемые материалов и изделий, сертификаты, паспорта, акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату выполненных работ. 

Приемка выполненных работ осуществляется Генподрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется Актом приема-передачи. Датой надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с п.7.2 контракта в случае просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.

Во исполнение условий контракта  Субподрядчик выполнил работы по Контракту на сумму 65 156 225,94 рублей, о чем свидетельствуют Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленные счета на оплату в адрес Генподрядчика: №292 от 18.09.2017 на сумму 500 000,00 рублей - авансовый платеж на выполнение работ; №473 от 26.12.2017 на сумму 1 000 000,00 руб. - авансовый платеж на выполнение работ; №482 от 26.12.2017 на сумму 25 217 152,23 рублей - оплата за выполненные работы по Контракту на сумму 26 717 152,23 рублей (с учетом авансовых платежей и вычетом 15% - п. 2.4.5.); №62 от 26.02.2018 на сумму 700 000,00 рублей - авансовый платеж на выполнение работ; №67 от 28.02.2018 на сумму 2 455 935,78 рублей - оплата за выполненные работы на сумму 3 712 865,62 рублей (с учетом авансового платежа); №107 от 15.03.2018 на сумму 12 807 123,21 рублей - оплата за выполненные работы на сумму 15 067 203,78 рублей (с учетом вычета 15% - п. 2.4.5.); №108 от 26.03.2018 на сумму 2 518 668,01 рублей - оплата за выполненные работы на сумму 2 963 138,84 рублей (с учетом вычета 15% - п. 2.4.5.); №211 от 08.06.2018 на сумму 5 156 974,77 рублей - оплата за выполненные работы на сумму 6 067 029,15 рублей (с учетом вычета 15% - п. 2.4.5.); №404 от 19.07.2018 на сумму 10 628 836,32 рублей - оплата за выполненные работы (с учетом вычета 15% - п.2.4.5.).

Оплата вышеуказанных счетов, выставленных Субподрядчиком за выполненные работы по Контракту, производилась поэтапно в следующие сроки:

- 18.09.2017 - 500 000,00 рублей - авансовый платеж, платежное поручение №795731;

- 26.12.2017 - 1 000 000,00 рублей - авансовый платеж, платежное поручение №800077;

- 29.12.2017-21 209 579,39 рублей, платежное поручение № 800163;

- 26.02.2018 - 700 000,00 рублей - авансовый платеж, платежное поручение №292;

- 01.03.2018 -2 455 935,78 рублей, платежное поручение №334;

- 06.04.2018 — 10 000 000,00 рублей, платежное поручение №591;

- 13.04.2018 - 1 000 000,00 рублей, платежное поручение №711;

- 24.04.2018 - 1 807 123,21 рублей, платежное поручение №917;

- 09.06.2018 - 1 500 000,00 рублей, платежное поручение №1281;

- 14.06.2018 - 500 000,00 рублей, платежное поручение №1333;

- 21.06.2018-518 668,01 рублей, платежное поручение №1392;

- 21.06.2018-2 000 000,00 рублей, платежное поручение №1391;

- 29.06.2018 - 1 000 000,00 рублей, платежное поручение №1460;

- 24.07.2018 - 5 000 000,00 рублей, платежное поручение №1734;

- 01.08.2018 - 2 500 000,00 рублей, платежное поручение №1825;

- 08.08.2018 - 1 600 000,00 рублей, платежное поручение №1889;

- 01.10.2018 - 1 000 000,00 рублей, платежное поручение №2479;

- 09.11.2018 - 1 091 485,65 рублей, платежное поручение №273660.

Всего оплачено работ на общую сумму 65 156 225,93 рублей, в т. ч. 18% НДС, в т. ч. 15%, предусмотренные п. 2.4.5. Контракта.

Общая сумма, за оказанные генподрядные услуги от суммы выполненных работ по Контракту в размере 15%, составила 9 773 433,89 рублей (в т.ч. 18% НДС), что подтверждается подписанными актами.

При этом Генподрядчик не выполнил надлежащим образом обязательство по оплате некоторых счетов за выполненные работы предусмотренное пунктом 2.4.4. (срок осуществления платежа 7 рабочих дней), а именно:

- 06 апреля 2018 года платежным поручением №591 произведена оплата счета №107 от 15.03.2018 на сумму 10 000 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 11 календарных дней с 27.03.2018 по 06.04.2018)

- 13 апреля 2018 года платежным поручением №711 произведена оплата счета №107 от 15.03.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 18 календарных дней с 27.03.2018 по 13.04.2018)

- 24 апреля 2018 года платежным поручением №917 произведена оплата счета №107 от 15.03.2018 на сумму 1 807 123,21 рублей (нарушение сроков оплаты 29 календарных дней с 27.03.2018 по 24.04.2018)

- 09 июня 2018 года платежным поручением №1281 произведена оплата счета №108 от 09.06.2018 на сумму 1 500 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 66 календарных дней с 05.04.2018 по 09.06.2018)

- 14 июня 2018 года платежным поручением №1333 произведена оплата счета №108 от 09.06.2018 на сумму 500 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 71 календарных дней с 05.04.2018 по 14.06.2018)

- 21 июня 2018 года платежным поручением №1392 произведена оплата счета №108 от 09.06.2018 на сумму 518 668,01 рублей (нарушение сроков оплаты 78 календарных дней с 05.04.2018 по 21.06.2018)

- 21 июня 2018 года платежным поручением №1391 произведена оплата счета №211 от 08.06.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 2 календарных дня с 20.06.2018 по 21.06.2018)

- 29 июня 2018 года платежным поручением №1460 произведена оплата счета №211 от 08.06.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 10 календарных дней с 20.06.2018 по 29.06.2018)

- 24 июля 2018 года платежным поручением №1734 произведена оплата на сумму 5 000 000,00 рублей, в том числе и оплата счета №211 от 08.06.2018 на сумму 2 156 974,77 рублей (нарушение сроков оплаты 35 календарных дней с 20.06.2018 по 24.07.2018);

- 01 августа 2018 года платежным поручением №1825 произведена оплата счета №404 от 19.07.2018 на сумму 2 500 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 2 календарных дня с 31.07.2018 по 01.08.2018);

- 08 августа 2018 года платежным поручением №1889 произведена оплата счета №404 от 19.07.2018 на сумму 1 600 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 9 календарных дней с 31.07.2018 по 08.08.2018)

- 01 октября 2018 года платежным поручением №2479 произведена оплата счета №404 от 19.07.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 63 календарных дней с 31.07.2018 по 01.10.2018)

- 09 ноября 2018 года платежным поручением №273660 произведена оплата счета №404 от 19.07.2018 на сумму 1 091 485,65 рублей (нарушение сроков оплаты 102 календарных дней с 31.07.2018 по 09.11.2018).

Согласно ст. 394 Гражданского кодекса РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Договором может быть установлена неустойка.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку Контрактом не установлен размер процентов (неустойки, пени, штрафа и т.д.), то применению подлежат действующие нормы ст. 395 ГК РФ.

Таким образом, неустойка за неисполнение денежного обязательства Генподрядчиком по Контракту № 15.09-17П от 15.09.2017 г. составляет (расчет процентов произведен по правилам статьи 395 ГК РФ):

1.1. неустойка за неисполнение денежного обязательства Генподрядчиком согласно акта о приемке выполненных работ №3 от 15.03.2018 (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 15.03.2018 (по форме КС-3), счета на оплату №107 от 15.03.2018 составляет (исходя из суммы платежа по акту 15 067 203,28 рублей минус 2 260 080,57 руб. (15 % согласно п. 2.4.5. Контракта) = 12 807 123,21 руб. (сумма счета), дата просрочки с 27.03.2018:

Задолженность, руб.

Период просрочки

Оплата

Процентная

ставка

Дней в году

Проценты, руб.

с

по

ДНИ

сумма, руб.

дата

[П

[21

[31

[41

[51

[61

[71

[81

ПМ4М71/[81

12 807 123,21

27.03.2018

06.04.2018

11

0

-

7,25%

365

27 982,69

2 807 123,21

07.04.2018

13.04.2018

7

10 000 000,00

06.04.2018

7,25%

365

3 903,05

1 807 123,21

14.04.2018

24.04.2018

11

1 000 000,00

13.04.2018

7,25%

365

3 948,44

Итого:

29

11 000 000

7,25%

35 834,18

1.2. неустойка за неисполнение денежного обязательства Генподрядчиком согласно акта о приемке выполненных работ №4 от 26.03.2018 (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 26.03.2018 (по форме КС-3), счета на оплату №108 от 26.03.2018 составляет (исходя из суммы платежа по акту 2 963 138,84 рублей, минус 444 470,83 руб. (15 % согласно п. 2.4.5. Контракта) = 2 518 668,01 руб. (сумма счета), дата просрочки с 05.04.2018:

Задолженность, руб.

Период просрочки

Оплата

Процентная ставка

Дней в году

Проценты, руб.

с

по

дни

сумма, руб.

дата

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[1]х[4]х[7]/[8]

2 518 668.01

05.04.2018

09.06.2018

66

0

-

7.25%

365

33 018.70

1 018 668,01

10.06.2018

14.06.2018

5

1 500 000,00

09.06.2018

7,25%

365

1 011,69

518 668,01

15.06.2018

21.06.2018

7

500 000,00

14.06.2018

7,25%

365

721,16

Итого:

78

2 000 000

7,25%

34 751,55

1.3. неустойка за неисполнение денежного обязательства Генподрядчиком согласно акта о приемке выполненных работ №5 от 18.05.2018 (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 18.05.2018 (по форме КС-3), счета на оплату №211 от 08.06.2018 составляет (исходя из суммы платежа по акту 6 067 029,15 рублей, минус 910 054,37 руб. (15 % согласно п. 2.4.5. Контракта) = 5 156 974,77 руб. (сумма счета), дата просрочки с 20.06.2018:

Задолженность, руб.

Период просрочки

Оплата

Процентная ставка

Дней в году

Проценты, руб.

с

по

дни

сумма, руб.

дата

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[1]х[4]х[7]/[8]

5 156 974,77

20.06.2018

21.06.2018

2

0

-

7,25%

365

2 048,66

3 156 974,77

22.06.2018

29.06.2018

8

2 000 000,00

21.06.2018

7,25%

365

5 016,56

2 156 974,77

30.06.2018

24.07.2018

25

1 000 000,00

29.06.2018

7,25%

365

10711

Итого:

35

3 000 000

7,25%

17 776,22

1.4. неустойка за неисполнение денежного обязательства Генподрядчиком согласно акта о приемке выполненных работ №6 от 17.07.2018 (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат №6 от 17.07.2018 (по форме КС-3), счета на оплату №404 от 19.07.2018 составляет (исходя из суммы платежа 10 628 836,32 рублей, минус 1 594 325,45 руб. (15 % согласно п. 2.4.5. Контракта), минус 2 843 025,23 (вовремя оплаченная сумма) = 6 191 85,64 руб., дата просрочки с 31.07.2018:

Задолженность, руб.

Период просрочки

Оплата

Процентная

ставка

Дней в году

Проценты, руб.

с

по

дни

сумма, руб.

дата

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[1]х[4]х[7]/[8]

6 191 485,64

31.07.2018

01.08.2018

2

0

-

7,25%

365

2 459,63

3 691 485,64

02.08.2018

08.08.2018

7

2 500 000,00

01.08.2018

7,25%

365

5 132,68

2 091 485,64

09.08.2018

16.09.2018

39

1 600 000,00

08.08.2018

7,25%

365

16 201,85

2 091 485,64

17.09.2018

01.10.2018

15

0

-

7,50%

365

6 446,36

1 091 485,64

02.10.2018

09.11.2018

39

1 000 000,00

01.10.2018

7,50%

365

8 746,84

Итого:

102

5 100 000

7,38%

38 987,36

Общая сумма неустойки по Контракту № 15.09-17П от 15.09.2017 составляет 127 349,31 рублей.

15.01.2018 между истцом как Субподрядчиком и ответчиком как Генподрядчиком был заключен субподрядный контракт №4-18, по условиям которого Субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт а/д 67 Н-264 «генерала Острякова от «Славинского» рынка до ул. Генерала Хрюкина» (дорога дублер) (устройство наружного освещения), а Генподрядчик – принять и оплатить их. 

Согласно п.2.1. договора цена контракта составляет 6 049 735,86 руб.. 

В соответствии с п.2.4.3. контракта расчет за выполненные Субподрядчиком и принятые Генподрядчиком работы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных Подрядчиком счетов, счетов-фактур. 

По условиям п.5.1. контракта Субподрядчик не позднее следующего дня послу окончания работ направляет в адрес Генподрядчика извещение о готовности работ к сдаче. Одновременно с указанным извещением Субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации, акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, Общий журнал работ, Журнал входного контроля поставляемые материалов и изделий, сертификаты, паспорта, акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату выполненных работ. 

Приемка выполненных работ осуществляется Генподрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется Актом приема-передачи. Датой надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с п.7.2 контракта в случае просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.

Во исполнение условий контракта Субподрядчик выполнил работы на сумму 5 225 902,01 рублей, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также в адрес Генподрядчика были выставлены счета на оплату: №5 от 23.03.2018 на сумму 973 863,99 рублей и №2 от 03.05.2018 на сумму 4 252 038,02 рублей. Оплата вышеуказанных счетов производилась в следующие сроки: 23.04.2018 - 827 784,39 рублей, платежное поручение №812; 17.05.2018 - 3 614 232,31 рублей платежное поручение №1118.

Всего оплачено работ на общую сумму 5 225 902,01 рублей  с учетом вычета 15%, предусмотренных п. 2.4.4. контракта, в общей сумме 783 885,30 руб. по счету №5 от 23.03.2018 - 146 079,60 рублей и по счету №2 от 03.05.2018 г. - 637 805,70 рублей.

При этом Генподрядчик не выполнил надлежащим образом обязательство по оплате выполненных работ по Контракту предусмотренное пунктом 2.4.3. (срок осуществления платежа 7 рабочих дней), а именно:

23 апреля 2018 года платежным поручением №812 произведена оплата на сумму 827 784,39 рублей (нарушение сроков оплаты 20 календарных дней с 04.04.2018 по 23.04.2018),

17 мая 2018 года платежным поручением №1118 произведена оплата на сумму 3 614 232,31 рублей (нарушение сроков оплаты 2 календарных дня с 16.05.2019 по 17.05.2018).

Расчет процентов по правилам ст. 395 ГК РФ составляет 

Оплачено по платежному поручению, рублей

Период просрочки

Формула

Неустойка, рублей

с

по

дней

Неустойка, образовавшаяся за несвоевременную оплату по платежному поручению № 812 от 23.04.2018

827 784,39

04.04.2018

23.04.2018

20

827 784,39 х 7,25% : 365 х 20

3 288,46

Неустойка, образовавшаяся за несвоевременную оплату по платежному поручению № 1118 от 17.05.2018

3 614 232,31

16.05.2018

17.05.2018

2

3 614 232,31 х 7,25 : 365 x2

1 435,79

Сумма неустойки:

4 724,25

22.02.2018 между истцом как Субподрядчиком и ответчиком как Генподрядчиком был заключен субподрядный контракт №26-18, по условиям которого Субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт а/

<

...>» (устройство наружного освещения ), а Генподрядчик – принять и оплатить их. 

Согласно п.2.1. договора цена контракта составляет 8 020 375,73 руб.. 

В соответствии с п.2.4.3. контракта расчет за выполненные Субподрядчиком и принятые Генподрядчиком работы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных Подрядчиком счетов, счетов-фактур. 

По условиям п.5.1. контракта Субподрядчик не позднее следующего дня послу окончания работ направляет в адрес Генподрядчика извещение о готовности работ к сдаче. Одновременно с указанным извещением Субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации, акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, Общий журнал работ, Журнал входного контроля поставляемые материалов и изделий, сертификаты, паспорта, акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату выполненных работ. 

Приемка выполненных работ осуществляется Генподрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется Актом приема-передачи. Датой надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с п.7.2 контракта в случае просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.

Во исполнение условий Субподрядчик выполнил работы по Контракту на сумму 7 554 954,49 руб., что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

29 декабря 2018 года платежным поручением №274349 произведена оплата счета №591 от 25.12.2018 г. на сумму 2 000 000,00 рублей (нарушений сроков оплаты нет),

17 января 2019 года платежным поручением №35 произведена оплата счета №591 от 25.12.2018  на сумму 1 500 000,00 рублей (нарушение сроков оплаты 7 календарных дней с 11.01.2019. по 17.01.2019).

Задолженность перед Субподрядчиком составляет сумму 4 054 954,49 рублей.

Неустойка за неисполнение денежного обязательства Генподрядчиком по контракту составляет (расчёт процентов по правилам статьи 395 ГК РФ):

Неустойка на задолженность, образовавшуюся за неоплату выставленного счета № 591 от 25.12.2018

Задолженность, руб.

Период просрочки

Оплата

Процентная ставка

Дней в году

Проценты, руб.

с

по

дни

сумма, руб.

дата

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[1]х[4]х[7]/[8]

4 023 719,44

11.01.2019

17.01.2019

7

2 000 000

29.12.2018

7,75%

365

5 980,46

2 523 719,44

18.01.2019

04.03.2019

46

1 500 000

17.01.2019

7,75%

365

24 649,48

Сумма неустойки:

53

3 500 000

7,75%

30 629,94

22.02.2018 между истцом как Субподрядчиком и ответчиком как Генподрядчиком был заключен субподрядный контракт №27-18, по условиям которого Субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт а/

<

...>» (устройство наружного освещения ), а Генподрядчик – принять и оплатить их. 

Согласно п.2.1. договора цена контракта составляет 10 052 812,53 руб.. 

В соответствии с п.2.4.3. контракта расчет за выполненные Субподрядчиком и принятые Генподрядчиком работы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных Подрядчиком счетов, счетов-фактур. 

По условиям п.5.1. контракта Субподрядчик не позднее следующего дня послу окончания работ направляет в адрес Генподрядчика извещение о готовности работ к сдаче. Одновременно с указанным извещением Субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации, акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, Общий журнал работ, Журнал входного контроля поставляемые материалов и изделий, сертификаты, паспорта, акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату выполненных работ. 

Приемка выполненных работ осуществляется Генподрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется Актом приема-передачи. Датой надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с п.7.2 контракта в случае просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.

Во исполнение условий контракта Субподрядчик выполнил работы на сумму 9 823 657,43 рублей, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также в адрес Генподрядчика были выставлены счета на оплату №23 от 18.09.2018. на сумму 9 031 646,07 рублей и №29 от 20.12.2018 на сумму 792 011,36 рублей. Оплата вышеуказанных счетов производилась поэтапно: 07.09.2018 – 500 000 руб., платежное поручение №2223, 01.10.2018 – 4 602 654 руб. – платежное поручение №2478, 19.10.2018 – 1 000 000 руб. – платежное поручение №2729, 09.11.2018 - 574 245,16 рублей, платежное поручение № 273661; 27.12.2018 - 673 209,65 рублей, платежное поручение № 274288.

Всего оплачено работ на общую сумму 7 350 108,81 рублей с учетом вычета 15%, предусмотренных п. 2.4.4. контракта, в сумме 1 354 746,91 руб. по счету №23 от 18.09.2018 и 118 801,70 руб. по счету №29 от 20.12.2018. Генподрядчик не выполнил надлежащим образом обязательство по оплате выполненных работ по Контракту предусмотренное пунктом 2.4.3., а именно по счету № 23 от 18.09.2018.

Таким образом, был нарушен не только срок осуществления платежа (7 рабочих дней), но и возникла задолженность перед Субподрядчиком на сумму 1 000 000 рублей (один миллион рублей).

Неустойка за неисполнение денежного обязательства Генподрядчиком по контракту составляет (исходя из суммы платежа 9 031 646,07 руб. (сумма счета) - 1 354 746,91 руб. (15 % согласно п. 2.4.4. Контракта) - 500 000 руб. (вовремя оплаченная сумма) = 7 176 899,16 руб.), дата просрочки с 28.09.2018 (расчёт процентов по правилам статьи 395 ГК РФ) :

Задолженность, руб.

Период просрочки

Оплата

Процентная

ставка

Дней в году

Проценты, руб.

с

по

дни

сумма, руб.

дата

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[1]х[4]х[7]/[8]

7 176 899,16

28.09.2018

01.10.2018

4

0

-

7,50%

365

5 898,82

2 574 245,16

02.10.2018

19.10.2018

18

4 602 654

01.10.2018

7,50%

365

9 521,18

1 574 245,16

20.10.2018

09.11.2018

21

1 000 000

19.10.2018

7,50%

365

6 792,98

1 000 000

10.11.2018

16.12.2018

37

574 245,16

09.11.2018

7,50%

365

7 602,74

1 000 000

17.12.2018

04.03.2019

78

0

-

7,75%

365

16 561,64

Итого:

158

6 176 899,16

7,62%

46 377,36

07.08.2018 между истцом как Субподрядчиком и ответчиком как Генподрядчиком был заключен субподрядный контракт №79-18, по условиям которого Субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 67 Н-120 «ул. Яблочкова» (устройство наружного освещения), а Генподрядчик – принять и оплатить их. 

Согласно п.2.1. договора цена контракта составляет 5 601 413,04руб.. 

В соответствии с п.2.4.3. контракта расчет за выполненные Субподрядчиком и принятые Генподрядчиком работы осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных Подрядчиком счетов, счетов-фактур. 

По условиям п.5.1. контракта Субподрядчик не позднее следующего дня послу окончания работ направляет в адрес Генподрядчика извещение о готовности работ к сдаче. Одновременно с указанным извещением Субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации, акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, Общий журнал работ, Журнал входного контроля поставляемые материалов и изделий, сертификаты, паспорта, акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату выполненных работ. 

Приемка выполненных работ осуществляется Генподрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется Актом приема-передачи. Датой надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с п.7.2 контракта в случае просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.

Во исполнение условий контракта  Субподрядчик выполнил работы по контракту на сумму 5 508 147,88 рублей, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Генподрядчиком была произведена предоплата настоящего контракта на сумму 1 000 000,00 рублей двумя платежными поручениями: №273943 от 06.12.2018 на сумму 200 000,00 рублей и  274145 от 19.12.2018 на сумму 800 000,00 рублей. Генподрядчик не выполнил надлежащим образом обязательство по оплате выполненных работ по контракту. Задолженность перед Субподрядчиком составляет сумму 4 508 147,88 рублей.

Неустойка за неисполнение денежного обязательства Генподрядчиком по контракту составляет (расчет процентов по правилам ст. 395 ГК РФ)

Долг по счету, рублей

Период просрочки

Формула

Неустойка, рублей

с

по

дней

Неустойка на задолженность, образовавшуюся за неоплату выставленного счета № 28 от 24.12.2018

91 581,33

13.02.2019

04.03.2019

20

91 581,33 x 7,75%: 365 x20

388,91

Неустойка на задолженность, образовавшуюся за неоплату выставленного счета № 29 от 26.12.2018

2 833 019,25

15.02.2019

04.03.2019

18

2 833 019,25 x7,75 : 365 х 18

10 827,57

Сумма неустойки:

И 216,48

В своих возражения ответчик пояснил, что отрицает объем работ, указанный в актах, представленных истцом, поскольку работы по контракту №79-18 проводились не ООО «Баутерм-Юг». 

Суд неоднократно предлагал сторонам назначить по делу судебную экспертизу в целях определения объема и стоимости работ, выполненных истцом на объектах ответчика. Однако, такого согласия не было получено. Поэтому дело рассмотрено по имеющимся доказательствам с учетом внутреннего убеждения суда.

Так, то обстоятельство, что работы выполнены истцом в заявленном им размере, подтверждается совокупностью доказательств – актами освидетельствования скрытых работ №№1-6 по контракту №26-18, информацией с сайта zakupki.gov.ru, согласно которой в рамках контракта 292045627021700008 ООО «Дорнивест-Крым» сдало работы Заказчику на сумму 65 156 225,91 руб.. При этом данный контракт исполнен, о чем свидетельствует соглашение от 23.07.2019 между ООО «Доринвест-Крым» и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя. 

Также данное обстоятельство подтверждается актами о приемке выполненных работ по вышеуказанным объектам, подписанными между  Заказчиком и Генподрядчиком. В свою очередь, ответчик не представил доказательств того, что работы были выполнены не истцом, а иным лицом, или собственными силами. Соответственно, собственные обязательства по государственным контрактам с Заказчиком исполнены, субподрядные работы, вошедшие в общий объем работы, Заказчиком приняты. Довод истца о выполнении работ не опровергнут.

В свою очередь, Генподрядчик указывает, что Контрактом №26-18 от 22.02.2018 (ул. Корчагина) предусмотрено, что работы должны быть закончены в срок не позднее 30 июня 2018 года. При этом, сумма принятых Субподрядчиком обязательств составляет 8 020 375,73 рублей. На сегодняшний день обязательства по Контракту Субподрядчиком не исполнены, незначительная часть выполненных работ до настоящего времени документально не оформлена и не подтверждена. С учетом изложенного неустойку (пеню) следует исчислять со всей сумму неисполненных обязательств в размере 8 020 375,73 р., начиная с 01.07.2018 года, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, что составляет 666 130,66 руб..

Контрактом №27-18 от 22.02.2018 (ул. Новороссийская) предусмотрено, что работы должны быть закончены в срок не позднее 30 мая 2018 года. При этом, сумма принятых Субподрядчиком обязательств составляет 10 052 812,53 рублей. На сегодняшний день обязательства по Контракту Субподрядчиком исполнены не в полном объеме, а принятые Подрядчиком работы выполнены и сданы с нарушением сроков. Неустойка с применением ст. 395 ГК РФ составляет 290 353,61 руб..

Контрактом №4-18 от 15.01.2018 (дорога дублер) предусмотрено, что работы должны быть закончены в срок не позднее 20 марта 2018 года. При этом, сумма принятых Субподрядчиком обязательств составляем 6 049 735,86 рублей. На сегодняшний день обязательства по Контракту Субподрядчиком исполнены не в полном объеме, а принятые Обществом работы выполнены и сданы с нарушением сроков. Выполненные работы сданы с нарушением сроков, предусмотренных контрактом, при этом сумма неисполненных обязательств составляет 823 833,85 рублей, неустойка (пеня) составляет 122 850,14 руб.

Контрактом №15.09-17П от 15.09,2017  (ПОР) предусмотрено, что работы должны быть закончены в срок не позднее 4 (четвертой) недели декабря 2017 года, т.е. не позднее 29 декабря 2017 года (пункт 4.2. Контракта). При этом, сумма принятых Субподрядчиком обязательств составляет 67 185 899,52 рублей

На сегодняшний день обязательства по Контракту Субподрядчиком исполнены не в полном объеме, а принятые Обществом работы выполнены и сданы с нарушением сроков, неустойка (пеня) составляет 1 163 607,38 руб..

Согласно ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Пунктом 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что поскольку статья 395 ГК РФ предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения именно денежного обязательства, положения указанной нормы не применяются к отношениям сторон, не связанным с использованием денег в качестве средства платежа (средства погашения денежного долга).

Между тем, субподрядными контрактами №26-18, №27-18, 4-18, 15.09-17П не предусмотрена ответственность субподрядчика за несвоевременное выполнение работ в виде оплаты штрафов или пени.

Таким образом, в связи с тем, что предмет спора по встречному исковому заявлению связан со взысканием неустойки за несвоевременно выполненные работы, основанном на применении ст. 395 ГК РФ, то предъявленные ООО «Доринвест-Крым» требования о взыскании с Субподрядчика неустойки за просрочку выполнения работ не могут быть применены по отношению к ООО «Баутерм-Юг».

Между тем, в соответствии с п. 7.3. субподрядного контракта №79-18 от 07.08.2018 в случае просрочки выполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактов, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек. 

Работы по данному контракту должны быть закончены в срок не позднее 01 октября 2018 года (п. 4.2. Контракта). При этом, сумма принятых Субподрядчиком обязательств составляет 5 601 413,04 рублей. В связи с просрочкой неустойку (пеню) следует исчислять со всей суммы просроченных обязательств в размере 5 601 413,04 р., начиная с 02.10.2018 года, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, что составляет 361 176,04 руб..

Истец заявил о снижении размера неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ. Между тем, обстоятельств, при наличии которых суд вправе снизить размер ответственности, не выявлено. Данное ходатайство подлежит отклонению.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО «Доринвест-Крым» в пользу ООО «Баутерм-Юг» задолженность в сумме 9 563 102,37 руб. долга, 41 846,42 руб. неустойки, 178 450,92 руб. процент неустойки по правилам ст. 395 ГК РФ, 60 450 руб. расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с ООО «Доринвест-Крым» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 10 366 руб..

По встречному иску:

Взыскать с ООО «Баутерм-Юг» в пользу ООО «Дорнивест-Крым» неустойку в сумме 361 176,04 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 4 995,90 руб..

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

Выдать ООО «Батурем-Юг» справку на возврат госпошлины в сумме 2 821 руб..

С учетом произведенного зачета:

Взыскать с ООО «Доринвест-Крым» в пользу ООО «Баутерм-Юг» задолженность в сумме 9 422 223,67 руб. и расходов по оплате госпошлины в сумме 55 454,80 руб..

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Судья 

С.Н. Архипова