Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-160993/2018

17 июля 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  11 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  17 июля 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРПРОМСТРОЙ" 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ" 

третье лицо: в/у ФИО1

о взыскании 48 223,00 руб. 

при участии

- от истца: ФИО2 представитель по доверенности №10 от 12.06.2019, ФИО3 представитель по доверенности №10 от 10.04.2019

- от ответчика: не явился, извещен

- не явился, извещен

установил:

Истец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРПРОМСТРОЙ" обратился в суд с исковым заявлением к ответчику - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ" о взыскании 21 850,00 руб. задолженности, 26 373,00 руб. процентов, всего 48 223,00 руб.

Истец в порядке ст. 49 АПК РФ увеличил исковые требования в части в части задолженности до 2 185 050,00 руб., в части процентов да 246 865,79 руб. по состоянию на 19.12.2018 г., всего 2 431 915,79 руб. Пошлина оплачена, ответчик извещен, увеличение размера требований принято судом к производству.

Заслушав пояснения истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что между ООО «Питерпромстрой» и ООО «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 24.02.2017 был заключен договор № 24/02/17-ППС-суб на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Устройство технологической площадки с навесом путей необщего пользования на станции Санкт-Петербург-Сортировочный».

В соответствии с договором ООО «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» поручило, а ООО «Питерпромстрой» приняло на себя подряд на строительство в 2017 году объекта «Устройство технологической площадки с навесом путей необщего пользования на станции Санкт-Петербург - Сортировочный Московский (парк Обухово)» В соответствии с п. 1.3. договора ООО «Питерпромстрой» взяло на себя обязательство завершить выполнение Работ и сдать Объект готовым к эксплуатации, в установленном порядке, в полном соответствии с проектной документацией, нормативными документами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. В соответствии с п. 2.1. договора общая стоимость работ составляет 2_185 050,00 руб.

В соответствии с п.13.2 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору. В соответствии с п. 3.2. договора ООО «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» осуществляет оплату выполненных по настоящему Договору работ в течение 60 календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены Объекта, комплекта исполнительной документации Субподрядчик представляет счет-фактуру на выполненные Работы не позднее 3 календарных дней с момента Подписания Сторонами акта КС-2.

В соответствии с п. 6.1 договора начало работ 01.02.2017. Окончание работ 31.05.2017. Истец обязательства по договору выполнил в полном объеме, ответчик оплатил лишь частично. Согласно расчетам истца размер задолженности составляет 2 185 050,00 руб.

Со стороны ООО «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» возникло нарушение в части оплаты оказанных истцом услуг и одностороннего отказа от обязательств по приемке выполненных работ.

Ответчик не признает исковые требования по следующим основаниям.

Пунктами 3.2, 3.3 определено наличие комплекта исполнительной документации на выполненные работы, пунктом 4.2.23 определено, что результатом работ по настоящему договору являются в том числе:

-      схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и охраняемых до его окончания;

-      исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных работах

-  справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанную ответственным представителем Субподрядчика;

-  справку, подтверждающую соответствие параметров построенного реконструированного) объекта капитального строительства проектной документации, подписанную ответственным представителем Субподрядчика;

-  справки, подтверждающие соответствие параметров построенного реконструированного) объекта капитального строительства техническим  условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно- технического обеспечения;

-  схемы, отображающие расположение построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанные ответственным лицом Субподрядчика.

В пункте 10.9 Субподрядчик передает Подрядчику за 10 календарных дней до начала приемки законченного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, заявленному Подрядчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. Перечень исполнительной документации передается Подрядчиком заблаговременно за 30 календарных дней до срока окончания Работ по настоящему договору.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации.

Состав и порядок ведения исполнительной документации могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Пунктом 11.12 договора определено, что Передача Субподрядчиком Подрядчику первичных учетных документов и счетов-фактур по выполненным Работам в рамках настоящего договора в любом случае подлежит осуществлению в срок, обеспечивающий возможность приемки, проверки и подписания данных документов Подрядчиком не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. При отсутствии временной возможности у Подрядчика осуществить приемку, проверку и подписание первичных учетных документов и счетов-фактур в указанный срок вследствие позднего представления данных документов Субподрядчиком, Подрядчик вправе отказаться от приемки Работ на основании данных документов и потребовать от Субподрядчика их переоформления на последующий отчетный период с соблюдением установленных сроков предоставления данной документации.

Пунктом 10.1 договора установлено, что сдача Субподрядчиком работ осуществляется в следующем порядке. До 23-го числа отёчного месяца Субподрядчик предоставляет подрядчику завизированные инспектором технического надзора Заказчика (ОАО «РЖД») акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, Справку от стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, а также документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы), оформленные в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 года № 2688р «Об утверждении альбома форм первичной документации». Акт о приемке выполненных работ составляется на основании Журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а»), выполненные объемы работ должны быть документально подтверждены Субподрядчиком и в соответствующем порядке согласованы с эксплуатирующими структурным подразделением ОАО «РЖД» (балансодержатель).

Представленные документы не имеют виз инспекторов технического надзора Заказчика (ОАО «РЖД»), поскольку фактически работы на объекте указанные в актах не выполнены и к приемке не предъявлялись.

Доводы ответчик не могут быть признаны обоснованными в силу следующего. В настоящее время объект, на котором выполнялись работы истцом, введен в эксплуатацию. Это означает, что ответчик сдал работы своему заказчику, что было бы невозможным в отсутствие надлежащей исполнительной документации. При этом ответчиком не представлено сведений и доказательств, что исполнительная документация была изготовлена им самим либо по его заказу иным лицом.

Кроме того, истец представил сопроводительное письмо от 30.06.2017 г. о передаче ответчику актов КС-2, КС-3, счетов-фактур. На письме стоит подпись о принятии документации сотрудником ответчика по доверенности № 05/06-2017 от 05.06.2017 г. Ответчик не представил доказательства направления мотивированных возражений на представленные истцом акты, вследствие чего данные акты считаются принятыми без возражений в силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме. Излишне уплаченная пошлина подлежат возврату истцу. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПИТЕРПРОМСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) 2 185 050,00 руб. задолженности, 246 865,79 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ по состоянию на 19.12.2018 г., всего 2 431 915,79 руб., а также 35 160,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ПИТЕРПРОМСТРОЙ» справку на возврат из бюджета 2 084 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Виноградова Л.В.