АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-21215/2023

г. Владивосток

10 июня 2024 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Буров А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АДМИНИСТРАЦИЯ  АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ИНН 25010022282501002228, ОГРН  1022500508073)  

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН  2501018098, ОГРН 1152501000849)  

р е ш и л:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"  в течении 30 дней с даты вступления настоящего решения в законную силу выполнить  обязательства по следующим ордерам:  

 № 62 от 27.05,2022 «Технологическое присоединение к центральной системе  водоотведения по ул.Базовая, 18/1» - понизить железобетонные перекрытия смотровых  колодцев до уровня дороги по ул.Базовая, установить люки на смотровых колодцах,  углубить водоотводную канаву по ул.Базовая (длиной-133 м., шириной -0,6 м, глубиной0,6 м), вывезти лишний грунт с проезжей части улицы, отсыпать песко-гравийной  смесью.  

 № 41 от 26.04.2021 «Устранение аварии на канализационной сети по ул. Ирьяпова,  9/2 (территория д/сад 31)» - восстановить асфальтовое покрытие территории детского  сада МДБОУ № 31 Арсеньевского городского округа площадью 6 кв.м, и выполнить  ремонт отмостки здания.  

 № 83 от 07.07.2021 «Замена ввода канализационной сети в ж/д № 40 по  ул.Октябрьская» - восстановить асфальтовое покрытие тротуара площадью 5 кв.м.  

 № 111 от 09.08.2021 «Устранение аварии на канализационной сети по ул.  Ирьянова, 9-10» - восстановить основание тротуара из песко-гравийной смеси и  асфальтовое покрытие на площади 8 кв.м., выполнить планировку газона с завозом  растительного фунта на площади 50 кв.м, и ремонт канализационного колодца  диаметром 1000 мм. (установить вертикальное положение).  

 № 158 от 30.09.2021 «Технологическое присоединение к центральной системе  водоотведения ж/дома № 20 по ул. Боткинской» - установить и закрепить люк на железобетонном перекрытии смотрового колодца.  

 № 173 от 01.10.2018 «Замена участка канализации сети по ул.Щербакова от ул.  Октябрьская до ул .Первомайская» - восстановить асфальтовое покрытие тротуара вдоль  многоквартирного жилого дома (далее-МКД) № 9, МКД № 11, МКД № 13, МКД № 15,  МКД № 17 по ул. Щербакова и площадки перед входом в подъезды вышеуказанных  МКД, выполнить ремонт бетонных отмостков МКД, в местах замены канализационного  выпуска МКД.  

В удовлетворении остальных требований отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ФЕНИКС" в доход федерального бюджета 6000,00 руб. государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края  в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья Буров А.В.