АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть принята 08.06.2017 г.)

Дело № А82-4567/2017

г. Ярославль

15 июня 2017 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дыбцыной Е.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Вертикаль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о   взыскании   647508.00  руб.

при участии:

от истца – не явились

от ответчика – не явились

установил:

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Вертикаль" о взыскании 647 508 руб. неотработанного аванса.

Истец в судебное заседание не явился, извещен. 

Ответчик в заседание не явился, отзыв на иск не представил. Определение арбитражного суда о времени и месте рассмотрения дела возвращено отделением почтовой связи без вручения с отметкой «истек срок хранения», в порядке ст. 123 АПК РФ ответчик извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

03.10.2014 г. между Региональным фондом капитального ремонта МКД ЯО /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Вертикаль" /Подрядчик/ заключен договор № 27/14-04, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области по лоту №4, расположенных по адресам: 

<

...>, вид работ: капитальный ремонт крыш многоквартирных домов.

В силу п. 1.2 Договора объем выполняемых работ определяется техническим заданием (приложение 1,2).

В соответствии с п. 1.3 Договора цена договора является приблизительной и на дату заключения договора составляет 2 158 361 руб. 10 коп., в том числе НДС 18%. 

Согласно п. 2.1 Договора по согласованию с Заказчиком Подрядчику может быть выплачен авансовый платеж в размере до 30% от цены Договора, указанной в пункте 1.3 Договора. 

Пунктами 3.1, 3.2 установлены сроки выполнения работ: датой начала выполнения работ является дата подписания договора, дата окончания выполнения работ – 01 ноября 2014 года.

Истец во исполнение заключенного договора перечислил ответчику денежные средства в размере 647 508 руб.

25.01.2016 г. стороны расторгли договор по соглашению сторон.

Претензией от 14.11.2016 г. № 10-03/6071 истец потребовал у ответчика возвратить перечисленные денежные средства в сумме 647 508 руб. Претензия направлялась по юридическому адресу ответчика 19.11.2016 г.

Указывая на неисполнения ответчиком обязанности по возврату денежных средств, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, суд считает требования подлежащими удовлетворению  по следующим основаниям.

Учитывая соглашение сторон о расторжении договора от 20.04.2015г. договорные отношения между сторонами отсутствуют.

В соответствии с п. 1 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2000г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» сторона вправе истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. 

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано  возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Факт перечисления денежных средств ответчику подтвержден материалами дела, а именно платежными поручениями №10768 от 14.10.2014 на сумму 360 338 руб., № 10767 от 14.10.2014 г. на сумму 287 170 руб., ответчиком не оспорен.

Доказательств выполнения работ на сумму полученного аванса, возврата денежных средств либо представления иного встречного исполнения, ответчиком суду не представлено.

Согласно п.3.1 ст. 70 АПК РФ  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены материалами дела, они подлежат удовлетворению в части взыскания неотработанного аванса в полном объеме, в сумме 647 508 руб..

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Вертикаль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 647 508 руб. долга.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Вертикаль" в доход федерального бюджета 15950 руб. государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья

Бессонова И.Ю.