24/2021-101891(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25 РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации (резолютивная часть)

Дело № А55-36486/2020

08 апреля 2021 года

г.Самара

 Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коршуновой А.М.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению содержания, обслуживания и  ремонта образовательных учреждений муниципального района Исаклинский"  

к Обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление "Гранит"  о безвозмездном устранении недостатков работ  

при участии в заседании представителей: 

от истца - директор Омельченко А.А., постановление № 542 от 30.05.2014,  Мокшин Ю.А., доверенность от 01.03.2021  

от ответчика – Груздева Ю.С., доверенность от 09.03.2021 

руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное  управление "Гранит" безвозмездно, в течении одного месяца с даты вступления настоящего  судебного акта в законную силу, устранить следующие недостатки (дефекты) работ,  выполненных по договору № 02 от 20.09.2013, в отношении физкультурно-оздоровительного  комплекса в с. Исаклы муниципального района Исаклинский, а именно:  

- заменить обивки из металла питьевых тумб системы питьевого водопровода;  

- демонтировать выравнивающую цементно-песчанную смесь на пандусе для площадке  МНГ, прочность В15 толщина 30 мм, площадь 53,85 м2.  

- выполнить устройство плитки тротуарной 300x300-30 мм площадь 53,85 м2. 

- выполнить гидроизоляцию проникающим покрытием гидроизоляции пола "Пенентрон"  - 96 м2.  

- выполнить гидроизоляцию проникающим покрытием гидроизоляции потолка  "Пенентрон" -125 м2.  

- заменить Двери 4 шт., шириной 700 мм.  

- выполнить устройство выравнивающей стяжки полы " - 96 м2. толщиной 50 мм.  - выполнить устройство пола из керамической (керамогранит) плитки - 96 м2.  

- выполнить шкаф с водозащитой для электрооборудования. - выполнить замену штукатурного покрытия стены и окраска 15 м2. - выполнить замену покрытия ступеней из плитки 12 м2. 

- выполнить герметизацию швов между кровельными сэндвич панелями 23 м.п.  - выполнить шпаклевку и Покраску водоэмульсионной краской стены - 124,6 м2.  

- выполнить замену кабеля водоотлива длиной -56 м.п. - выполнить устройство стяжки цементно-песчаной смеси на кровли 2,5 м2. 

- выполнить устройство кровли из гидроизоляции рулонной технониколь - 3,5 м2.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное  

управление "Гранит" в пользу Муниципального автономного учреждения "Центр по  

обеспечению содержания, обслуживания и ремонта образовательных учреждений  

муниципального района Исаклинский" судебные расходы в размере 81 000,00 рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый  

арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через  

Арбитражный суд Самарской области. 

 Судья Лукин А.Г. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 24.08.2020 6:25:36

Кому выдана Лукин Алексей Геннадьевич