ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-286038/22-15-2229

09 октября 2023 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена «02» октября 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено «09» октября 2023 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" (ОГРН:1022301429424 ИНН:2309073209)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН" (ОГРН:1107746473284 ИНН:7729657870)

о взыскании задолженности

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО2 по дов. б/н от 01.03.2021 г.

от ответчика– ФИО3 по дов. №ССК-10/23-50 от 30.12.2022 г. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН" (далее – ответчик) о взыскании основного долга по договорам №3-СГМ-2018/СС-2.8 от 27.04.2018 г., №4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018г., №8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015г. в размере 138 655 759,90 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.12.2019 по 04.08.2023 в размере 18 929 795,23 руб., и далее с 05.08.2023 по день фактического исполнения обязательств по оплате (с учетом утонений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Истец требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик требования не признал по доводам изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» и ООО «ССК «Газрегион» были заключены договоры подряда №3-СГМ-2018/СС-2.8 от 27.04.2018 г., №4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018г., №8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015г.

В соответствии с п. 2.1. Договора № 3-СГМ-2018/СС -2,8 от 27.04.2018 г. Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить полный комплекс работ по КИТСО, перечень которых согласован Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, на объектах Подрядчика:

- «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» -Белогорск» км 1817,9 - км 1970,45 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0011);

- «РРЛ связи магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 2.8. Участок «КС-7 1 «Сивакинская» - Белогорск» км 1817,9 - км 1970,45 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0044), в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки -1 033-2000973) (далее все объекты именуются - Объект)., т.е. выполнить Работы, в соответствии с Приложением № 1, Проектной и рабочей документацией, разработанной ПАО «ВНИПИгаздобыча» № 4570, а также любые иные Работы, необходимые для строительства Объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением (далее - Работы), а Подрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенный строительством Объект. Подрядчик передает Субподрядчику проектную и рабочую документацию, полученную от Генподрядчика. Перечень Проектной и рабочей документации определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору. 

Субподрядчик обязуется выполнить все Работы своими силами и/или силами привлеченных субсубподрядных организаций. При привлечении субсубподрядных организаций Субподрядчик организует выполнение Работ, координирует деятельность субсубподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых Субсубподрядчиками, несет ответственность перед Подрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору привлеченными Субсубподрядчиками.

В соответствии с п. 3.1. Договора № 3-СГМ-2018/СС -2,8 от 27.04.2018 г. Цена Работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору определяется в Приложении № 1.

Договорная цена ориентировочная и подлежит корректировке в связи с уточнением состава, объемов и сметной стоимости работ, после выхода полного комплекта утвержденной проектно-сметной документации, переданной в «Производство работ» и в соответствии с фактически выполненными объемами работ, с последующим заключением Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

Как указал истец, по договору № 3-СГМ-2018/СС-2.8 от 27.04.2018 истец выполнил работы и сдал их результат, а ответчик принял работы на общую сумму в размере 134 922 544,82 руб., что подтверждается: двусторонними актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 (л.д. 15-65): № 1 от 31.05.2020 - 6 076 736,49 руб., № 2 от 31.05.2020 - 6 532 983,60 руб., № 3 от 31.05.2020 - 6 784 353,66 руб., № 4 от 31.05.2020 - 6 363 986,36 руб., № 5 от 31.05.2020 - 6 829 454,87 руб., № 6 от 31.05.2020 - 279 518,41 руб., № 7 от 31.05.2020 - 26 318 150,75 руб., № 8 от 31.05.2020 - 8 617 214,89 руб., № 9 от 31.05.2020 - 143 790,96 руб., № 10 от 31.05.2020 - 144 204,35 руб., № 11 от 31.05.2020 - 143 234,86 руб., № 12 от 31.05.2020 -383 852,73 руб., № 13 от 31.05.2020 - 1 401 679,04 руб., № 15 от 31.05.2020 - 143 709,68 руб., № 1 от 31.05.2020 - 2 828 533,00 руб., № 2 от 31.05.2020 - 4 746 566, 92 руб., № 3 от 31.05.2020 - 4 338 695,20 руб., № 4 от 31.05.2020 - 3 062 302,01 руб., № 5 от 31.05.2020 - 2 990 086,13 руб., № 6 от 31.05.2020 -2 653 327,81 руб., № 7 от 31.05.2020 - 3 674 222,63 руб., № 8 от 31.05.2020 - 3 553 883,74 руб., № 9 от 31.05.2020 - 3 551 847,16 руб., № 10 от 31.05.2020 - 3 635 711,16 руб., № 11 от 31.05.2020 - 3 714 859,18 руб., № 12 от 31.05.2020 - 3 514 203,82 руб., № 13 от 31.05.2020 - 1 172,89 руб., № 14 от 31.05.2020 -5 378,77 руб., № 15 от 31.05.2020 - 1 792,95 руб.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (л.д. 14) № 1 от 31.05.2020 -134 922 544,82 руб., а оплатил работы частично на сумму в размере 76 036 621,60 руб., что подтверждается платежными поручениями (л.д 80-83): № 6746 от 05.06.2018 - 32 200 000,00 руб., № 12538 от 01.10.2018 - 32 200 000,00 руб., № 13460 от 16.10.2018 - 11 104 085,60 руб., № 3755 от 26.03.2020 - 532 536,00 руб.

Задолженность по оплате работ по договору № 3-СГМ-2018/СС-2.8 от 27.04.2018 составляет 58 885 923,22 руб. согласно арифметическому расчету: 134 922 544,82 руб. - 76 036 621,60 руб.

Цена договора определена в соответствии с расчетом договорной цены 134 922 544,82 руб., срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ до 31.05.2020 в редакции ДС № 5 от 09.06.2020, срок оплаты работ 80 рабочих дней с момента представления КС-2, КС-3, ответственность за нарушение обязательств п. 14.1. договора, право на мотивированный отказ п. 5.33. (три дня).

В соответствии с п. 2.1. Договора № 8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015 г. Субподрядчик обязуется выполнить своими и/или привлеченными силами по заданию Подрядчика, в установленный настоящим Договором срок и в соответствии с технической и сметной документацией, Работы на Объекте по согласованной сторонами договорной стоимости Работ, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения Работ на Объекте, принять .результаты Работ и оплатить их.

В соответствии с п. 3.1. 3.2 Договора № 8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015 г. Договорная стоимость Работ, выполняемых Субподрядчиком, определена в приложении № 1 «Расчёт Договорной стоимости» и Приложении № 2 «Протокол согласования Договорной стоимости»

В договорную стоимость Работ, выполняемых Субподрядчиком, входит: -стоимость субподрядных работ, указанных в проектно-сметной документации, и любых иных работ, необходимых для выполнения Работ, а также учитывает все возможные расходы Субподрядчика, включая, затраты, указанные в пункте 3.2.1. Договора, а также сумма НДС.

По договору № 8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015 истец выполнил работы и сдал их результат, а ответчик принял работы сумму в размере 92 554 984,80 руб., что подтверждается:

-           двусторонними актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 (л.д. 69, 70, 72-79): № 1 от 19.12.2019 - 5 834 593,00 руб., № 1 от 19.12.2019 - 29 349 074,00 руб., № 2 от 19.12.2019 - 7 182 125,00 руб., № 3 от 19.12.2019 - 34 763 362,00 руб.;

-           справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (л.д. 68, 71): № 3 от 19.12.2019 -7 001 511,60 руб., № 4 от 19.12.2019 - 85 553 473,20 руб.,

а ответчик оплатил работы частично на сумму в размере 55 317 649,05 руб., что подтверждается платежными поручениями (л.д. 89, 101): № 7974 от 05.07.2017 - 4 800 000,00 руб., № 5736 от 21.05.2020 - 50 000 000,00 руб. и актами (л.д. 90, 100): № 26 от 30.04.2020 - 455 053,37 руб., № 27 от 30.04.2020 - 62 595,68 руб.

Задолженность по оплате работ по договору № 8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015 составляет 37 237 335,75 руб. согласно арифметическому расчету: 92 554 984,80 руб. - 55 317 649,05 руб.

В соответствии с п. 2.1., 2.2 Договора №4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018г. Субподрядчик, обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс Работ по КИТСО, перечень которых согласован Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, на Объектах Подрядчика:

«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородннская» -КС-7 «Сивакинская» км. 1636 - км 1817,9 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0010);

«РРЛ связи магистрального газопровода «Сила Сибири», Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородннская» - КС-7 «Сивакинская» км 1636 - км 1817,9 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0041), в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки - 033-2000973) за исключением подготовки и расчистки полосы отвода, (далее все объекты именуются -Объект), т.е. выполнить Работы, предусмотренные Приложением № 1, проектной и рабочей документацией, разработанной ПАО «ВНИ11J41 аз добыча», а также любые иные Работы, необходимые для строительства Объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением (далее - Работы), а Подрядчик обязуется принять и оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке. Подрядчик передает Субподрядчику всю необходимую для выполнения работ проектную и рабочую документацию, полученную от Заказчика. Перечень проектной и рабочей документации определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Субподрядчик обязуется выполнить все Работы своими силами и/или силами привлеченных субсубнодрядных организаций. При привлечении субсубподрядных организаций Субподрядчик организует выполнение Работ, координирует деятельность субсубнодрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых Субсубподрядчиками, несет ответственность перед Подрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору привлеченными Субсубподрядчиками.

В соответствии с п. 3.1 Договора №4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018г. Цена Работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору определяется в Приложении № 1. Договорная цена ориентировочная и подлежит корректировке в связи с уточнением состава, объемов и сметной стоимости работ, после выхода полного комплекта утвержденной проектно-сметной документации, переданной в «Производство работ» и в соответствии с фактически выполненными объемами работ, с последующим заключением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

По договору № 4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018 истец выполнил работы и сдал их результат, а ответчик принял работы на общую сумму в размере 143 558 827,93 руб., что подтверждается:

-           двусторонним актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.04.2022 - 119 632 356,61 руб. (л.д. 67);

-           справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.04.2022 - 143 558 827,93 руб. (л.д. 66),

а оплатил работы частично на сумму в размере 101 026 327,00 руб., что подтверждается платежными поручениями (л.д. 84-88): № 6743 от 05.06.2018 - 27 800 000,00 руб., № 6836 от 06.06.2018 - 12 000 000,00 руб., № 12365 от 27.09.2018 - 50 000 000,00 руб., № 12537 от 01.10.2018 - 10 000 000,00 руб., № 3752 от 26.03.2020 - 1 226 327,00 руб.

Задолженность по оплате работ по договору № 4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018 составляет 42 532 500,93 руб. согласно арифметическому расчету: 143 558 827,93 руб. - 101 026 327,00 руб.

Цена договора определена в соответствии с расчетом договорной цены 143 558 827,93 руб., срок выполнения работ определяется актами сдачи-приемки работ в редакции ДС № 2 от 30.08.2018, срок оплаты работ 80 рабочих дней с момента представления КС-2, КС-3, ответственность за нарушение обязательств п. 14.1. договора, право на мотивированный отказ п. 5.33. (три дня).

Претензионные требования Истца Ответчиком оставлены без удовлетворения.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Рассмотрев доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу, что требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из содержания приведенной нормы следует, что по итогам проведенной в рамках договора подряда работы происходит обязательная передача и прием результата выполненной работы, опосредуемая составлением и подписанием соответствующего документа приема-передачи.

Из смысла статьи 711 ГК РФ следует, что сдача заказчику результата работ является основанием возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

На основании пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В пункте 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» изложена позиция, согласно которой основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. На основании статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно статье 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

При этом, исходя из пункта 2 статьи 401 ГК РФ, бремя доказывания отсутствия вины в неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства возложено на лицо, нарушившее обязательство. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Между тем, факт неисполнения в полном объеме финансовых обязательств по Договорам на указанные в исковом заявлении суммы основного долга Ответчиком в ходе судебного разбирательства не оспаривался, сам отзыв не содержит основанных на законе и подтвержденных доказательствами доводов, опровергающих законность и обоснованность требований Истца, и которые могли бы служить основанием для отказа в удовлетворении иска, как и не содержит мотивированных возражений по существу заявленных требований, либо указаний на обстоятельства, имеющие существенное значение при вынесении решения по делу, Ответчиком не представлены какие-либо доказательства погашения задолженности, либо подтверждения исполнения им своих обязательств перед Истцом.

Таким образом, суд считает требования истца правомерными и подлежащими  удовлетворению, а сумма основного долга по договорам №3-СГМ-2018/СС-2.8 от 27.04.2018 г., №4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018г., №8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015г. в общем размере 138 655 759,90 руб. подлежит принудительному взысканию с ответчика, так как от него не поступили документы в суд, подтверждающие оплату долга и так как односторонний отказ от исполнения обязательств, в данном случае денежных, противоречит  ст. ст.  309, 310 ГК РФ.

В рамках настоящего спора, истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.12.2019 по 04.08.2023 в размере 18 929 795,23 руб.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получении или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Суд считает, что поскольку ответчиком не исполнены обязательства по возврату денежных средств, у истца возникло право на взыскание с ответчика процентов в порядке ст. 395 ГК РФ.

Расчет истца суммы процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен и признан обоснованным, контррасчета ответчиком не представлено. Основания для применения норм ст. 333 ГК РФ судом не усмотрено, в том числе учитывая, что в рассматриваемом случае истцом заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика суммы процентов в размере 18 929 795,23 руб. подлежит удовлетворению.

Кроме этого, согласно нормам п.3 ст. 395 ГК РФ, а также разъяснений ВС РФ в соответствующей части, суд удовлетворяет требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке п. 3 ст. 395 ГК РФ начисленные на общую сумму основного долга 138 655 759,90 руб. с 04.08.2023 по день фактической оплаты исходя из ключевых ставок ЦБ РФ действующих в соответствующие периоды.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 329, 330, 395, 702 ГК РФ, ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" основной долг в размере 138 655 759,90 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 929 795,23 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами начисленные в порядке п. 3 ст. 395 ГК РФ исходя из ключевой ставки ЦБ РФ действовавшей в соответствующие периоды на сумму основного долга 138 655 759,90 руб. с 04.08.2023 по дату фактической оплаты, а также  расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

 

СУДЬЯ:                                                                                                      М.А. Ведерников