РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город  Москва 

03.02. 2020 года                                                         Дело №  А40-272315/19-110-2108

Резолютивная часть решения от 15 января 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИС-В.С." (107076, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 19, КОРПУС 2, ПОМ 128 КОМ 6, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА" (111250, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 499 419,96 руб. пени за период с 16.02.2019 по 26.06.2019 по Договору №1821187340651452466001594/ИНТВС180 от 01.10.2018.

без проведения судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИС-В.С." обратилось с иском к акционерному обществу "ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА" о взыскании 499 419,96 руб. пени за период с 16.02.2019 по 26.06.2019 по Договору №1821187340651452466001594/ИНТВС180 от 01.10.2018.  

Определением суда от 25.10.2019 было назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ. Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ. 

Сторонам  было предложено  представить в арбитражный суд и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в срок до 19.11.2019.

Сторонам было предложено представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 10.12.2019. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 01 октября 2018 года между обществом с ограниченной ответственность «Интегрис-В.С.» (далее - Истец) и акционерным   обществом «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (АО «ОКБ МЭИ»), был заключен Договор №1821187340651452466001594/ИНТВС180 (далее – Договор), где общество выступало в роли Исполнителя, а АО «ОКБ МЭИ» (далее-Ответчик), в роли Заказчика. 

Согласно п. 1.1. Договора исполнитель обязался в установленный Договором срок выполнить составную часть опытно-конструкторской работы шифр «Полигон-ГЗ-Интегрис» (далее именуется-СЧ ОКР) в объеме, соответствующую качеству, результату и иным требованиям, установленными Договором и своевременно сдавать заказчику ее результата, а заказчик обязуется принять и оплатить такой результат. 

В соответствии с п. 6.5 Договора Оплата работ производится после сдачи исполнителем и приемки  заказчиком выпаленной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), оформленной Актом сдачи-приемки выполненного этапа СЧ ОКР и Итоговым актом приемки выполненной СЧ ОКР, путем перечисления денежных средств с отдельного счета Заказчика на отдельный счет исполнителя, открытый исполнителем в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке ВТБ (ПАО), при наличии у исполнителя с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. 

Согласно п. 6.11. Договора оплата СЧ ОКР производится в течение 30 (тридцати) дней, с даты подписания заказчиком Итогового акта приемки выполненной СЧ ОКР с учетом ранее выплаченного аванса. 

Цена Договора составила 29 643 975 (Двадцать девять миллионов шестьсот сорок три тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 59 копеек (без НДС).

Общая сумма аванса по Договору составила 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

15 января 2019 года исполнителем были оказаны все услуги, указанные в Договоре, что подтверждается Итоговым актом приемки выполненной составной части опытно-конструкторской работы по Договору от «01» октября 2018 года № 1821187340651452466001594/ИНТВС180, который подписан с двух сторон.

Таким образом, ООО «Интегрис-В.С.» в полном объеме выполнило взятые на себя обязательства по Договору. Претензии по объему, срокам и качеству отсутствовали, однако в нарушение ст. 309 ГК РФ, а также п. 6.5 Договора №1821187340651452466001594/ИНТВС180 от 01 октября 2018 года до 27.06.2019 оплата заказчиком за выполненную СЧ ОКР в наш адрес не поступала.

АО «ОКБ МЭИ» платежным поручением от 27.06.2019 г. № 5734 погасил задолженность по Договору №1821187340651452466001594/ИНТВС180 от 01 октября 2018 года в размере 14 793 975 (Четырнадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 59 копеек.

В соответствии с п. 8.8 Договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по финансированию (окончательному расчету за выполненные работы), предусмотренного Договором, исполнитель вправе потребовать неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера просроченного авансового платежа (размера окончательного расчета за выполненные работы) за каждый день просрочки.

В соответствии с расчетом, произведенным за период с «16» февраля 2019 г. по «26» июня 2019 г., размер пени составляет 499 419 (Четыреста девяносто девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 96 копеек.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов.

Вместе с тем согласно п. 1.1. Договора исполнитель обязался в установленный Договором срок выполнить составную часть опытно-конструкторской работы шифр «Полигон-ГЗ-Интегрис» (далее - СЧ ОКР) в объеме, соответствующую качеству, результату и иным требованиям, установленным Договором и своевременно сдать заказчику ее результаты, а Заказчик обязался принять и оплатить такой результат. 

Цена Договора составила 29 643 975 (Двадцать девять миллионов шестьсот сорок три тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 59 копеек (без НДС). Общая сумма аванса по Договору составила 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС), который был выплачен 08.11.2018 платёжным поручением №8482. Согласно Итоговому акту приемки выполненной составной части опытно-конструкторской работы по Договору, к перечислению в качестве окончательного расчета следует сумма в размере 14 793 975 (Четырнадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. Данная сумма 26.06.2019 платежным поручением №5734 была выплачена Истцу в полном объеме.

Согласно п.6.2 Договора, принятие заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями Договора и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.

Согласно п.1.3 основанием для заключения Договора является Государственный контракт №1821187340651452466001594 от 24.04.2018, заключенный между Министерством обороны РФ и АО «ОКБ МЭИ». Соответственно, согласно условиям договора, оплата выполненной СЧ ОКР производится при условии поступления денежных средств от Государственного Заказчика (п.6.5 Договора). Согласно ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) условия договора определяются по усмотрению сторон, соответственно, подписывая данный Договор, Истец соглашался на данное условие.

Согласно Закону от 29.12.2012 №275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (далее – 275-ФЗ) Государственный заказчик (Министерство обороны РФ) обеспечивает финансирование оборонного заказа (п. 5 ст. 7), осуществляет контроль за исполнение государственного оборонного заказа (пп. 5 п. 1 ст. 8) и целевым использованием бюджетных ассигнований (п. 6 ст. 7).

Таким образом, 275-ФЗ устанавливает правило для участников гособоронзаказа, согласно которому все расчеты, связанные с его исполнением, должны проводиться через специальные счета в целях контроля за целевым использованием бюджетных средств.

В соответствии с п.6.5 Договора оплата работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), оформленной Актом сдачи-приемки выполненного этапа СЧ ОКР, путем перечисления средств с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый Исполнителем в соответствии с 275-ФЗ в уполномоченном банке (ВТБ (ПАО)), при наличии у Исполнителя с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с отдельного счета Заказчика. В оплату выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) засчитываются в первую очередь суммы перечисляемых Исполнителю авансовых платежей. 

Поскольку договор заключен во исполнение ГОЗ, расчеты осуществляются с использованием отдельных счетов в уполномоченном банке.  Денежные средства на отдельный счет Ответчика поступают от государственного заказчика (Минобороны РФ), расчеты через обычные расчетные счета при этом запрещены.

Согласно ст.431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. П.6.5 договора устанавливает отлагательное условие оплаты т.к. оплата Истцу с отдельного счета возможна только после получения денежных средств от Министерства обороны РФ. 

Согласно п.1 ст.314 ГК РФ исчисление срока исполнения обязательства допускается в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором.

СЧ ОКР выполнена в установленные сроки до 15.01.2019, что подтверждается Итоговым актом приемки выполненной составной части опытно-конструкторской работы, который подписан с двух сторон.

10.06.2019 АО «ОКБ МЭИ» получены денежные средства от Государственного заказчика (Министерства обороны РФ) согласно платежному поручению №437480. 27.06.2019 Ответчик перечислил на счет Истца 14 793 975 (Четырнадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек (п/п № 5734 от 26.06.2019), то есть в течение 10 банковских дней после поступления денежный средств от Министерства обороны РФ, что соответствует общепринятой практике по оплате. 

Дату получения денежных средств от Государственного заказчика Ответчик не скрывал и сообщил исх.№В/4015 от 21.06.2019 в ответе на претензию Истца (исх.№59-05/19 от 18.06.2019).

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 169-170 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению  и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  пятнадцати  дней с даты его принятия,  а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:               А.В. Мищенко