110/2022-165599(1) 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-4462/2021

г. Хабаровск

16 сентября 2022 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Краевого государственного  казенного учреждения «Хабаровское управление автомобильных дорог» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 680011, 

<

...>, литер А)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожная эксплуатационно-строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 680021,  

<

...>, литер А, пом. 326)  

об устранении недостатков выполненных работ по контракту № 147 от 23.04.2019  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора: Акционерное общество «Региоснаб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 680012, 

<

...>)  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Принять частичный отказ Краевого государственного казенного учреждения  «Хабаровское управление автомобильных дорог» от иска.  

Прекратить производство по делу в части требований устранить следующие  недостатки выполненных работ на объекте «Автомобильная дорога «г.Хабаровск –  с.Ильинка – с.Ракитное – с.Гаровка-1 – п. им. Горького (г.Хабаровск)» км 0 – км 4+420»  по контракту № 147 от 23.04.2019:  

- разрушение верхнего слоя покрытия, ямочность на ПК6 право, примыкание к  разворотному кольцу;  

- отсутствие щитка дорожного знака 5.19.1 на ПК26+89 право; 

- обнажение начальных и концевых элементов металлического барьерного  ограждения в местах понижения, наличие повреждения грунта обочины на ПК30.  

В удовлетворении искового требования об обязании в течение 1 месяца со дня  вступления решения в законную силу устранить дефекты выполненных работ на объекте  «Автомобильная дорога «г.Хабаровск – с.Ильинка – с.Ракитное – с.Гаровка-1 – п. им.  Горького (г.Хабаровск)» км 0 – км 4+420» в виде размывов обочины и откоса на ПК6+50 –  ПК10+50 лево, в рамках исполнения гарантийных обязательств по контракту от 23.04.2019   № 147, отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 29.10.2021 2:22:59

Кому выдана Малашкин Дмитрий Леонидович