АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Рокоссовского, д. 2, г. Калининград, 236040 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А21- 2755 /2022

18 декабря 2023 года

г. Калининград

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Калининградской области  

Р Е ШИ Л:

Исковые требования специализированной некоммерческой организации  Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах» удовлетворить полностью.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СК ГРАНИТ» в  месячный срок с момента вступления в законную силу решения суда выполнить  гарантийные обязательства по устранения дефектов по договору от 11.04.2019 №  27740000-01/СМР-19 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на  территории муниципального образования на объекте, расположенном по адресу:  Калининградская обл., пос. Янтарный, пер. Пушкина, д. 5, а именно: выполнить  замену поврежденной черепицы в объеме 0,85 кв.м.; выполнить крепление черепиц  керамических самонарезающими винтами в крайних рядах по скату в объеме 55  метров; выполнить обивку стен слуховых окон оцинкованной кровельной сталью  по дереву с одно стороны в объеме 10 кв.м., с восстановлением узла примыкания  кровли к стенам; заменить стальной окрашенный элемент лобовой доски на  фронтонных свесах в объеме 14 м.; выполнить монтаж снегозадерживающих  устройств над мансардными окнами; выполнить работы по ограждению кровель  перилами в объеме 0,18 .; выполнить монтаж снегозадерживающих устройств над  

 2 Дело № А21-2755/2022  мансардными окнами; произвести демонтаж подшивки скатов крыши мансардных  квартир; произвести демонтаж пароизоляционного слоя скатов крыши мансардных  квартир; восстановить пароизоляционный слой скатов крыши мансардных квартир;  восстановить подшивку скатов крыши мансардных квартир; восстановить  отделочные слои мансардных квартир, поврежденных при устранении дефектов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК ГРАНИТ» в  пользу специализированной некоммерческой организации Калининградской  области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах» государственную пошлину в размере 6000 рублей, оплаченной по  платёжному поручению № 35661 от 28.08.2023, в возмещение расходов по оплате  экспертизы 95 000 рублей.  

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок  со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Калининградской области.  

 Судья М.С. Глухоедов