ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-111241/19-83-645

г. Москва

10 июля 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 26 июня 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 10 июля 2019 года

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-645),  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бикбулатовым К.В., рассматривает в открытом судебном заседании  дело по иску АО "ОТЭК" (ИНН 

<

***>) к ООО "ЭРСМ" (ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 64 508 360 руб. 03 коп. 

при участии: согласно протокола

УСТАНОВИЛ:

АО "ОТЭК" просит взыскать с ООО "ЭРСМ" сумму убытков в размере 64 508 360,03 рублей.

Истец требования поддержал согласно исковому заявлению.

Ответчик требования не признал согласно доводам отзыва.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что между Акционерным обществом «Объединенная теплоэнергетическая компания» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоремстроймонтаж» (Подрядчик) заключен Договор подряда от 14.02.2018 №307/3672-Д, согласно условиям, которого Подрядчик обязался выполнить и сдать в установленном Договором порядке работы по капитальному ремонту турбины ВК-50-2М ЛМЗ ст.№6 вспомогательного оборудования для нужд филиала АО «ОТЭК» в г. Северске, а Заказчик обязался принять и оплатить их (п. 1.1 Договора).

Согласно п. 3.1 Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 2 к Договору) стоимость работ составляет 9 697 731,19 руб., в том числе НДС в размере 18% в сумме 1 479 314,93 руб.

Истцом указано, что как следует из п. 4.1 Договора и раздела 8 Технического задания к нему (в редакции Дополнительного соглашения № 2), работы по Договору должны были быть выполнены Подрядчиком в течение 179 календарных дней с даты начала ремонта, указанной в направленном в адрес Подрядчика уведомлении.

Письмом от 19.02.2018 № 307ФС/674 АО «ОТЭК» уведомило ООО «ЭРСМ» о готовности начать работы с 01.03.2018, с чем письмом от 20.02.2018 № 11 выразил свое согласие Истец.

Таким образом, работы по Договору должны были быть выполнены ООО «ЭРСМ» не позднее 27.08.2018 года.

Истцом указано, что несмотря на указанное, работы на сумму 7 290 825,14 руб. были выполнены ответчиком с просрочкой исполнения обязательств по Договору, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат по Договору №№ 8, 10 - 12, а также актами о приемке выполненных работ по Договору №№ 8, 10 - 15, подписанными со стороны Истца.

Исходя из указанного следует, что ответчиком была допущена просрочка исполнения обязательств по Договору на 81 календарный день (период с 28.08.2018 по 16.11.2018), что является существенным нарушением ООО «ЭРСМ» условий Договора.

Заказчиком неоднократно направлялись Подрядчику претензии о просрочке исполнения обязательств по Договору: претензия от 23.10.2018 № 307ФС/3416/2311/2018-ПРЕТ. С данной претензией Истец не выражал своего несогласия; претензия от 26.12.2018 № 308ФС/3943/2902018-ПРЕТ.

В обоснование исковых требований истец ссылается на  то, что  несвоевременное исполнение обязательств по Договору со стороны ООО «Энергоремстроймонтаж» привело к возникновению у АО «ОТЭК» убытков, что подтверждается следующим.

Как следует из размещённой в публичном доступе на сайте Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» в сети Интернет информации, за рег. номером 1.1.0231 зарегистрировано АО «ОТЭК» как поставщик электрической энергии и мощности является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности) и имеет право на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке. АО «ОТЭК» присвоены коды групп точек поставки -GPRIURGO, в отношении которых получено право участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью.

На оптовом рынке действует организованная система договоров между субъектами оптового рынка, определяющая основные условия деятельности соответствующих субъектов на оптовом рынке, условия продажи электрической энергии и мощности, оказания услуг. Перечень, система и порядок заключения обязательных для участников оптового рынка договоров определяются Правилами оптового рынка (п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

В соответствии с подпунктом 1 и 4 пункта 4 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (далее - Правила оптового рынка), торговля мощностью АО «ОТЭК» осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) на основании договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии и (или) мощности (далее - регулируемые договоры) и по свободным (нерегулируемым) ценам по результатам конкурентного отбора мощности.

Согласно пункту 42 Правил оптового рынка в целях обеспечения надежной и бесперебойной поставки электрической энергии на оптовом рынке осуществляется торговля мощностью - особым товаром, продажа которого влечет возникновение у участника оптового рынка обязательства по поддержанию принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электрической энергии, в том числе путем проведения необходимых для этого ремонтов генерирующего оборудования, и возникновение соответствующего указанному обязательству у иных участников оптового рынка права требовать его надлежащего исполнения в соответствии с условиями заключенных договоров купли-продажи (поставки) мощности. Исполнение обязательства поставщика по продаже (поставке) мощности и передача мощности поставщиком покупателю, а также исполнение покупателем обязательства по приему мощности от поставщика осуществляются в объеме, фактически поставленном данным поставщиком на оптовый рынок, с учетом выполнения поставщиком установленных Правилами оптового рынка требований к готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии. Факт поставки мощности поставщиком покупателю и принятия мощности покупателем от поставщика в течение расчетного периода, а также объем поставленной и подлежащей оплате мощности удостоверяются путем составления и подписания уполномоченными представителями поставщика и покупателя по итогам поставки мощности за истекший расчетный период акта приема-передачи мощности на основании полученного от системного оператора подтверждения объема мощности, фактически поставленной на оптовый рынок данным поставщиком.

В соответствии с пунктом 47 Правил оптового рынка в целях поставки на оптовом рынке мощности в объеме, равном предельному объему поставки мощности, определенному по итогам аттестации, участники оптового рынка обязаны поддерживать относящееся к их группам точек поставки генерирующее оборудование в состоянии готовности к выработке электрической энергии в соответствии с требованиями настоящего раздела. При невыполнении указанных требований объем мощности, поставленный на оптовый рынок, определяется в соответствии с пунктом 51 настоящих Правил.

Пунктом 50 Правил оптового рынка определено, что условия обеспечения участником оптового рынка работы генерирующего оборудования в соответствии с заданным системным оператором режимом, исполняются, если каждый час в отношении каждой единицы генерирующего оборудования выполняются, в том числе следующие требования: мощность генерирующего оборудования, указываемая в уведомлениях о составе и параметрах генерирующего оборудования, подаваемых системному оператору в соответствии с пунктом 6 Правил оптового рынка, соответствует предельному объему поставки мощности генерирующего оборудования участника оптового рынка, уменьшенному на объем мощности генерирующего оборудования, выведенного в ремонт, согласованный в установленном порядке с системным оператором, с учетом величины технологических ограничений на производство или подачу в сеть электрической энергии и (или) мощности, а минимальная мощность блочного генерирующего оборудования, указываемая в уведомлениях о составе и параметрах генерирующего оборудования, подаваемых системному оператору в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, соответствует минимальному значению мощности генерирующего оборудования, согласованному системным оператором; максимальное значение мощности генерирующего оборудования не уменьшалось, а минимальное значение мощности блочного генерирующего оборудования не увеличивалось по сравнению с величиной, указываемой в подаваемых системному оператору в соответствии с пунктом 6 Правил оптового рынка уведомлениях о составе и параметрах генерирующего оборудования или согласованной в соответствии с Договором о присоединении с системным оператором; участником оптового рынка соблюдены параметры выбранного системным оператором генерирующего оборудования, что подтверждается в том числе отсутствием допущенных этим участником по собственной инициативе отклонений объемов фактического производства электрической энергии от плановых в соответствующей группе точек поставки на величину более 15 МВтч и величину, соответствующую выработке электрической энергии с использованием 5 процентов установленной мощности соответствующего генерирующего оборудования.

Согласно пункту 51 Правил оптового рынка с целью подтверждения факта поставки и принятия мощности, а также определения проданного (приобретенного) на оптовом рынке объема мощности системный оператор определяет объем мощности, фактически поставленной на оптовом рынке в соответствующем календарном месяце, в отношении каждого генерирующего объекта по итогам каждого календарного месяца в соответствии с требованиями настоящего пункта и условиями договора о присоединении к торговой системе оптового рынка. Указанный объем мощности определяется с использованием полученных от организации коммерческой инфраструктуры данных коммерческого учета произведенной электрической энергии и сведений об объемах электрической энергии, предлагаемых в ценовых заявках на продажу электрической энергии, поданных участниками оптового рынка для участия в конкурентном отборе ценовых заявок на сутки вперед. Объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок, рассчитывается системным оператором исходя из предельного объема поставки с учетом выполнения поставщиком условий поддержания генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электрической энергии.

Объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок с использованием генерирующих объектов, мощность которых подлежит оплате по договорам о предоставлении мощности, признается равным разности минимальной из величин предельного объема поставки мощности и объема установленной мощности генерирующего объекта, уменьшенной на объем недопоставки мощности, определяемый в соответствии с пунктом 52 Правил оптового рынка, и объема потребления мощности на собственные и хозяйственные нужды соответствующего генерирующего объекта в пределах максимальных объемов потребления электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды, определяемых в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

При выполнении поставщиком всех условий поддержания генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электрической энергии объем недопоставки мощности равен нулю.

На основании пункта 52 Правил оптового рынка при невыполнении (частичном невыполнении) поставщиком условий поддержания генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электрической энергии объем недопоставки мощности определяется системным оператором в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка с применением коэффициентов, установленных пунктами 53-55 Правил оптового рынка.

В соответствии с производственной деятельностью ТЭЦ, турбоагрегат ст.№6 имеет ключевое значения для производства электрической энергии и мощности, с целью дальнейшей реализацией на оптовом рынке и исполнению обязательств перед покупателями мощности, принятых на себя всеми поставщиками мощности по всем договорам.

Учитывая изложенное, в результате задержки в ремонте турбоагрегат ст.№6, АО «ОТЭК» не имело возможности по поддержанию в полном объеме своего генерирующего оборудования в соответствующей группе точек поставки, зарегистрированной за АО «ОТЭК» на оптовом рынке в состоянии готовности к выработке электрической энергии в соответствии с заданным системным оператором режимом, что, в свою очередь, привело к недопоставке объемов мощности на оптовый рынок.

В обоснование исковых требований истец ссылается на  то, что  последствием применения указанных выше коэффициентов с учетом установленной для АО «ОТЭК» цены мощности (тарифа) является снижение стоимости мощности АО «ОТЭК», что, в свою очередь, привело к недополучению АО «ОТЭК» причитающихся ему денежных средств за поставку мощности на оптовом рынке.

В соответствии с пунктом 5.6.1. Регламента определения объемов фактически поставленной мощности Системный оператор определяет объем недопоставки мощности на оптовый рынок по группе точек поставки по формуле 35.1., который публикуется по итогам отчетного месяца по форме 3 Приложения 1 к Регламенту.

В результате, за период с 26.08.2018 по 09.11.2018 объем недопоставки мощности из-за продления ремонта Турбоагрегата ст.6 составил 176,649 МВт, что привело к невозможности исполнения в полном объеме договоров АО «ОТЭК» с иными организациями о поставке мощности.

В обоснование исковых требований истец ссылается на  то, что  размер убытков АО «ОТЭК» составил 64 508 360 рублей 03 коп., расчет убытков АО «ОТЭК» в отношении мощности, поставляемой по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, произведен согласно разделу 13 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, с применением положений Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 1172, Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности, а также результатов аналитического расчета упущенной выручки, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности за расчетный период с 26.08.2018 по 09.11.2018, произведенного по данным, предоставленным АО "АТС", АО «ОТЭК» как субъекту оптового рынка.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить задолженность, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

В представленном в материалы дела отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал, ссылаясь на то, что сумма убытков, которую Заказчик предъявляет ООО "ЭРСМ" к оплате, возникла в результате действий (бездействия) самого Заказчика (п. 1 настоящего отзыва) при отсутствии вины ООО «ЭРСМ», также наличие и размер убытков не обоснованы, не доказаны и не подтверждены надлежащим образом, Заказчиком не представлено необходимых доказательств понесенных убытков, а представленный расчет не содержит информации, позволяющей достоверно установить их размер и определить правомерность расчета.

Отказывая в удовлетворении требований,  суд исходит из следующего.

Понятие убытков и правила их определения регламентированы в статьях 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также неполученные расходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушавшее права, получило вследствие этого доход, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещение наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньше, чем такие доходы.

Из смысла данной статьи следует, что  при этом истцом должна быть доказана и материалами дела подтверждаться причинно-следственная связь между возникшим у истца вредом в виде денежной суммы и действиями (бездействием) ответчика, по вине которого, как утверждает истец, причинен указанный вред.

Согласно ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности. В связи с чем лицо, требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения обязательств, наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками, а также их размер в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд не может согласиться с доводами истца по следующим основаниям.

В порядке ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Требуя возмещения реального ущерба, лицо, право которого нарушено, обязано доказать размер ущерба, причиненную связь между ущербом и действиями лица, нарушившего право, а в случаях когда законом или договором предусмотрена презумпция невиновности должника – также вину.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд  установил, что истец не доказал наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и документально не подтвердил причинение ему убытков действиями ответчика, в связи с чем исковое заявление признается судом необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Кроме того, условиями спорного договора предусмотрена возможность начисления неустойки за просрочку выполнения работ по договору.

Расходы по госпошлине распределены в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 15, 309, 310, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации  руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска – отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья В.П. Сорокин