РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-6128/22-27-40

г. Москва

26 августа 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 04 августа 2022года

Полный текст решения изготовлен 26 августа 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в открытом  судебном заседании рассмотрев дело по иску

истец:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЕКАР" (199178, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4-Я В.О. ЛИНИЯ, 65, ЛИТЕР А, ОФИС 16Н, ОГРН: 1027800556530, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2002, ИНН: 7801178126, КПП: 780101001)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")" (121205, ГОРОД МОСКВА, СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ТЕРРИТОРИЯ, ЛУГОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, КОРПУС 2, ОГРН: 1107746949793, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2010, ИНН: 7701897582, КПП: 773101001)

о взыскании задолженности в размере 5 647 775 руб. 50 коп.

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЕКАР" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")" (далее – ответчик)  о взыскании задолженности в размере 5 647 775 руб. 50 коп.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 27.12.2018 года между ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» и ООО «Управляющая компания «Бекар» был подписан Договор № Д18-200-801, предметом которого было совершение юридических и фактических действий по коммерческому управлению, техническому менеджменту и эксплуатации недвижимого имущества (далее-договор).

19.02.2018 года ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» прекратило деятельность в качестве юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Объединенная  дирекция  по  проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»).

07.03.2019 года между ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») и ООО «Управляющая компания «Бекар» было подписано Дополнительное соглашение № 1 к Договору № Д18-200-801.

Согласно пункту 1 Дополнительного соглашения № 1 предметом указанного соглашения была обязанность ООО «Управляющая компания «Бекар выполнить работы по замене внутренних систем холодного и горячего водоснабжения в четырех жилых корпусах объекта «Квартал 9», входящий в состав среднеэтажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково».

В соответствии с пунктом 2 Дополнительного соглашения № 1 цена работ по соглашению была определена в 11 295 551 рублей.

Как указано в пункте 17 Дополнительного соглашения № 1 оплата выполненных работ производится ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») в течение 15 рабочих дней с даты представления счета на оплату.

13.06.2019 года ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») платежным поручением № 1545 уплатило аванс за выполнение работ по Дополнительному соглашению № 1 в размере 5 647 775,5 рублей.

27.02.2019 года ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») подписало Акт № 01/01 о приемке выполненных работ по форме КС-2 на 2 997 105,6 рублей.

27.02.2020 года ООО «Объединенная дирекция по проектированию и оительству центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра «Сколково») подписало Акт № 01/02 о приемке шолненных  работ  по форме КС-2 на 2 358 714,86  рублей.

27.02.2020 года ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») подписало Акт № 01/03 о приемке выполненных работ по форме КС-2 на 2 351 391,86 рублей.

27.02.2020 года ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») подписало Акт № 01/04 о приемке выполненных работ по форме КС-2 на 3 588 338,68 рублей.

Таким образом, общий объем выполненных работ составил  11 295 551 рублей.

27.02.2020 года ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») подписало справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на 11 295 551 рублей.

С учетом ранее уплаченного аванса сумма задолженности за выполненные работы составила5 647 775,50 рублей.

30.10.2020 года ООО «Управляющая компания «Бекар» выписало счет на оплату № 709 на 5 647 775,50 рублей.

12.11.2020 года почтовым отправлением с идентификатором № 19404448058209 ООО «Управляющая компания «Бекар» направило в адрес ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»), в том числе, счет на оплату № 709 от 30.10.2020 года на 5 647 775,5 рублей.

19.11.2020 года письмом за № 3876-ОДПС-ИП ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») отказалось оплачивать полученный счет № 709 от 30.10.2020 года.

12.10.2021 года досудебная претензия была направлена в адрес ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»).

В соответствии с пунктом 13.5 Договор № Д18-200-801 в случае возникновения споров стороны примут все меры к досудебному урегулированию спора. При этом каждая из сторон вправе обратиться для разрешения спора в арбитражный суд по истечении 15 календарных дней с даты получения второй стороной претензии.

По состоянию на 30.11.2021 года ответа на претензию получено не было.

Задолженность за выполненные работы ответчиком до настоящего времени не оплачена.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения с исковыми требованиями в суд.

Исследовав и оценив письменные доказательства, суд считает исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ - обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии  таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота  или  иными обычно предъявляемыми требованиями. Статья 310 ГК РФ указывает  на то, что односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его» ( п.1 ст.702 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу п. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно п. 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Ответчик возражая против удовлетворения исковых требований указал, что решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2021 по делу № А40-20873/2021-181-146, с ООО «УК Бекар» в пользу ООО «ОДПС Сколково» взысканы 8 034 032,36 руб. убытков по агентскому договору № Д-18-200-501 от 27.12.2018, а также 63 170,00 руб. государственной пошлины 

Девятым арбитражным апелляционным судом от 22.02.2022 по делу № А40-20873/2021-181-146, решение Арбитражного суда города Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Для исполнения вступившего в силу судебного акта по делу № А40-20873/2021-181-146, Арбитражным судом города Москвы 16.03.2022 выдан исполнительный лист серии ФС № 039616984.

Ответчик направил в адрес ООО «УК Бекар» заявление № 2339-ИП от 02.08.2022 о прекращении встречных однородных обязательств путем зачета на сумму 5 647 775,50 руб., в том числе НДС по агентскому договору № Д18-200-501 от 27.12.2018, тем самым полностью прекратив требование, по которому предъявлен иск, зачетом.

Как уже выше отмечено, задолженность на сумму 5 647 775,50 руб. по агентскому договору № Д18-200-501 от 27.12.2018 зачтена в счет 5 647 775,50 руб. убытков, подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом по делу № А40-20873/2021-181-146.

Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств», обязательства могут быть прекращены зачетом после предъявления иска по одному из требований. В этом случае сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске (статьи 137, 138 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее -АПК РФ), так и в возражении на иск, юридические и фактические основания которых исследуются судом равным образом (часть 2 статьи 56, статья 67, часть 1 статьи 196, части 3, 4 статьи 198 ГПК РФ, часть 1 статьи 64, части 1-3.1 статьи 65, часть 7 статьи 71, часть 1 статьи 168, части 3, 4 статьи 170 АПК РФ). В частности, также после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражении на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом.

Доводы истца признаны судом необоснованными и несостоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ  доказательство признается арбитражным  судом достоверным, если в результате его проверки и исследовании выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Таким образом, исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на истца. 

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.И. Крикунова