329/2022-146930(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-14820/2022

город Вологда

13 декабря 2022 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести изменения в государственный контракт от 03.12.2021 № 4-194,  заключенный между обществом с ограниченной ответственностью  «Мостсервис» и казенным учреждением Вологодской области «Управление  автомобильных дорог Вологодской области».  

В пункте 3.1. контракта слова «окончание - до 01 сентября 2022 года  (включительно)» заменить словами «окончание - до 31 марта 2023 года  (включительно)».  

График выполнения проектных и изыскательских работ (приложение  № 2 к контракту) изложить в редакции: 

 № п.п.  

Наименование основных видов  

работ 

Расчетная  

цена, руб. 

Срок сдачи  

1 

2 

3 

4 

1 

Технический отчет по инженерным  

изысканиям 

940 000,00  

03 марта 2022 г.  

2 

Проектная документация  

2 160 000,00  

15 января 2023 г.  

3 

Положительное заключение  государственной экспертизы о  

соответствии результатов  

инженерных изысканий  

требованиям технических  

700 000,00  

 

регламентов и положительного  

заключения государственной 

экспертизы о соответствии 

проектной документации  требованиям технических  

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям,  

требованиям в области охраны  

окружающей среды, требованиям  государственной охраны объектов  

культурного наследия,  требованиям к безопасному  

использованию  

атомной энергии, требованиям  

промышленной безопасности,  

требованиям  к обеспечению надежности и  

безопасности  электроэнергетических систем и  

объектов 

электроэнергетики, требованиям 

антитеррористической  

защищенности  объекта, заданию застройщика или  

технического заказчика на  

проектирование,  результатам инженерных  

изысканий, о  достоверности определения  

сметной стоимости 

31 марта 2023 г. 

 

Итого 

3 800 000,00  

 

НДС 20 % * 

- 

 

Итого по контракту  

3 800 000,00  

 

Пункт 15 Описание объекта закупки (Технического задания) изложить в  

редакции: «15. Срок сдачи документации Заказчику: 15.1. Срок выполнения работ: Начало – с даты заключения Контракта; 

Окончание – по 31 марта 2023 года (включительно).».  Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

Судья Н.Ю. Курпанова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 24.03.2022 6:11:00

Кому выдана Курпанова Наталья Юрьевна