312/2022-203584(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-6171/2022

город Саратов

08 сентября 2022 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Симстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов в течение 30 дней со дня вступления в  законную силу решения суда по настоящему делу устранить нарушения, допущенные при  проведении работ по контракту № 111 от 14.10.2021, выполнив следующие виды работ:  

 № п/п 

Наименование работ и затрат  

Единица  измерения  

Количество 

1 

2 

3 

4 

1 

Разборка покрытий кровель: из стальных профилированных листов 

100 м2  

9,29 

2 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш:  мауэрлатов  

100 м2  

9,29 

3 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш:  стропил со стойками и подкосами из досок  

100 м2  

9,29 

4 

Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных  стальными тяжами  

т 

0,2597 

5 

Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях  (армпояс)  

м3 

9,126 

7 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и  обертывание рулонными материалами  

100 м  

0,64 

8 

Установка стропил 

м3 

21,69 

9 

Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм 

100 м2  

9,29 

 

10 

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей  готовыми составами для обеспечения: первой группы  огнезащитной эффективности по НПБ 251  

100 м2  

27,135  

11 

Монтаж кровли из профилированного листа для  объектов непроизводственного назначения: средней  

сложности 

100 м2  

9,6275  

12 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты,  свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  

100 м2  

0,12 

13 

Устройство: фронтонов 

100 м2  

0,3375  

14 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных  проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  

100 м2  

0,03 

15 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора  строительного с погрузкой вручную  

1 Т 

ГРУЗА  

41,9693  

16 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами  грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на  расстояние до 10 км  

1 Т 

ГРУЗА  

41,9693  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Симстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов в пользу государственного учреждения  здравоохранения Саратовской области «Балтайская районная больница» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), с. Балтай, Балтайский район, Саратовская область  расходы по проведению досудебной экспертизы в размере 60 000 руб., расходы на  проведение судебной экспертизы в размер 19 000 руб., судебные расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба  подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья А.В. Кузьмин  

 Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 15.12.2021 9:55:51

 Кому выдана Кузьмин Андрей Викторович