АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

               634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А67- 10763/2017

г. Томск

01 июня 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 01 июня 2018 года.

 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи С.Г. Аксиньина

при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СибАвтоДор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в лице конкурсного управляющего ФИО2 к Администрация Зырянского района Томской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

 

о взыскании 2 253 224 руб.

 

при участии в заседании:

от истца – без участия (извещен),

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 04.09.2017 №03-10-2945/17, 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоДор» в лице конкурсного управляющего ФИО2 обратилось в арбитражный суд с иском к Администрация Зырянского района Томской области о взыскании 2 253 224 руб. задолженности по муниципальному контракту №0365300007614000001-0133825-01.

В обоснование заявленных требований истец сослался на статьи 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), указав, что ответчик имеет задолженность в размере 2 253 224 руб. за выполненные истцом работы по муниципальному контракту №0365300007614000001-0133825-01 от 10.04.2014.

Ответчик в отзыве на исковое заявление от 30.03.2018 исковые требования не признал, указав, что истцом было предъявлено ответчику к оплате документов на общую сумму 8 616 491,78 руб., которые оплачены ответчиком в полном объеме. Таким образом, по мнению ответчика, с учетом отсутствия каких-либо иных документов, подтверждающих факт выполнения работ, Администрация Зырянского района не имеет задолженности перед ООО «СибАвтоДор» по факту выполнения работ в рамках муниципального контракта №0365300007614000001-0133825-01 от 10.04.2014 (л.д. 106-111, т. 1).

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился.

Ответчик в судебном заседании пояснил, что все выполненные истцом работы оплачены ответчиком в полном объеме, в удовлетворении исковых требований просил отказать.

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя истца.

Заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, по итогам открытого аукциона в электронной форме Администрацией Зырянского района (муниципальный заказчик) от имени муниципального образования «Зырянский район» и обществом с ограниченной ответственностью «СибАвтоДор» (подрядчик) 10.04.2014 заключен муниципальный контракт №0365300007614000001-0133825-01 (л.д. 113-132, т. 1).

В соответствии с условиями контракта подрядчик обязался собственными силами с использованием собственного или арендованного оборудования, техники и персонала или силами, привлеченных субподрядных организаций, за свой риск, выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт плоскостных сооружений в 

<

...> МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (площадки и ограждения) в соответствии с рабочими чертежами, сводным сметным расчетом (приложение №1 к контракту), и техническим заданием (приложение №2), графиком выполнения работ (приложение №3) и сдать объект, готовый к эксплуатации муниципальному заказчику в установленные контрактом сроки.

Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном контрактом. Виды и объемы работ указаны в локальных сметах сводного сметного расчета (приложение №1) и техническом задании (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью контракта. Перечень используемых материалов определены в локальных сметных расчетах (приложение №1) и сводной ведомости ресурсов (приложение к сводному сметному расчету), которые являются неотъемлемой частью контракта (пункты 1.1-1.3).

Согласно пункту 3.3. оплата осуществляется после выполнения отдельных этапов работ (этапы работ определены в плане-графике) и приемки работ, подписания сторонами акта выполненных работ № КС-2 и получения документов: справки о стоимости выполненных работ № КС-3 и счет-фактуры в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, а если работы приняты с недостатками, после устранения недостатков. Акт выполненных работ КС-2 подписывает представитель организации, осуществляющий строительный контроль на объекте. Справку КС-3 подписывает заказчик.

Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика (платежными поручениями). Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета заказчика (пункт 3.4).

В соответствии с пунктом 7.12 подрядчик должен выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (приложение №3 к Контракту), условиями контракта и сдать результат выполненных работ заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию по акту приемки законченного капитальным ремонтом объекта рабочей комиссией (форма акта).

По окончании выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим Контрактом, Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ. Форма акта предоставляется подрядчику заказчиком (пункт 7.13).

Работы могут быть сданы и оплачены поэтапно. Приемка отдельного этапа работ осуществляется после выполнения подрядчиком всех работ, предусмотренных контрактом по месту выполнения работ, и оформляется актом формы №КС-2 и справкой о стоимости работ формы № КС-3 (пункт 7.14).

Подрядчик направляет заказчику упомянутые в пункте 7.14 документы в 3 экз., подписанные со своей стороны, не позднее, чем за 5 (пять) дней до срока окончания работ по контракту путем вручения их под роспись представителю заказчика.

Вручение акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3 является извещением заказчика подрядчиком о готовности работ к сдаче заказчику. Справка КС-2, переданная заказчику должна быть подписана представителем организации, осуществляющей строительный контроль (л.д. 119, т. 1).

В соответствии с условиями контракта сторонами были подписаны акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), выставлены счета-фактуры на общую сумму 8 616 491,78 руб. (л.д. 133-151, т. 1; л.д. 1-107, т. 2).

Иных актов, свидетельствующих о выполнении и приемке работ в материалы дела не представлено.

Платежными поручениями ответчик оплатил выполненные работы в размере 8 616 491,78 руб. (л.д. 108-118, 122, т. 2).

Актом приемки законченного капитальным ремонтом объекта, предъявленный к приемке капитальный ремонт плоскостных сооружений в 

<

...> МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная площадка» (площадки и сооружения), отвечающий санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам принят рабочей комиссией от подрядчика (л.д. 119-120, т.2).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Применительно к договору строительного подряда к числу обязательств, возлагаемых на заказчика, положения статьи 740 ГК РФ относят обязанность оплаты заказчиком выполненных подрядчиком работ. Указанной обязанности корреспондирует безусловная обязанность подрядчика по подтверждению факта выполнения предъявленных к оплате работ.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ (пункт 1 статьи 746 ГК РФ).

Оплате подлежат фактически выполненные работы, основанием для оплаты является сдача результатов работ. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (статья 711, пункт 4 статьи 753, статьи 746 ГК РФ, пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Предъявляя требование о взыскании стоимости выполненных работ, подрядчик должен доказать факт выполнения работ и их стоимость.

В отношении заявленных требований о взыскании 2 253 224 руб. задолженности, представленные в материалы дела акты формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ (КС-3), подписанные представителями сторон без замечаний, а также платежные поручения об оплате выполненных работ, являются достаточными доказательствами, подтверждающими факт выполнения истцом строительных работ и оплату их ответчиком.

Представленный истцом односторонний акт сверки (л.д. 14, т. 1), на основании которого истцом заявлены требования о взыскании 2 253 224 руб. задолженности судом не принимается, поскольку акт сверки не является первичным документом, не подписан со стороны ответчика и не подтверждает наличие задолженности.

В связи с этим оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется.

При подаче искового заявления государственная пошлина не уплачивалась, истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в размере 34 266 руб.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оплату государственной пошлины суд относит на истца, поскольку решение принято не в его пользу.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибАвтоДор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 34 266 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                           С.Г. Аксиньин