АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

21 декабря 2020 года

 

Дело № А33-29533/2020

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15 декабря 2020 года.

В полном объёме решение изготовлено 21 декабря 2020 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Куликовой Д.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ТД-Проект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к краевому государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании пени,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 - представителя по доверенности от 17.03.2020;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТД-Проект" (далее – истец) обратился(ось) в Арбитражный суд Красноярского края с иском к краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее – ответчик) о взыскании пени за период с 26.12.2019 по 06.07.2020 в размере 374 148 руб. 31 коп.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 12.10.2020 возбуждено производство по делу.

На основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» суд определил: окончить подготовку дела к судебному разбирательству, завершить предварительное судебное заседание, продолжить рассмотрение настоящего дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, о чем вынесено протокольное определение от 12.11.2020.

Протокольным определением от 12.11.2020 судебное разбирательство по делу отложено до 15.12.2020.

Ответчик в судебное заседание 15.12.2020 не явился, о времени и месте судебного разбирательства уведомлен надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Огласил доводы, изложенные в возражениях на отзыв ответчика.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика, по имеющимся в деле письменным доказательствам.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края от 03.02.2020 по делу №А33-30628/2019 установлены следующие обстоятельства:

«Между краевым государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ТД-ПРОЕКТ» (поставщик) заключен государственный контракт от 20.08.2018 № 442-02-18\Ф.2018.398997 с дополнительным соглашением № 1 от 14.12.2018 по поставке товаров на строящийся объект «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск», по условиям которого поставщик обязуется поставить машины посудомоечные промышленные на строящийся объект «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск», а заказчик обязуется принять и оплатить товар (пункт 1.1. контракта).

Наименование, количество, технические характеристики, ассортимент, комплектация и цена товара указываются в спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

Поставка включает в себя также обязательство поставщика по упаковке, маркировке, погрузке, доставке, хранению, разгрузке, сборке, расстановке и креплению в помещениях, подключению к инженерным сетям и вводу оборудования в эксплуатацию, утилизации упаковочного материала (пункт 1.3 контракта).

Срок поставки пунктом 1.5 контракта установлен с 20.09.2018 по 20.10.2018.

Валюта платежа и цена настоящего контракта устанавливаются в российских рублях. Цена контракта составляет 12 857 330 руб. 20 коп., в том числе НДС 18% в размере 1 961 287 руб. 66 коп. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством (пункт 2.1 контракта).

При поставке поставщик должен предоставить следующие документы:

- накладная (товарная или товарно-транспортная накладная) в 2 экземплярах;

- счёт-фактура в 1 экземпляре (при необходимости), либо универсальный передаточный документ в 2 экземплярах;

- документ (копия распорядительного документа по организации или доверенность), подтверждающий полномочия лица на право подписания документов (при необходимости);

- документы, подтверждающие соответствие передаваемого товара нормативам безопасности и качества, ил их копии, заверенные надлежащим образом (сертификат соответствия (декларация о соответствии), в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию о соответствии), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);

- свидетельство государственной регистрации таможенного союза (СГР ТС, санитарно-эпидемиологическое заключение, санитарный сертификат, гигиенический сертификат) на товар, выданное Роспотребнадзором РФ, или его копию, если товар подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической сертификации);

- паспорт (при наличии), инструкция по эксплуатации (руководство по эксплуатации) на товар на русском языке (пункт 2.5 контракта).

Оплата поставленного товара производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком товарной или товарно-транспортной накладной (пункт 2.6 контракта).

Пунктом 2.7 контракта установлено, что обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счёта заказчика.

Оказание услуг по сборке, установке и монтажу товара осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учётом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара и законодательством Российской Федерации и включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу товара в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара (пункт 3.3 контракта).

Оказание услуг по вводу в эксплуатацию товара включает пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров товара (пункт 3.4 контракта).

Поставщик обязан известить заказчика путём направления письменного уведомления не менее чем за 5 (пять) календарных дней до момента отгрузки товара о точном времени и дате доставки, сборки, расстановки оборудования по факсимильной связи. Поставщик обязан в письменном уведомлении указать ответственное лицо со стороны поставщика с указанием контактного телефона и электронной почты (пункт 4.1 контракта).

Поставщик осуществляет поставку после подтверждения срока отгрузки товара со стороны заказчика. Заказчик направляет подтверждение о сроке отгрузки товара в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующего за днём получения уведомления по факсимильной связи или по электронной почте от поставщика (пункт 4.2 контракта).

Доставка товара осуществляется поставщиком на объект, расположенный по адресу: Россия, 

<

...> (пункт 4.7 контракта).

Осмотр и приёмка товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности производится заказчиком на объекте в течение 5 рабочих дней, после осуществления поставщиком сборки, расстановки, крепления, подключения, утилизации упаковочного материала (пункт 4.9 контракта).

Датой поставки товара считается дата подписания сторонами акта сдачи-приёмки товара, составленного согласно форме, установленной в приложении № 2 к настоящему контракту. Приёмка по акту сдачи-приёмки товара производится приёмочной комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек. Акт сдачи-приёмки товара подписывается всеми членами приёмочной комиссии и утверждается руководителем заказчика в течение 5 рабочих дней, либо направляется мотивированный отказ от его подписания в тот же срок (пункт 4.10 контракта).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации в размере, установленном положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 №570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063» (пункт 6 контракта).

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 6.1 контракта).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы (пункт 6.1.1 контракта).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (пункт 6.1.3 контракта).

Пунктом 3 дополнительного соглашения № 2 от 14.12.2018 к государственному контракту №442-02-18\Ф.2018.398997 от 20.08.2018 стороны договорились изложить пункт 2.6 контракта в следующей редакции:

«Оплата по контракту осуществляется в следующем порядке:

1) 90% от общей стоимости товара, предусмотренного спецификацией, будет оплачено в течение 15 дней с момента подписания сторонами товарной накладной, подтверждающей поставку товара, в соответствии с п.4.1., 4.2. настоящего контракта, при этом товар остаётся на безвозмездном хранении у поставщика, о чём стороны составляют и подписывают договор ответственного хранения на складе поставщика, находящемся в г.Красноярске или близлежащих территориях. Подписание заказчиком накладной не означает осмотр и приёмку товара заказчиком по качеству, ассортименту и комплектности;

2) 10% от общей стоимости товара по факту разгрузки, сборки, расстановки и крепления в помещениях, подключения к инженерным сетям и вводу оборудования в эксплуатацию, в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи приёмки товара (приложение №2 к контракту), в соответствии с п.4.9, 4.10 настоящего контракта;

3) после предоставления перечня документов, предусмотренных пунктом 2.5 контракта;

4) после выполнения условий пункта 2.7 контракта».

Пунктом 1 дополнительного соглашения № 3 к государственному контракту №442-02-18\Ф.2018.398997 от 20.08.2018 стороны договорились изложить пункт 2.6 контракта в следующей редакции:

«Оплата по контракту осуществляется в следующем порядке:

1) 90% от общей стоимости товара, предусмотренного спецификацией, будет оплачено в течение 15 дней с момента подписания сторонами товарной накладной, подтверждающей поставку товара, в соответствии с п.4.1., 4.2. настоящего контракта, при этом товар остаётся на безвозмездном хранении у поставщика, о чём стороны составляют и подписывают договор ответственного хранения на складе поставщика, находящемся в г.Красноярске или близлежащих территориях;

2) 10% от общей стоимости товара по факту разгрузки, сборки, расстановки и крепления в помещениях, подключения к инженерным сетям и вводу оборудования в эксплуатацию, в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи приёмки товара (приложение №2 к контракту), в соответствии с п.4.9, 4.10 настоящего контракта;

3) после предоставления перечня документов, предусмотренных пунктом 2.5 контракта;

4) после выполнения условий пункта 2.7 контракта».

В судебном заседании стороны пояснили, что дополнительные соглашения № 2 и № 3 к контракту сторонами не исполнялись, в своих правоотношениях стороны ими не руководствовались.

15.10.2018 поставщик направил заказчику уведомление о готовности оборудования к поставке, монтажу и пусконаладочным работам 19.10.2018 с 10 час. до 16 час. (входящий штамп КГКУ «Управление капитального строительства» 15.10.2018 №8668/18).

В ответ на поступившее уведомление 24.10.2018 КГКУ «Управление капитального строительства» направило ООО «ТД-ПРОЕКТ» предложение о заключении договора ответственного хранения оборудования в связи с отсутствием у заказчика строительной готовности объекта для сборки, установки и ввода в эксплуатацию оборудования.

 

Между КГКУ «Управление капитального строительства» (поклажедатель) и ООО «ТД-ПРОЕКТ» (хранитель) заключен договор ответственного хранения имущества от 22.12.2018, поставляемого в рамках государственного контракта №442-02-18\Ф.2018.398997 от 20.08.2018, по условиям которого поклажедатель передаёт, а хранитель принимает на временное ответственное хранение имущество, указанное в приложении №1 к настоящему договору (пункт 1.1 договора).

Хранение имущества осуществляется хранителем с момента его передачи поклажедателем хранителю по 31.12.2018 включительно (пункт 1.4. договора).

Хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить принятое на хранение имущество, даже если предусмотренный п.1.4 настоящего договора срок хранения ещё не истёк и доставить его на объект по адресу: Россия, 

<

...> (пункт 1.5 договора).

Приложением №1 к договору от 22.12.2018 установлен перечень передаваемого на хранение имущества:

- машина для мойки котлов APACH AK 924 (комплект, 2 шт.);

- машина для мойки котлов Platinum Granules 900 tr plus (комплект, 1 шт.);

- машина посудомоечная конвейерная Platinum PLF 3800 (комплект, 2 шт.).

По акту приёмки-передачи имущества на хранение от 22.12.2018 поклажедатель передал, а хранитель принял вышеуказанное имущество.

По товарной накладной № ЦБ-3178 от 05.12.2018 поставщик осуществил передачу товара ответчику на общую сумму 12 857 33 руб. 20 коп. (с учётом НДС). Товарная накладная подписана со стороны ответчика заведующим склада 22.12.2018 и содержит штамп организации ответчика.

На основании произведённого осмотра и выполненных актов по результатам осмотра, ООО «ТД-ПРОЕКТ» обратилось к КГКУ «Управление капитального строительства» с требованием устранить выявленные недостатки, препятствующие началу проведения работ по монтажу оборудования и пусконаладке, что подтверждается направленными в адрес заказчика требованиями от 30.11.2018 №241, от 19.12.2018 №260, от 15.01.2019 №5, от 28.01.2019 №16, от 08.02.2019 №25, от 21.02.2019 №33, от 25.03.2019 №53.

16.04.2019 (исх.№01-236) КГКУ «Управление капитального строительства» уведомило ООО «ТД-ПРОЕКТ» о необходимости произвести монтаж оборудования до 26.04.2019.

По результатам проверки были составлены акты о неготовности объекта к монтажу оборудования и пусконаладочных работ от 29.11.2018, 19.12.2018, 15.01.2019, 25.01.2019, 06.02.2019, 19.02.2019, 21.02.2019, 07.03.2019, 14.03.2019, 16.04.2019, 26.04.2019, 21.05.2019. Указанные акты уполномоченным представителем ответчика не подписаны, акт от 21.05.2019 содержит примечание, согласно которому при осмотре помещений присутствовал представитель КГКУ «УКС» ФИО3, замечаний или возражений с его стороны не поступило, от подписания акта представитель КГКУ «УКС» отказался.

Письмом от 22.03.2019 №69 ООО «ТД-ПРОЕКТ» уведомило заказчика о готовности помещений к монтажу оборудования и просило обеспечить присутствие представителя заказчика на объекте 23.04.2019 в целях проведения совместного осмотра помещений и установления его готовности для монтажа.

Как следует из акта выполненных работ от 25.04.2019, оборудование смонтировано, готово к эксплуатации, акт составлен в присутствии директора пищеблока ФИО4

По акту сдачи-приёмки товара к государственному контракту №442-02-18\Ф.2018.398997 от 20.08.2018 поставщиком передан, а заказчиком принят товар на общую сумму 12 857 330 руб. 20 коп. (акт сдачи-приёмки подписан поставщиком 20.08.2018, 15.08.2019 со стороны поставщика – генеральным директором ООО «ТД-ПРОЕКТ», со стороны заказчика акт подписан ФИО5 и заведующим пищеблоком ФИО4).

Как следует из акта о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию, ООО «ТД-ПРОЕКТ» выполнил монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию оборудования, поставленного по государственному контракту:

- машина для мойки котлов APACH AK 924 (комплект, 2 шт.);

- машина для мойки котлов Platinum Granules 900 tr plus (комплект, 1 шт.);

- машина посудомоечная конвейерная Platinum PLF 3800 (комплект, 2 шт.).

Стоимость оборудования, перечисленного в акте, составила 12 857 330 руб. 20 коп. (с НДС).

Согласно пункту 3 акта, оборудование находится в рабочем и исправном состоянии, выполняет функции, возложенные производителем оборудования.

Согласно пункту 4 акта, заказчик к установленному и введённому в эксплуатацию оборудованию претензий не имеет. Акт подписан поставщиком 20.08.2018, 15.08.2019 подписан со стороны поставщика – генеральным директором ООО «ТД-ПРОЕКТ», со стороны заказчика акт подписан ФИО5 и заведующим пищеблоком ФИО4

26.08.2019 ООО «ТД-ПРОЕКТ» обратилось к КГКУ «Управление капитального строительства» с претензией об оплате долга в размере 12 857 330 руб. 20 коп. В направленной претензии истец указал на отсутствие оснований применения ставки в размере 20% по налогу на добавленную стоимость при отгрузке товара в 2018 году.

16.09.2019 истец уведомил ответчика о начислении пени и применения санкций в виде начисления штрафа, предусмотренной подпунктом «б» пункта 6.1.2 контракта №442-02-18\Ф.2018.398997 от 20.08.2018 за неисполнение обязательств».

 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края от 03.02.2020 по делу №А33-30628/2019 удовлетворены исковые требования ООО «ТД-Проект» к КГКУ «Управление капитального строительства» о взыскании с ответчика - КГКУ «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу истца - ООО «ТД-Проект» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) задолженности в размере 12 857 330 руб. 20 коп. основного долга, 278 575 руб. 49 коп. пени за период 13.09.2019 - 25.12.2019, 5000 руб. штрафа, и об обязании подписать акт сдачи-приемки товара в соответствии с приложением № 2 к контракту № 442-02-18/Ф.2018.398997 от 20.08.2018. 

Постановлением Третьего Арбитражного апелляционного суда 30 апреля 2020 года решение Арбитражного суда Красноярского края от 03.02.2020г. по делу № А33-30628/2019 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба, без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26 августа 2020 года решение Арбитражного суда Красноярского края от 03.02.2020г. по делу №А33-30628/2019 и постановление Третьего Арбитражного апелляционного суда от 30.04.2020 по делу № А33-30628/2019 оставлены без изменения. 

Указанный судебный акт исполнен 07.07.2020, что подтверждено, что подтверждается платежным поручением от 06.07.2020 № 867121 и выпиской по нашему счету № 40702810223300005715 АО «Альфа-Банк». В соответствии с п. 6.1. государственного контракта: «В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)». В соответствии с п. 6.1.1. контракта: «Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы».

Истец начислил 374 148 руб. 31 коп. пени за просрочку оплаты за период с 26.12.2019 по 06.07.2020, что следует из представленного истцом расчета.

В связи с неоплатой задолженности по поставке товара, истец направил в адрес ответчику претензию от 26.08.2020 исх. № 79 об оплате задолженности в виде пени в сумме 374 148 руб. 31 коп. В соответствии с п. 9.3. Государственного контракта № 491-02-18/Ф.2018.425241 от 04.09.2018г. срок рассмотрения претензии: в течение 10 рабочих дней с момента получения. Претензия получена ответчиком 29.08.2020, что подтверждается Отчетом об отслеживании отправления с РПО 66002053000316. На дату подачи искового заявления задолженность не оплачена.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате стоимости поставленного товара, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 374 148 руб. 31 коп. пени. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Заключенный между истцом и ответчиком государственный контракт от 20.08.2018 № 442-02-18\Ф.2018.398997, по своей правовой природе являются договорами на поставку товаров для государственных нужд. Правоотношения сторон из договора поставки для государственных нужд регулируются параграфами 1, 3, 4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), а также положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса. К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим параграфом, применяются иные законы.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края от 03.02.2020г. по делу №А33-30628/2019 удовлетворены исковые требования ООО «ТД-Проект» к КГКУ «Управление капитального строительства» о взыскании с ответчика - КГКУ «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу истца - ООО «ТД-Проект» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) задолженности в размере 12 857 330 руб. 20 коп. основного долга, 278 575 руб. 49 коп. пени за период 13.09.2019 - 25.12.2019, 5000 руб. штрафа, и об обязании подписать акт сдачи-приемки товара в соответствии с приложением № 2 к контракту № 442-02-18/Ф.2018.398997 от 20.08.2018. 

Указанный судебный акт исполнен 07.07.2020, что подтверждено, что подтверждается платежным поручением от 06.07.2020 № 867121 и выпиской по нашему счету № 40702810223300005715 АО «Альфа-Банк». В соответствии с п. 6.1. государственного контракта: «В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)». В соответствии с п. 6.1.1. контракта: «Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы».

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Контрактом установлена ответственность покупателя за нарушение срока оплаты товара в виде пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка РФ от не уплаченной в срок суммы (пункт 6.1.1).

Истец начислил 374 148 руб. 31 коп. пени за просрочку оплаты за период с 26.12.2019 по 06.07.2020, что следует из представленного истцом расчета.

Поскольку суду не представлены доказательства оплаты поставленного товара в срок, определенный договором, истец правомерно считает ответчика просрочившим денежное обязательство.

Расчет пени проверен судом, признан правильным.

С учетом изложенного требование истца о взыскании 374 148 руб. 31 коп. пени подлежит удовлетворению.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве, отклоняются судом как основанные на неверном толковании законодательства.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТД-Проект» 384 631 руб. 31 коп., из них: 374 148 руб. 31 коп. пени, 10 483 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Д.С. Куликова