РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   25 сентября 2024 года    

по делу А33-10769/2024 Красноярск  

«25» сентября 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью СК «АЛЬФА-СТРОЙ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления решения суда по  настоящему делу в законную силу исполнить гарантийные обязательства по контракту №  0119200000122009288 от 17.08.2022, а именно, устранить следующие недостатки  (зафиксированные в акте комиссионного осмотра объекта от 13.05.2024):  

1) в части проезжей части: - устранить просадку асфальтобетонного покрытия в объеме 6 м2 (ПК3+00); 

- выполнить устройство бортового камня в объеме 3 мп. (ПК 4+70, ПК 1+80, ПК  2+00);  

- устранить выбоину на стыке асфальтобетонных покрытий в объеме 10 м2 (заезд на  пр. Ленинградский д. 18г);  

2) в части тротуара: 

- устранить просадку асфальтобетонного покрытия в объеме 268 м2 (ПК 6+00, ПК  5+82, ПК 4+30 h-16см, ПК 4+05 h-5,5см, ПК 3+90 h-11.5см, ПК 3+80 h-7см, ПК 0+70 – ПК  0+00 h-7см;  

- восстановить бортовой камень в объеме 20 мп. (ПК 6+00); 

- восстановить покрытие тротуара, возникшее вследствие пропила барой в объеме 17  м2 (ПК 3+40);  

- выполнить устройство бортового камня в объеме 3 мп. (ПК 3+40).  3) в части газона:  

- восстановить покрытие газона в объеме 200 м2 (ПК 0+00 – ПК 6+00).  4) в части строительного мусора:  

- вывезти строительный мусор в объеме 3 м3; 

- выполнить уборку территории от ПГС и земли в объеме 260 м2.  

Установить и взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Альфа- Строй» в случае неисполнения решения суда в установленный срок в пользу  муниципального казенного учреждения «Управление имущественным комплексом»  судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый календарный день просрочки  исполнения решения суда, начиная с первого дня, следующего за последним днем окончания  установленного судом срока исполнения решения, и до его фактического исполнения  (исполнения обязательства в натуре).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «АЛЬФА-СТРОЙ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  «Управление имущественным комплексом» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000  судебных расходов по государственной пошлине.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.В. Курбатова