63/2023-266539(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-19308/2022

г. Новосибирск

19 сентября 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания помощником  судьи Ведерниковой О.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью управляющая компания  «НовоНиколаевск 1893» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Калифорний» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора: 1) Фонда модернизации и развития  жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований  Новосибирской области (ОГРН 

<

***>), 2) ФИО1,  

об обязании устранить недостатки, при участии представителей: 

истца – ФИО2, доверенность от 16.08.2023, диплом, паспорт;  ответчика - Кане Т.В., директор, выписка ЕГРЮЛ, паспорт;  

третьих лиц - не явились, извещены надлежащим образом, 

руководствуясь статьями 109, 110, , 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Калифорний» в  течение двадцати календарных дней с момента вступления в законную силу  решения суда устранить недостатки работ по капитальному ремонту кровли,  выполненных по адресу: 

<

...> по договору  подряда № 221 от 12.08.2020, осуществив демонтажные работы  поверхностного слоя кровли до основания, монтажные работы по устройству  нового покрытия кровли и иные работы в объеме и по видам, определенных  локальным сметным расчетом (приложение № 2) к экспертному заключению   № 016-20-00004 от 07.08.2023 с соблюдением технологии работ,  обязательных норм и требований, предъявляемых к данным видам работ.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Калифорний»  организовать освидетельствование скрытых работ и приемку работ после их  выполнения с участием представителя общества с ограниченной  ответственностью управляющая компания «Ново-Николаевск 1893».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Калифорний»  в пользу общества с ограниченной ответственностью управляющая компания  «Ново-Николаевск 1893» расходы по уплате государственной пошлины по  иску в размере 6 000 рублей, расходы по оплате судебной экспертизы в  размере 20 000 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Калифорний» 

в пользу общества с ограниченной ответственностью управляющая компания  «Ново-Николаевск 1893» судебную неустойку в размере 5 000 рублей за  каждый день просрочки исполнения судебного акта после истечения срока на  добровольное исполнения решения.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк