АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Воронеж Дело NА14-9719/2023  « 05 » сентября 2023 г.  

Резолютивная часть решения объявлена 05.09.2023. 

Решение изготовлено в полном объеме 05.09.2023. 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО2, г.  Воронеж (ОГРНИП 320366800047602, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «ВЫБОР-ВОСТОК», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору № 78 от 01.10.2021  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик «ВЫБОР» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО3, представитель по доверенности от 14.08.2023; от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен; от третьего лица: явка представителя не обеспечена, извещено; установил: 

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее  - истец) обратился в суд с требованиями к обществу с ограниченной  ответственностью Специализированный застройщик «ВЫБОР-ВОСТОК»  (далее - ответчик) о взыскании 314 649,63 руб. задолженности по договору №  78 от 01.10.2021.  

Определением суда от 14.08.2023 к участию в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета  спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью общество с  ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  «ВЫБОР»  

В судебное заседание ответчик и третье лицо, не явились, о месте и  времени судебного заседания извещены надлежаще. На основании статей  123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

(далее- АПК РФ) судебное заседание проводилось в отсутствие ответчика и  третьего лица.  

Истец уточнил исковые требования в сторону уменьшения и просил  взыскать с ответчика 314 649, 52 руб. задолженности по договору № 78 от  01.10.2021.  

На основании ст. 49, 159 АПК РФ судом приняты заявленные истцом  уточнения к рассмотрению.  

Из материалов дела следует, что между сторонами заключен договор   № 78 от 01.10.2021, согласно условиям которого, подрядчик обязуется  выполнить работы по монтажу систем отопления, водоснабжения и  канализации на объекте (жилой дом), расположенном по адресу: ул. 45  стрелковой дивизии, 251 позиция 1 (п.1.1 договора).  

В силу п. 1.3 договора плательщиком по настоящему Договору является  ООО СЗ «ВЫБОР-ВОСТОК».  

Стоимость работ по договору составляет 7 302 670, 15 руб. и  определяется на основании сметы (Приложение № 1) (далее - Стоимость  работ). Окончательная стоимость работ устанавливается сторонами по факту  выполненных работ на основании актов выполненных работ на момент  окончания строительства. НДС не облагается на основании упрошенной  системы налогообложения (пункт 2.1 договора).  

Согласно пункту 3.1 договора работы по настоящему договору должны  быть выполнены в следующие сроки:  

- начало работ -01.10.2021 г.: - окончание работ -15.04.2022 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 

Во исполнение условий договора истцом выполнены и сданы досрочно  работы по актам формы КС-2, КС-3 № 1 от 15.12.2021 на общую сумму 7 302  670, 15 руб.  

Ответчиком выполненные по договору работы оплачены в полном  объеме.  

15.04.2022 между сторонами было подписано дополнительное  соглашение № 1, согласно условиям которого, подрядчик обязуется  выполнить дополнительные работы по производству сантехнических работ  на объекте по адресу: 

<

...> стрелковой дивизии, 251 позиция I.  Полный перечень работ отражен в Приложение № 1 к настоящему  Дополнительному соглашению. Заказчик обязуется принять выполненные  работы и оплатить обусловленную дополнительным соглашением цену  (пункт 1 соглашения).  

В силу пункта 2 соглашения стоимость работ по настоящему  дополнительному соглашению составляет 314 649, 63 руб., НДС не  облагается на основании упрощенной системы налогообложения.  

Согласно пункту 4 соглашения работы по настоящему дополнительному  соглашению должны быть выполнены в следующие сроки:  

- начало работ - 15.04.2022 г.; - окончание работ - 30.06.2022 г. 

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 

В рамках заключенного дополнительного соглашения № 1 сторонами  подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.06.2022 и справка о  стоимости выполненных работ № 1 от 30.06.2022 на сумму 314 649, 63 руб.  

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по  оплате выполненных работ, истец обратился к последнему с претензией от  27.02.2023.  

Неисполнение требований претензии послужило основанием для  предъявления настоящего иска.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив  все в совокупности, суд находит исковые требования подлежащими  удовлетворению в полном объеме.  

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от  исполнения обязательства не допускается.  

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из договора №  78 от 01.10.2021 и дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2022, к  возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 ГК РФ о  договорах подряда.  

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик в соответствии с  пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи  результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом  и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.  

В соответствии с п. 3 дополнительного соглашения № 1 оплата  стоимости работ осуществляется заказчиком в следующем порядке:  

- 80% от стоимости работ перечисляется на расчетный счет Подрядчика  в течение 20-ти рабочих дней с момента подписания актов приемки  выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ  (КС-3);  

- окончательный расчет производится по истечении 3 месяцев после  полного окончания работ и подписания сторонами актов приемки  выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ  (КС-3).  

Согласно статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

Факт выполнения работ по дополнительному соглашению  подтверждается представленными в материалы дела актом о приемке  

выполненных работ № 1 от 30.06.2022 и справкой о стоимости выполненных  работ № 1 от 30.06.2022, подписанными ответчиком без возражений  относительно объема, качества и стоимости работ.  

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, факт выполнения  работ не оспорил, а также доказательств прекращения обязательств в  соответствии со статьями 407, 408 ГК РФ, либо обстоятельств,  освобождающих его от исполнения обязательства по оплате выполненных  работ в полном объеме, суду не представил.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2  статьи 9 АПК РФ).  

Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые  ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений,  считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены  или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно  существа заявленных требований.  

Поскольку заявленная истцом сумма долга подтверждена  перечисленными доказательствами, суд считает, что требования истца о  взыскании 314 649,52 руб. задолженности подлежат удовлетворению.  

При подаче иска истцом по платежному поручению № 28 от 18.04.2023  уплачена государственная пошлина в сумме 9 293 руб., что составляет  размер государственной пошлины.  

На основании статьи 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца следует  взыскать 9 293 руб. расходов по государственной пошлине.  

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик «ВЫБОР-ВОСТОК», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО2, г. Воронеж (ОГРНИП  320366800047602, ИНН 

<

***>) 314 649, 52 руб. задолженности по  договору № 78 от 01.10.2021 и 9 293 руб. расходов по государственной  пошлине.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Арбитражного суда Воронежской области Е.С. Завидовская