776/2023-162821(2) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   № 09АП-26926/2023

Дело № А40-13653/23

г. Москва

19 июня 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи И.А. Титовой, рассмотрев  апелляционную жалобу ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7"  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2023, принятое в порядке упрощенного  производства  

по делу № А40-13653/23, 

о по иску ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7" (ИНН: 

<

***> ОГРН:  

<

***>) к ответчику ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИМЕНИ Г.Е. СУХАРЕВОЙ  ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (ИНН: 

<

***> ОГРН:  

<

***>) о взыскании 529 612 руб. 07 коп. задолженности по текущему ремонту  помещений Филиала № 1 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (3 этаж, лестницы Б),  

без вызова сторон У С Т А Н О В И Л: 

 ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7" (далее –истец) обратилось с исковым  заявлением в суд о взыскании с ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИМЕНИ Г.Е.  СУХАРЕВОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (далее -  ответчик) 529 612 руб. 07 коп. задолженности по текущему ремонту помещений Филиала   № 1 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (3 этаж, лестницы Б).  

 Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2023 г. исковое заявление  принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

 Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2023 года исковые  требования оставлены без удовлетворения.  

 Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой  просил указанное решение суда первой инстанции отменить, поскольку считает его  незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в жалобе.  

От ответчика поступил отзыв. 

Апелляционная жалоба рассмотрена без вызова сторон применительно положениям  части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с  учетом рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции.  

Обращаясь в суд, истец сослался на следующие основания для предъявления иска.  

 Как усматривается из материалов дела, в 2021 году между истцом и ответчиком  заключены два контракта на выполнение комплекса работ по текущему ремонту  

помещений Филиала № 1 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»: №  0373200026421000069_50473 и № 0373200026421000089_50473 (текущий ремонт в здании  филиала (3 этаж, лестницы Б)).  

 В ходе проведения работ договоры расторгнуты, при этом не выплатив подрядчику  стоимость закупленных им для выполнения контрактов строительных и отделочных  материалов, а именно штучного паркета на сумму 529 612,07 рублей, которые подрядчик  передал заказчику по акту от 10 февраля 2022 г. Цена на переданные заказчику материалы  согласовывалась сторонами в сметах.  

 Истец при передаче паркета заказчику указал в акте приема-передачи его  закупочную стоимость. 01 декабря 2022 г. подрядчик обратился к заказчику с претензией,  в которой просил в срок до 10.12.2022 г. возвратить паркет, либо выплатить его стоимость,  однако ответчик данную претензию проигнорировал, тем самым причинив истцу убытки в  виде стоимости штучного паркета, не оплаченного заказчиком. Вышеизложенные  

обстоятельства послужили основанием для обращения с исковыми требованиями в суд.   Отказывая в иске, суд верно установил следующее.  

 09.08.2021 между Ответчиком и Истцом заключен Гражданско-правовой  договорбюджетного учреждения № 037320002642100006950473 (далее - Контракт № 069),  согласно которому Истец  обязуется по заданию Ответчика выполнить работы по текущему ремонту помещений  Филиала № 1 ГБУЗ «НИЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (

<

...>) (далее - работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1  к Контракту, являющееся его  неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Ответчик обязуется принять  результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных  Контрактом.  

Реестровый номер Контракта 2

<

***> 21 000097. 

Согласно п. 2.1 Контракта № 069 цена Контракта составляет 9 376 104 (девять  миллионов триста семьдесят шесть тысяч сто четыре) рубля 32 копейки, НДС не  облагается на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.  

В соответствии с п.3.1 Контракта № 069 сроки выполнения работ по Контракту  установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью  Контракта: в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта.  

Согласно п.п. 12.1,12.2. Контракта № 069 Контракт вступает в силу со дня его  подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2021 г. Истечение срока действия  Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением гарантийных  обязательств, предусмотренных ст. 6 Контракта и обязательств Заказчика по оплате работ,  выполненных в течение срока действия Контракта).  

Ответчик принял фактически выполненные работы Истцом по Контракту № 069 в  сумме 4 023 481 руб. 31 коп., о чем свидетельствуют подписанные Истцом и Ответчиком  Актами сдачи -приемки выполненных работ, в том числе экспертными заключениями,  платежным поручением № 4960 от 27.12.2021, платежным поручением № 3807 от  20.10.2022, счетом на оплату № 24 от 10.12.2021, счетом на оплату № 6/1 от 22.03.2022.  

Истец иных результатов работ по Контракту № 069 Ответчику не предоставлял, что  подтверждается претензиями Ответчика исх. № 2272-22 от 22.06.2022 г., исх. № 2234-22 от  20.06.2022.  

Вышеуказанные документы размещены (зарегистрированы) Ответчиком в сети  Интернет в разделе реестр Контрактов Единой информационной системы в сфере  закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document- info.html?reestrNumber=2772506078621000097&contractInfoId=76600699.  

09.11.2022 Контракт № 069 Ответчиком переведен на статус «Исполнение  завершено», реестровая запись № 2772506078621000097  

(https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/event-  

journal.html?reestrNumber=2772506078621000097&contractInfoId=76600699).  

11.08.2021 между Ответчиком и Истцом был заключен Гражданско-правовой  договор бюджетного учреждения № 037320002642100008950473 (далее - Контракт № 089),  согласно которому Истец обязуется по заданию Ответчика выполнить работы по текущему  ремонту в здании филиала (3 этаж, лестницы Б) ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой  ДЗМ» (далее - работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1  к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а  Ответчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на  условиях, предусмотренных Контрактом.  

Реестровый номер контракта 2

<

***> 21 000100. 

Согласно п. 2.1 Контракта № 089 цена Контракта составляет 8 000 000 (восемь  миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.  

В соответствии с п.3.1 Контракта № 089 сроки выполнения работ по Контракту  установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью  Контракта: в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента заключения  Контракта.  

Согласно п.п. 12.1,12.2. Контракта № 089 Контракт вступает в силу со дня его  подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2021 г. Истечение срока действия  Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением гарантийных  обязательств, предусмотренных ст. 6 Контракта и обязательств Заказчика по оплате работ,  выполненных в течение срока действия Контракта).  

Ответчик принял фактически выполненные работы Истцом по Контракту № 089 в  сумме 2 157 464 руб. 04 коп., о чем свидетельствуют подписанные Истцом и Ответчиком  Актами сдачи -приемки выполненных работ, в том числе экспертными заключениями,  платежным поручением № 4964 от 28.12.2021, платежным поручением № 3808 от  20.10.2022, счетом на оплату № 25 от  

15.12.2021, счетом на оплату № 6/2 от 22.03.2022. 

Истец иных результатов работ по Контракту № 089 Ответчику не предоставлял, что  подтверждается претензиями Ответчика исх. № 2235-22 от 20.06.2022, исх. № 2271-22 от  22.06.2022.  

Вышеуказанные документы размещены (зарегистрированы) Ответчиком в сети  Интернет в разделе реестр Контрактов Единой информационной системы в сфере  закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document- info.html?reestrNumber=2772506078621000100&contractlnfold=73055483.  

27.10.2022 Контракт № 089 Ответчиком переведен на статус «Исполнение  завершено», реестровая запись № 2772506078621000100  (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/event- 

journal.html?reestrNumber=2772506078621000100&contractInfoId=73055483).  

Утверждение Истца о том, что Ответчик вынудил Истца согласиться на расторжение  Контрактов, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела (Письма Ответчика исх.   № .23 от 02.03.2022, исх. 24 от 02.03.2022).  

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную  работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

Следовательно, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате  выполненных работ является сдача результата работ заказчику.  

Более того, Истец в период с 22.03.2022 по 27.10.2022, работы по Контрактам не вел  (не осуществлял), работы Ответчику не сдавал.  

Согласно п. 4.11. Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту № 089, № 069)  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки, Истец вывозит  

принадлежащие строительные материалы, привлеченные к выполнению работ  строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество с  восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по  благоустройству в местах размещения строительных городков и уборкой мусора за счет  собственных средств.  

В соответствии с п.п. 6.9, 6.12 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту   № 089, № 069) Истец не предоставляет складские помещения, раздевалки, душевые, места  для приема пищи. Подрядчик самостоятельно организует раздевалки для рабочих и склад  для хранения материала в местах, согласованных с Заказчиком. Подрядчик несет  ответственность за сохранность всех материалов, а также оборудования используемых  для реализации Контракта.  

Таким образом, у Ответчика отсутствует обязанность по приемке строительных и  отделочных материалов, необходимых Истцу для выполнения работ по Контрактам,  Контрактами не предусмотрено возмещение Ответчику закупленных им материалов  необходимых для выполнения работ по Контрактам.  

Ответчик не чинил препятствий (не ограничивал) Истцу в вывозе его строительных  и отделочных материалов после расторжения Контрактов.  

17 апреля 2023 года Ответчик обратился к Истцу с просьбой оказать содействие в  передаче штучного паркета третьим лицам, оставленного Истцом на объекте Ответчика,  что подтверждается Актами приема-передачи строительных (отделочных) материалов.  

Таким образом, Истец, подписав 17 апреля 2023 г. акты приема-передачи  строительных (отделочных) материалов подтвердил факт передачи Истцом штучного  паркета третьим лицам (индивидуальному предпринимателю ФИО1,  индивидуальному предпринимателю ФИО2) для укладки пола по адресу: 

<

...>.  

Таким образом, принимая во внимание указанные выше нормы материального  права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд апелляционной  инстанции считает, что оснований для отмены решения суда не имеется.  

Нарушения судом первой инстанции норм материального и процессуального права  не установлено.  

Расходы по уплате госпошлины по жалобе относятся на истца.  

Учитывая приведенные данные и руководствуясь ст.ст.110, 266, 268, 269, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 13.04.2023 по делу № А40-13653/23  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в  Арбитражный суд Московского округа.  

Председательствующий судья: И.А. Титова 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.