209/2021-39982(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А17-8717/2019

г. Иваново

26 мая 2021 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г.,  

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Жилищная управляющая компания -  Профессионал» (ИНН 3702120600; ОГРН 1153702022198) и общества с  ограниченной ответственностью «Стандарт управления № 1» (ИНН 3702225307;  ОГРН 1193702017706)  

к Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН 3702952084; ОГРН  1143700000740)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту  крыши многоквартирного дома № 114 по проспекту Строителей в городе Иванове,  а также об установлении судебной неустойки в размере 5 000 руб. за каждый день  неисполнения судебного акта и взыскании расходов на оплату услуг эксперта,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  РФ,  

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ООО «Стандарт управления № 1» удовлетворить  частично.  

Обязать НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Ивановской области» в течение двух месяцев с даты вступления решения  суда в законную силу устранить недостатки выполненных работ по капитальному  ремонту крыши многоквартирного дома № 114 по проспекту Строителей в городе  Иванове, а именно:  

1) Обеспечить выпуск картин карнизного свеса за грань стены минимум на  120 мм в соответствии с п. 7.4 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».  

2) Соединения картин карнизных свесов выполнить двойным лежачим  фальцем и уплотнить концы капельников - внахлестку в соответствии с п. 7.4 МДС  12-33.2007 «Кровельные работы».  

3) Выполнить соединение картин настенных желобов, на длине  водоотводящего желоба более 8 метров (данных участков на кровле 8: четыре со  

стороны главного фасада, четыре со стороны дворового фасада) в виде двойного  лежачего фальца с герметизирующими прокладками в соответствии с  требованиями п. 7.7 СП 17.13330.2011 «Кровли».  

4) Выполнить устройство водоприемных воронок и соединение отворотов  картин настенного желоба с картиной лотка угловыми фальцами в соответствии с  требованиями п. 7.5 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».  

5) Выполнить устройство защиты водостоков от засорения в соответствии с  требованиями п. 9.9 СП «Кровли».  

6) Выполнить демонтаж гидроизоляционной пленки на всей площади  кровли.  

7) Выполнить обшивку слуховых окон кровельной сталью на тех участках,  где она отсутствует, и обеспечить ее герметичность.  

8) Выполнить устройство примыканий кровли к вентиляционным фановым  трубам и трубостойкам в соответствии с требованиями п. 7.12 МДС 12-33.2007  «Кровельные работы».  

9) выполнить тепловую изоляцию чердачного перекрытия. 

В удовлетворении требований о выведении вентиляционных труб,  расположенных в чердаке, за его пределы, и об освобождении входных  вентиляционных отверстий (продухов), расположенных в стенах карнизной зоны  по периметру здания, отказать.  

2. Установить для НО «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ивановской области» на случай неисполнения в  установленный срок настоящего решения судебную неустойку в пользу ООО  «Стандарт управления № 1» в следующем размере: за первую неделю  неисполнения решения – 2 000 руб., за вторую неделю – 3 000 руб., за третью –  4 000 руб., начиная с четвертой недели – по 5 000 руб. за каждую полную неделю  просрочки исполнения решения.  

3. В удовлетворении искового заявления ООО «Жилищная управляющая  компания – Профессионал» отказать.  

4. Взыскать с НО «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ивановской области» в пользу ООО «Стандарт  управления № 1» расходы на проведение судебной экспертизы в размере 70 200  руб.  

5. Взыскать с НО «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ивановской области» в пользу ООО «Жилищная  управляющая компания - Профессионал» расходы по оплате государственной  пошлины в размере 6 000 руб.  

6. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд (610007, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3) в течение месяца со дня принятия в  соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса  РФ.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

Судья Скобелева Е.Г. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.05.2020 8:48:31Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна