РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 20 августа 2025 года по делу А33-9283/2025 Красноярск  

«20» августа 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение пятнадцати календарных дней с момента вступления в силу решения суда исполнить пункт 10. Технических условий № 8000581632 к договору № 20.2400.11530.23 от 28.12.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно:  

1. Организационные мероприятия: 1.1. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя. 

1.2. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.  

2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции судействующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством".  

2.1. от ВКЛ 10 кВ ф. 139-34 аренда до границ, установленных правоустанавливающими документами Заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;  

2.2. определить проектом необходимость установки и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВКЛ 10 кВ ф. 139-34 аренда. Тип и место установки разъединителя определить проектом;  

2.2.3. выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) 2 905 616,16 руб. неустойку за нарушение сроков выполнения обязательств по договору за период с 29.06.2024 по 19.08.2025, неустойку за нарушение сроков выполнения обязательств по договору за период с 20.08.2025 по день фактического исполнения в размере 6 967,90 (что составляет 0,25% от  

суммы договора 2 787 161,78 руб.) за каждый день просрочки, а также 96 440 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В случае неисполнения решения суда по истечении пятнадцати календарных дней со дня вступления в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) судебную неустойку в размере 2500 руб. за каждый день неисполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по день фактического исполнения.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 30 728 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья М.Ю. Винокурова