АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А23-682/2018

07 мая  2018 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 03 мая  2018 года.

Полный текст решения изготовлен 07 мая 2018 года.

        Арбитражный суд Калужской области  в составе судьи Чехачевой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург», 629306, Ямало-ненецкий автономный округ, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, 

к   обществу   с    ограниченной   ответственностью  «Сити Строй Групп», 248017, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

о взыскании 512 604 руб.,

без участия сторон,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к обществу  с   ограниченной  ответственностью    "Сити Строй Групп" о взыскании пени по договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту № КР-ЗиС-69382-16 от 11.01.2016 в сумме 512 604 руб.

Истец и ответчик своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте судебного заседания в силу положений ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещены надлежащим образом.  

Истец представил в суд ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя. 

Исследовав материалы дела, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, по итогам проведения открытого запроса предложений, на основании протокола от 29.12.2015  №1/0001/15/5.1/006693850/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/15.12.2015 между обществом с ограниченной ответственностью "Газпром Добыча Уренгой" (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Сити Строй Групп" (Подрядчик) 11.01.2016 был заключен договор подряда № КР-ЗиС-69382-16 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов Общества, в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы «Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений жилья и инфраструктуры  вахтового поселка Ямбург и г. Новый Уренгой  ООО «Газпром добыча Ямбург» согласно графику производства работ (приложение № 1) и квартальному заданию (Приложение № 2), а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. 

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как предусмотрено п. 3.1 договора, цена работ подрядчика по строительству объекта составляет 162 885 736 руб. 80 коп. (с НДС).

Срок и очередность выполнения работ в силу п. 4.1 договора определена графиком производства работ (Приложение № 1).

Кроме того, сторонами были подписаны дополнительные соглашения № 1 от 11.04.2016 и № 2 от 26.10.2016, в соответствии с которыми стоимость работ по договору была уменьшена и  составила  142 571 505 руб. 80 коп. (с НДС).

В силу п.  15.1 договора подрядчик гарантировал выполнение всех работ  в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора. 

Между тем ответчиком работы, предусмотренные к выполнению во 2 и 3 кварталах 2016 года,  предусмотренные п. 1, 4, 6, 7, 22, 28, 29 Графика производства работ выполнены с нарушением сроков, что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ (т. 1, л.д. 37-39, 61-150, т. 2 1-152, т. 3 л.д. 1-30).

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истцом на сумму задолженности начислены пени в размере 512 604 руб.

Претензия истца об уплате неустойки № 13/824 от 19.01.2017 осталась без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу статей 309 и 310  Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

В связи с нарушением срока выполнения работ истцом на основании п. 17.5 договора, предусматривающего, что за нарушение согласованных сторонами  сроков выполнения работ истец вправе взыскать с ответчика пени в размере 0, 03% от стоимости неисполненного и/или исполненного  ненадлежащим образом исполненного обязательства,  начислена неустойка на сумму невыполненных работ в размере 512 604 руб.

 Расчет неустойки судом проверен и  признан правильным.

Ответчик факт нарушения обязательства по договору не отрицал, расчет неустойки не оспорил. 

Предусмотренный сторонами в п. 17.5. договора размер неустойки –  0,03% за каждый день просрочки – является адекватным и соизмеримым с нарушенным интересом заказчика по договору при нарушении подрядчиком сроков предоставления банковской гарантии. Доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств ответчик суду не представил. Не представил ответчик и доказательств отсутствия его вины в просрочке исполнения вышеуказанного обязательства, в том числе доказательства принятия им в целях надлежащего исполнения обязательства всех мер и с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру этого обязательства и условиям оборота.

Размер неустойки в 0,03 % за каждый день просрочки определен по свободному усмотрению сторон; не превышает обычно применяемую за нарушение обязательства ставку для расчета пени (0,1 %), признаваемую судебной практикой, при отсутствии доказательств обратного, адекватной мерой ответственности за нарушение договорных обязательств (определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.01.2014 № ВАС-250/14).

Учитывая изложенное, на основании ст. 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исковые требования подлежат удовлетворению. 

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по  уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Сити Строй Групп», г. Калуга, в пользу общества  с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ», г. Новый Уренгой, пени в размере 512 604 (пятьсот двенадцать тысяч шестьсот четыре) рублей 34 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 252 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья

   И.В. Чехачева