АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-4695/2022

г. Чебоксары

14 июля 2022 года

Резолютивная часть решения вынесена 13.07.2022

Полный текст решения изготовлен 14.07.2022

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Манеевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  

дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП 312212408900061, ИНН 

<

***>, Россия 429950, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сара-строй», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия 428034, г. Чебоксары, Чувашская Республика, шоссе Ядринское д. 3 а

о взыскании 1 603 097 руб. 91 коп.

при участии

от истца: ФИО3- доверенность  от 13.05.2022 (сроком действия 1 год),

от ответчика: ФИО4 - доверенность от 09.12.2021 № 12 (сроком действия 1 год), 

установил

индивидуальный предприниматель ФИО2 (истец) обратился в арбитражный суд с  иском к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сара-строй» (ответчик) о взыскании по договору от 16.12.2020 №16/12-20/070-189 - 87 918 руб. 40 коп.  долга  и 6 837 руб. 55 коп. пеней за период с  19.01.2021 по 05.04.2022, а также по договору от  21.12.2020 №21/12-20/070-192 – 1 413 438 руб. 80 коп. долга и 94 903 руб. 16 коп. пеней за период с 29.01.2021 по 05.04.2022.

Доводы мотивированы положениями  статей 309, 310, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал в полном объеме по основаниям,  изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика в заседании суда поддержал позицию, изложенную в отзыве от 12.07.2022, признал наличие задолженности в общей сумме 1 501 357 руб. 20 коп., в части пеней – просил применить статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, положения  Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», а также необходимость начисления пеней на сумму долга и учета  установленного  договорами ограничения с учетом остатка  долга. Просил уменьшить размер государственной пошлины со ссылкой на тяжело материальное положение.

Суд в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   размещал информацию о совершении процессуальных действий по делу на сайте Арбитражного суда Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.chuvashia.arbitr.ru, и на сайте   www.arbitr.ru в разделе «Картотека арбитражных дел».

Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителей сторон, суд установил следующее.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор от 16.12.2020 №16/12-20/070-189, по условиям которого истец обязался по поручению ответчика выполнить работы по монтажу системы вентиляции В1, В2 согласно локальной смете, а ответчик обязался принять результат работ и оплатить его на согласованных в договоре условиях (пункт 1.1. договора).

Стоимость  работ и порядок расчетов согласованы  в разделах 2, 3 и 6 договора.

Согласно пункту 2.1. договора стоимость работ по данному договору составляет 200 000 руб.. 

 Оплата заказчику  производится в следующем порядке: 70% от общей стоимости договора  140 000 руб. – авансовый  платеж, оставшиеся 30% - по факту выполнения  им работ в течении 7 календарных дней после предоставления подписанных представителями технадзора заказчиков  актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3.

Сроки выполнения работ согласованы в разделе 4 договора.

Во исполнение обязательств по договору от 16.12.2020 истцом выполнены работы, в  подтверждение в материалы дела представлены подписанные обеими сторонами  акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 от 11.01.2021 №1.

Кроме того, между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор от 21.12.2020 №21/12-20/070-192, по условиям которого истец обязался по поручению ответчика выполнить работы по монтажу системы вентиляции и дымоудаления  ПВ1, ПД1, ВД1 согласно локальной смете, а ответчик обязался принять результат работ и оплатить его на согласованных в договоре условиях (пункт 1.1. договора).

Стоимость  работ и порядок расчетов согласованы  в разделах 2, 3 и 6 договора.

Согласно пункту 2.1. договора стоимость работ по данному договору составляет 2 500 000 руб.. 

 Оплата заказчику  производится в следующем порядке: 70% от общей стоимости договора  1 750 000 руб. – авансовый  платеж, оставшиеся 30% - по факту выполнения  им работ в течении 7 календарных дней после предоставления подписанных представителями технадзора заказчиков  актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 и исполнительно-технической документации.

Сроки выполнения работ согласованы в разделе 4 договора.

Во исполнение обязательств по договору от 21.12.2020 истцом выполнены работы, в  подтверждение в материалы дела представлены подписанные обеими сторонами  акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 от 21.01.2021 №№1, 2.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Объем, стоимость, качество выполненных работ ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспаривались. Более того, ответчик наличие задолженности в заявленном истцом размере признал. 

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом принимается заявленное ответчиком признание иска в части долга. Таким образом, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца 1 501 357 руб. 20 коп. долга.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании пеней по договорам .

Согласно пункту 1 статьи  329 Гражданского кодекса Российской Федерации   исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков  (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 10.2 договоров заказчик при нарушении договорных обязательств  выплачивает подрядчику   за нарушение сроков оплаты пени  в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3%.

Расчет истца судом проверен. Ответчиком представлен контррасчет, заявлено об уменьшении пеней согласно  статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимости применения положения  Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», а также начисления пеней на сумму долга и учета  установленного  договорами ограничения с учетом суммы долга.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Правительство Российской Федерации постановляет: ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Постановление от 24.12.2020 N 44) разъяснено, что в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Таким образом, приостановлено действие порядка начисления (взыскания) неустоек, предусмотренного законодательством и условиями заключенных договоров (установлен мораторий), в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и, соответственно, юридические лица и предприниматели освобождены от уплаты неустоек за соответствующий период.

Названный мораторий действует в отношении неустоек (пеней, штрафов), подлежавших начислению за период просрочки с 1 апреля 2022 г. до 1 октября 2022 г., независимо от расчетного периода (месяца), по оплате которой допущена просрочка, в том числе, если сумма основного долга образовалась до 1 апреля 2022 г., если законом или правовым актом не будет установлен иной срок окончания моратория.

Что касается ходатайства об уменьшении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, то суд считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

Суду предоставлено право снижать размер неустойки, в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств.

Именно в статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21.12.2000 № 263-О  также разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Таким образом,  в части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Согласно  разъяснениям, данным Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, в пункте 73 постановления от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик должен обосновать явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. 

Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе, основанные на средних показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов).

Более того, согласно пункту 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Информационном письме от 14.07.1997 № 17 указал, что критериями для установления несоразмерности в каждом конкретно случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и другие обстоятельства.

Неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства должником, средством возмещения потерь, вызванных нарушением должником своих обязательств, и не должна служить средством обогащения кредитора, но при этом неустойка направлена на восстановление прав кредитора, нарушенных вследствие не исполнения/ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно разъяснениям, данным Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в абзаце 2 пункта 2 постановления от 22.12.2011 №  81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Исходя  из положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

На основании вышеизложенного, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела документы, учитывая конкретные обстоятельства дела, компенсационный характер пени (неустойки), учитывая, что в настоящее время  учетная ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляет 9,5 %, приняв во внимание  буквальное толкование слов и выражений согласно статье 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащихся в пунктах 2.1., 3.3., 10.2  договоров от 16.12.2020 и от 21.12.2020, в частности установленное договорами 3% ограничение от суммы договоров – 200 000 руб. по договору от 16.12.2020 и 2 500 000 руб. по договору  от 21.12.2020, а также положения Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами",  суд находит обоснованным требование о взыскании пеней по договору от 16.12.2020 – в сумме 6 000 руб. за период с 19.01.2021 по 31.03.2022 и по договору от 21.12.2020 – в сумме 75 000 руб. за период с  29.01.2021 по 31.03.2022, в остальной части – отказать. По мнению суда, при  установленных при  рассмотрении дела обстоятельствах,   исходя из фактических взаимоотношений сторон, указанная сумма неустойки обеспечивает соблюдение баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и наступившими у потерпевшего негативными последствиями. Иное из материалов дела не следует. 

Расходы по уплате государственной пошлины суд распределяет  по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Учитывая принятие истцом требований в части долга в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации  истцу следует возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 из федерального бюджета 19 102 руб. государственной пошлины.

Что касается ходатайства ответчика об освобождении или уменьшении государственной пошлины, то суд считает необходимым отметить следующее.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины отнесены на ответчика в полном объеме.

Частью 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 Кодекса.

По смыслу вышеуказанной нормы размер государственной пошлины может быть уменьшен судом только в случае, если государственная пошлина в федеральный бюджет еще не уплачена.

После зачисления государственной пошлины в бюджет указанные средства в силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации становятся судебными расходами стороны арбитражного процесса, уменьшение которых (в части государственной пошлины) законодательством не предусмотрено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Это означает, что при удовлетворении исковых требований на ответчика возлагается обязанность по компенсации истцу денежных сумм, равных понесенных им судебным расходам.

Арбитражным законодательством суду не предоставлено право уменьшать размер подлежащих взысканию с ответчика в пользу истца расходов по уплате государственной пошлины, как и статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации не предусмотрена возможность возврата государственной пошлины по данному основанию.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с   общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сара-строй», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  в пользу    индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП 312212408900061, ИНН 

<

***>, сумму основного долга  1 501 357 (Один миллион пятьсот одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 20 коп., пени в   общей сумме   81 000 (Восемьдесят одна тысяча) руб., 8 187 (Восемь тысяч сто восемьдесят семь) руб.  в возмещение понесенных истцом расходов по  оплате государственной пошлины,  в остальной части требований отказать,  

 Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2, ОГРНИП 312212408900061, ИНН 

<

***>, из федерального бюджета 19 102 (Девятнадцать тысяч сто два)  руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от  16.05.2022 за № 24  в сумме 29 031 (Двадцать девять тысяч тридцать один)  руб..  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.В. Манеева