16/2019-12368(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-10547/2018

г. Благовещенск

13 марта 2019 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Наринской Светланы Алексеевны,  

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи до перерыва  секретарем судебного заседания ФИО1, после перерыва ФИО2  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного казенного  учреждения Амурской области «СТРОИТЕЛЬ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к Администрации города Тынды (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о возложении обязанности принять затраты, сформированные после передачи объекта  

третьи лица: Министерство имущественных отношений Амурской области, Управление  муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Тынды  

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд решил:  

 Обязать Администрацию города Тынды (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  течение 5 рабочих дней после вступления в законную силу решения суда принять путем  подписания актов приема-передачи объектов нефинансовых активов затраты,  сформированные после передачи объекта: «Строительство многоквартирного дома в  

<

...>» в сумме 34 340 633,60 руб., в том числе затраты,  сформированные в результате:  

- решения Арбитражного суда Амурской области от 14.09.2012 № А04-5311/2012  дополнительные работы в размере 24 880 551,80 руб.;   

- технического учета и инвентаризации квартир объекта «Жилой дом (достройка), ул.  Студенческий проезд, г. Тында» с выдачей технических паспортов в размере 87  282,00 руб.;   

- измерения объемной активности радона в воздухе жилых и общественных помещений  объекта: «Жилой дом (достройка), ул. Студенческий - проезд, г. Тында» в размере 9  156,80 руб.;   

- СМР по контракту № 2 от 18.01.2011 по объекту «Жилой дом по ул. Студенческий проезд  г. Тында в размере 285 939,00 руб. (КС-3 от 24.08.2012 № 4);   

- СМР по контракту № 2 от 18.01.2011 по объекту «Жилой дом по ул. Студенческий проезд  г. Тында в размере 1 995 491,00 руб. (КС-3 от 25.07.2012 № 3);  

- СМР по контракту № 2 от 18.01.2011 по объекту «Жилой дом по ул. Студенческий проезд  г. Тында в размере 442 986,00 руб. (КС-3 от 25.06.2012 № 2);  

- СМР по контракту № 2 от 18.01.2011 по объекту «Жилой дом по ул. Студенческий проезд  г. Тында в размере 6 413 947,00 руб. (КС-3 от 25.05.2012 № 1);  

- поставка электрических плит на объект «Жилой дом (достройка) по ул. Студенческий  проезд, г. Тында» в размере 225 280,00 руб.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия. 

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья С.А. Наринская  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 06.04.2018 3:54:34

Кому выдана Наринская Светлана Алексеевна