АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-2225/2024

г. Астрахань

24 сентября 2024 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Козиной Т.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игликовой Д.Е.,  

Руководствуясь статьями 167-170, 173, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести в муниципальный контракт № 02 -ЕП от 31.03.2023 г. заключенный между  

 Муниципальным бюджетным учреждением города Астрахани "Мосты и каналы" и  

Обществом с ограниченной ответственностью "Гривна" следующие изменения: 

 пункта 2.1. Контракта изложить в следующей редакции: «Окончание работ: 01.07.2025 года.»; Первое предложение пункта 14.1 Контракта изложить в следующей редакции: 

«Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 01.07.2025  года.»;  

пункта 2 Приложения № 1 Контракта изложить в следующей редакции: 

«Окончание выполнения работ: 01.07.2025 года.» 

По всему тексту Приложения № 2 Контракта заменить словами: "окончание выполнения  

работ -июль 2025 года" Изложить График исполнения контракта- Приложение № 3 в следующей редакции: 

 № 

Наименование работ  

Подтвержда

ющий  документ  

Сроки выполнения работ  

Цена с НДС 20%, руб. 

Начало  

Окончание  

1.1 

Проектирование объектов:  

-система ливневой  канализации с насосной  станции,  

расположенной по  адресу ул. Бурова, 2 А в  Кировском районе г.  Астрахани,  

-система ливневой  

Проектная  

документация,  имеющая  

положительное  заключение  

Государственной 

экспертизы о  

достоверности  

С даты заключения 

контракта  

01.07.2025 г.  

24 сентября 2024 года 

канализации с насосной станцией,  

расположенной по адресу пл. К. Маркса, 3 А в Кировском районе г. Астрахани  

 сметной 

стоимости  

1.2 

Прохождение и получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости по объектам:  

-система ливневой канализации с насосной станции, расположенной по адресу ул. Бурова, 2 А в Кировском районе г. Астрахани,  

-система ливневой канализации с насосной станцией, расположенной по адресу пл. К. Маркса, 3 А в Кировском районе г. Астрахани  

 Положительное   заключение  

 государственной   экспертизы о  

достоверности  

сметной  

 стоимости  

Срок прохождения  

экспертизы 4,5 

месяца 

2 

Реконструкция объектов:  

система ливневой  канализации с насосной  станции, расположенной  по адресу ул. Бурова, 2 А  в Кировском районе г.  Астрахани,  

-система ливневой 

канализации с насосной  станцией, расположенной  по адресу пл. К. Маркса, 3  А в Кировском районе г.  Астрахани  

После разработки  проектной  

документации и  получения  

положительного  заключения в  

течение 7 месяцев  

Не позднее 01.07.2025 г. 

Взыскать с Муниципального бюджетного учреждения города Астрахани "Мосты и  каналы" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Гривна" судебные  расходы по уплате госпошлины в сумме 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Т.В. Козина