Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-33931/2022

02 февраля 2023 года

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения вынесена 26 января 2023 года  Решение в полном объеме изготовлено 02 февраля 2023 года  

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Гордеевой Н.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Кабельные системы и Технологии», ОГРН:  

<

***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Монтажно-наладочное управление № 1 корпорации акционерной компании «Электросевкавмонтаж»,  ОГРН: 

<

***>, г. Краснодар, о взыскании 2 315 724 руб. 01 коп.  

при участии в судебном заседании представителя: 

от истца: ФИО2 на основании доверенности от 23.03.2022г., личность  удостоверена паспортом, представлен диплом,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Кабельные системы и Технологии»,  ОГРН: 

<

***>, г. Челябинск, (далее – истец), обратилось в Арбитражный суд  Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «Монтажно-наладочное управление № 1 корпорации акционерной  компании «Электросевкавмонтаж», ОГРН: 

<

***>, г. Краснодар, (далее –  ответчик), о взыскании задолженности в связи с неисполнением обязательств по оплате  товара и выполненных работ по договору от 12 ноября 2021г № 121121, неустойку за  нарушения сроков оплаты в размере 1 469 301 руб. 60 коп.  

Определением суда от 21.10.2022 исковое заявление принято к производству (л.д. 1).  

Ответчик представителей в судебное заседание не направил, об арбитражном  процессе по делу извещен надлежащим образом в соответствии с ч. 1 ст. 123 АПК РФ (л.д.  79).  

В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, просил взыскать с  ответчика сумму основного долга в размере 618 617 руб. 66 коп., сумму неустойки за  период с 18.11.2021 по 24.01.2023 в размере 1 697 106 руб. 35 коп. с продолжением  начисления неустойки с 25.01.2023 в размере 0,1% за каждый день от суммы  просроченной задолженности по день фактической уплаты долга/внесения авансовых  платежей, взыскать почтовые расходы в сумме 1 469 руб. 64 коп.  

Суд, руководствуясь ст. 49 АПК РФ, удовлетворил ходатайство об изменении  размера исковых требований.  

Отзыв с указанием возражений по иску в нарушение ч. 1 ст. 131 АПК РФ ответчиком  не представлен. В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 АПК РФ арбитражный суд рассмотрел  дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика. При  этом в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в  обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой  стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не  вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения  

относительно существа заявленных требований. Лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий  (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).  

Неявка в судебное заседание сторон, извещенных надлежащим образом, не  препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (ч. 3, ч. 5 ст. 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Дело рассматривается по правилам ч. 2, ч. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим  образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.  

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в  соответствии со ст.ст. 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд приходит к следующим  выводам.  

Как следует из материалов дела, между истцом (далее – поставщик) и ответчиком  (далее - покупатель) заключен договор поставки № 121121 от 12.11.2021 (л.д. 18-21).  

Согласно п. 1.1 договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и  принять товары, по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с  товаросопроводительными документами (УПД, накладными, счетами-фактурами) и  спецификациями, приложениями (при наличии), которые являются неотъемлемыми  приложениями к настоящему договору.  

В соответствии с п. 1.2 договора неотъемлемыми приложениями к настоящему  договору количество, наименование, ассортимент и цена товара согласовываются  сторонами дополнительно при подаче и утверждении Заявки и отражаются в  спецификации.  

Периодичность поставок, количество и ассортимент каждой партии Товара  определяются по согласованию сторон, на основании заявки Покупателя с учетом  потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.  

Наименование товара, его комплектность, ассортимент и стоимость стороны  согласовывают в одном из товаросопроводительных документах (товарная накладная,  товарно-транспортная накладная, акт приема передачи товара) и спецификации (при  наличии). При подписании спецификации и товаросопроводительного документа  сторонами, наименование товара, его комплектность, ассортимент и стоимость считается  согласованным и изменению не подлежит, данное условие является существенным  условием договора.  

Порядок оплаты товара согласован сторонами в пункте 2.3 договора: 

2.3.1. Покупатель осуществляет первую часть предоплаты в размере 30 % (Тридцати  процентов) от стоимости заказа, согласованного сторонами в соответствующей  спецификации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания спецификации.  

2.3.2. Покупатель осуществляет вторую часть предоплаты в размере 35 % (Тридцати  пяти процентов) от стоимости заказа, согласованного сторонами в соответствующей  спецификации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Поставщиком  Покупателю по электронной почте уведомления о готовности товара к отгрузке.  

2.3.3. Покупатель осуществляет оставшуюся часть оплаты в размере 35 % (Тридцати  пяти процентов) от стоимости заказа, согласованного сторонами в соответствующей  спецификации в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки товара и  подписания Покупателем УПД или товарной накладной.  

2.3.4. Стороны вправе предусмотреть иной порядок расчетов в спецификации. 

Приемка Товара по качеству, комплектности и количеству товарных единиц в  упаковке производится на складе грузополучателя в течение 2 (двух) рабочих дней с  момента получения Товара непосредственно грузополучателем, но в любом случае не  позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поставки. В течение указанного срока  Покупатель обязан произвести необходимые действия, обеспечивающие такую приемку, в  том числе осмотреть Товар на предмет наличия явных недостатков (повреждений,  

некомплектности и т.п.). Если Покупатель в течение указанного срока не направит своих  претензий Поставщику, Товар будет считаться принятым по качеству, комплектности и  количеству в полном объеме и без замечаний, и в дальнейшем Покупатель не вправе  предъявлять такие претензии (пункт 5.2. договора).  

По пункту 5.3. договора в случае неявки представителя Поставщика в течение 3-х  рабочих дней с даты получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда,  приемка Товара по качеству и внутритарному количеству производится с участием  представителя организации, не являющейся заинтересованным и/или аффилированным  лицом по отношению к Покупателю.  

Согласно п. 8.3. договора, за нарушение сроков оплаты (в том числе предоплаты)  товара Покупатель обязан оплатить Поставщику по его письменному требованию  (претензия) неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день  просрочки.  

Согласно п. 9.2. договора при не достижении согласия путем переговоров, споры  между сторонами разрешаются в Арбитражном суде по Челябинской области.  Претензионный порядок разрешения споров по настоящему договору обязателен, срок  ответа на претензию - 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии.  

Действительность указанного договора и наличие по нему обязательств, стороны не  оспаривают.  

Также между Сторонами к Договору были заключены: 

- Спецификация № 1 от 12.11.2021 (Приложение № 1 и № 2 (Порядок выполнения  работ по шеф-надзору за монтажом и пуско-наладки Товара, согласованного сторонами в  Спецификации № 1 от 12.11.2021 на общую сумму 189 000 руб., в т.ч. НДС, л.д. 22-24) на  общую сумму 341 978 руб. 40 коп. в т.ч. НДС;  

- Спецификация № 2 от 12.11.2021 (Приложение № 3, л.д. 26) на общую сумму 316  536 руб. в т.ч. НДС);  

- Спецификации № 3 от 12.11.2021 (Приложения № 4 и № 5 (Порядок выполнения  работ по шеф-надзору за монтажом и пуско-наладки Товара, согласованного сторонами в  Спецификации № 3 от 12.11.2021 на общую сумму 250 000 руб., в т.ч. НДС 20%, л.д. 27- 29) на общую сумму 15 606 386 руб. 64 коп. в т.ч. НДС).  

При этом сторонами согласован следующий порядок оплаты (п. 3.1.-3.3.  Спецификаций, п. 2.2.1. приложений № 2,5):  

Покупатель осуществляет: 

1.1. Оплату работ в следующем порядке: предоплата в размере 56 700,00 рублей  (Приложение № 2) и 75 000,00 рублей (Приложение № 5) от стоимости работ в течение 5  календарных дней с даты подписания настоящего приложения; оставшуюся часть оплаты  в размере 132 300,00 рублей (Приложение № 2) и 175 000,00 рублей (Приложение № 5) в  течение 14 календарных дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных  работ.  

1.2. Оплату Товара в следующем порядке: 

- первую часть предоплаты в размере 30 % (Тридцати процентов) от стоимости  товара по настоящей спецификации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты  подписания спецификации. Срок формирования готовности Товара к отгрузке  (производство Товара, организация поставки и др.) и направления уведомления о  готовности к отгрузке по электронной почте - в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней с  даты поступления первой части предоплаты, установленной в настоящем пункте  спецификации;  

- вторую часть предоплаты в размере 35 % (Тридцати пяти процентов) от стоимости  товара по настоящей спецификации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты  направления Поставщиком Покупателю по электронной почте уведомления о готовности  товара к отгрузке;  

- оставшуюся часть оплаты в размере 35 % (Тридцати пяти процентов) от стоимости  товара по спецификации в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки  товара и подписания Покупателем УПД или товарной накладной.  

Во исполнение Приложений № 4 (Спецификация № 3) и № 5 к Договору ответчиком  11.02.2022 была перечислена первая часть предоплаты в размере 30% от стоимости Товара  по Спецификации № 3 и 75 000 руб. от стоимости работ по Приложению № 5 в общей  сумме 4 756 915 руб. 99 коп. (платежное поручение № 2837 от 11.02.2022, л.д. 43).  Просрочка исполнения обязанности по внесению первой части предоплаты составила 86  дней.  

Во исполнение Спецификации № 3 истец изготовил необходимый ответчику товар и  письмами Исх. № 176/КСТ от 10.03.2022, Исх. № 313/КСТ от 05.04.2022 (л.д. 36-37)  уведомил ответчика по электронной почте о готовности Товара с 07.04.2022 к отгрузке со  склада Поставщика первому перевозчику для доставки его Покупателю, а также  необходимости в соответствии с п. 3.2. Приложения № 4 (Спецификации № 3) оплаты  второй части предоплаты в размере 35% (5 462 235 руб. 32 коп.) от стоимости Товара не  позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления указанного уведомления. Отгрузка  Товара производится Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления  второй части выше названной предоплаты.  

Гарантийным письмом № 785 от 08.07.2022 (л.д. 785) ответчик заявил просьбу об  отгрузке Товара по Спецификации № 3 и гарантировал произвести доплату за продукцию  в полном объеме в срок до 31.07.2022.  

Истец поставил ответчику Товар по Спецификации № 3 в полном объеме, а ответчик  принял Товар 27.07.2022, что подтверждается УПД № 81 от 20.07.2022 (л.д. 33-34).  

После отгрузки и принятия Товара 02.08.2022 поступила частичная оплата за товар  (вторые 35% в размере 5 462 235 руб. 32 коп. по платежному поручению № 16268 от  02.08.2022, л.д. 44). Просрочка исполнения обязанности по внесению второй части  предоплаты составила 114 дней.  

Оставшаяся часть оплаты за Товар в размере 35% (5 462 235 руб. 33 коп.) на момент  обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением не оплачена, просрочка оплаты  по состоянию на 13.10.2022 составляет 64 дня.  

Во исполнение истцом обязательств по выполнению работ по шеф-надзору за  монтажом и пуско-наладки Товара, согласованного сторонами в Спецификации № 3 от  12.11.2021 и по вызову Покупателя, Поставщиком были своевременно и в полном объеме  выполнены согласованные работы.  

Согласно п. 9.2. Приложения № 5 если иное не предусмотрено Договором,  уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами  по электронной почте или иным способом, позволяющим достоверно установить, от кого  исходило сообщение и кому оно адресовано. Подписанные Сторонами сканированные  копии настоящего Приложения, дополнительных соглашений, направленные Сторонами:  

- от имени Покупателя с адресов электронной почты с доменным именем: @mnul.ru;  

- от имени Поставщика с адресов электронной почты с доменным именем  @cstprom.ru,  

имеют полную юридическую силу до момента обмена оригиналами указанных  документов.  

Истец по окончании выполнения работ направил ответчику уведомление об  окончании работ (Исх. № 1280/КСТ от 05.09.2022, л.д. 38) Акт выполненных работ № 5 от  06.09.2022 на общую сумму 250 000 руб. (л.д. 40), подписанный со стороны Поставщика  (2 экз.) письмом Исх. № 1280/КСТ 05.09.2022г. на электронную почту Покупателя  kudryavcev.ev@mnul.ru (л.д. 41), а также 07.09.2022 на юридический и электронный адрес  (post@mnul.ru) ответчика с приложением счета-фактуры № 103 от 06.09.2022 (л.д. 42),  одновременно с Претензией Исх № 1305/КСТ от 07.09.2022 (л.д. 13-14).  

Согласно п. 5.2., 5.4. в течение 3 (трех) рабочих со дня направления  соответствующего уведомления Поставщиком Покупатель обязан с участием Поставщика  принять выполненные Работы по Акту о приемке выполненных работ (по форме  Приложения № 2.1. к Договору) либо немедленно заявить Поставщику об обнаружении  недостатков в Работах, указав об этом в акте и приемке выполненных работ. Если  Покупатель уклоняется от приемки Работ либо немотивированно отказывается от  подписания акта, поставщик вправе составить такой акт в одностороннем порядке,  данный акт будет подтверждать выполнение Работ при условии уведомления Покупателя  об их завершении, иметь полную юридическую силу, такой акт не подлежит обжалованию  Покупателем.  

Указанный Акт, подписанный со стороны ответчика истцу не возвращен,  мотивированные замечания, в т.ч. посредством электронной почты не предоставлены.  

Отсутствие оплаты за поставку товара послужило основанием для обращения истца  в арбитражный суд с настоящим иском.  

С учетом частичных оплат истец уточнил исковые требования на общую сумму  задолженности 618 617 руб. 66 коп.:  

- просроченная задолженность Покупателя по оплате оставшейся части за  выполненные работы составляет 175 000 руб.;  

- просроченная к оплате задолженность по оплате поставленного Товара по  Приложению № 4 (Спецификация № 3 от 12.11.2022) составляет 443 617 руб. 66 коп., в  т.ч. НДС 20%.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим в силу статьи 310 ГК РФ.  

Надлежащее исполнение прекращает обязательство (пункт 1 статьи 408 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик,  осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в  обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для  использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с  личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

В силу пункта 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с  соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если  соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты  осуществляются платежными поручениями.  

В соответствии со статьи 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар,  предусмотренный договором купли-продажи.  

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан  одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также  относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию  по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или  договором (пункт 2 статьи 456 ГК РФ).  

В силу пункта 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар  непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не  предусмотрено данным Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или  договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.  

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров  покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре  в качестве получателя (пункт 1 статьи 509 ГК РФ).  

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом,  предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях (пункт 1  статьи 510 ГК РФ).  

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает  наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц,  участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного  рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он  руководствуется статьями 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.  

Согласно статье 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно  ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).  

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены  определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными  доказательствами (статья 68 АПК РФ).  

Ответчиком контррасчет задолженности не представлен. 

На основании вышеизложенного, требование истца о взыскании задолженности в  размере 618 617 руб. 66 коп. судом признается обоснованным и подлежащим  удовлетворению.  

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 1 697 106 руб. 35 коп.  за период с 18.11.2021 по 24.01.2023 с продолжением начисления неустойки с 25.01.2023 в  размере 0,1% за каждый день от суммы просроченной задолженности по день  фактической уплаты долга/внесения авансовых платежей.  

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться  неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской  гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

Согласно п. 8.3. договора, за нарушение сроков оплаты (в том числе предоплаты)  товара Покупатель обязан оплатить Поставщику по его письменному требованию  (претензия) неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день  просрочки.  

Обязательство ответчика по оплате поставленной продукции в указанные сроки  исполнены не были.  

Таким образом, суд считает, что истцом верно определена дата начала начисления  неустойки.  

Контррасчет неустойки ответчиком суду не представлен, ходатайства о снижении  размера неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ ответчиком не заявлено.  

Судом расчет истца проверен и признан неверным в силу следующего.  

Правительством Российской Федерации принято постановление от 28.03.2022 № 497  «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым  кредиторами» (далее - постановление № 497), которое вступило в силу со дня его  официального опубликования - 01.04.2022.  

Согласно п.1. постановления № 497, в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1  Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на  возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении  юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.  

Исходя из п.2. постановления № 497 положения пункта 1 настоящего постановления  не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных  домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1  Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и  иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу  настоящего постановления.  

Пунктом 3 постановление № 497 действует в течение 6 месяцев, то есть до  01.10.2022.  

Согласно п.7. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О  некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26  октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в период действия  моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК  РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса  Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на  требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие  (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).  В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в  общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых  санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется  действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки  (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и  в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.  

Принимая во внимание изложенное, приостановлено действие порядка начисления  (взыскания) неустоек, предусмотренного законодательством и условиями заключенных  договоров (установлен мораторий), в отношении юридических лиц и граждан, в том числе  индивидуальных предпринимателей, за исключением должников, являющихся  застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,  включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом  строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр  проблемных объектов и, соответственно, плательщики освобождены от уплаты неустоек  за соответствующий период.  

Названный мораторий действует в отношении неустоек (пеней, штрафов),  подлежавших начислению за период просрочки 01.04.2022 до 01.10.2022, независимо от  расчетного периода (месяца), по оплате которого допущена просрочка, в том числе, если  сумма основного долга образовалась до 01.04.2022, если законом или правовым актом не  будет установлен иной срок окончания моратория.  

Неустойка подлежит начислению и взысканию в порядке, установленном  действующим законодательством за весь период просрочки, исключая период действия  моратория.  

Таким образом, вышеуказанные нормы действующего законодательства  распространяют свое действие на приостановление начисления неустоек в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей сторонами в рамках  заключенных договоров, а также установленных законодательством Российской  Федерации обязательств.  

С учетом указанной корректировки размер неустойки по расчету суда составляет  747 558 руб. 98 коп.  

С учетом изложенного требование истца о взыскании неустойки за период с  18.11.2021 по 24.01.2023 подлежит удовлетворению в части, в сумме 747 558 руб. 98 коп.  

В силу пункта 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7  «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ,  истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения  обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи  товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в  

резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату  вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание  производится до момента фактического исполнения обязательства.  

Учитывая изложенное, суд считает подлежащим удовлетворению требование истца  о взыскании неустойки с 25.01.2023 в размере 0,1% за каждый день от суммы  просроченной задолженности по день фактической оплаты.  

В соответствии с ч.1 ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов,  отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными  правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом  соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается  рассмотрение дела по существу, или в определении.  

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в  размере 58 533 руб., что подтверждается платежным поручением от 13.10.2022 № 1780  (л.д. 7).  

В соответствии со ст. 333.21 НК РФ, при цене иска 2 315 724 руб. 01 коп. (с учетом  уточнения), подлежит уплате государственная пошлина в размере 34 579 руб.  

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной  пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный  акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Поскольку исковые требования удовлетворены частично с ответчика в пользу истца  подлежит взысканию государственная пошлина в размере 20 400 руб., истцу из  федерального бюджета подлежит возврату государственная пошлина в размере 23 954  руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Кабельные  системы и Технологии» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монтажно-наладочное  управление № 1 корпорации акционерной компании «Электросевкавмонтаж» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Кабельные системы и Технологии»  задолженность в размере 618 617 руб. 66 коп., неустойку в размере 747 558 руб. 98 коп.,  производить взыскание неустойки с 25.01.2023 в размере 0,1% за каждый день от суммы  просроченной задолженности по день фактической оплаты, а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 20 400 руб.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Кабельные системы и  Технологии» из федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере  23 954 руб., уплаченной по платежному поручению № 1780 от 13.10.2022.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем  подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья Н.В. Гордеева  Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно  получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://18aas.arbitr.ru.