АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-18059/2023 

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации резолютивная часть 

22 января 2024 г. г. Кемерово 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Переваловой О.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственной жилищной  инспекции Кузбасса, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Кузбасса», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

об обязании совершить действия 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ",  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

Руководствуясь, статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

удовлетворить иск. 

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Кузбасса» в срок до 31.07.2024 исполнить предписание ГЖИ Кузбасса № 156.4386 от 19.06.2023, а, именно: завершить капитальный ремонт крыши многоквартирного  дома № 8 по ул. Центральная, в пгт. Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровской  области- Кузбасса, в соответствии с рабочей документацией от 2021 000 СК «Пионер»  шифр 04-20/90.ПД.20-21, а именно:  

выполнить в полном объеме кровельное ограждение - листы №№ 6,10 рабочей  документации шифр 04-20/90.ПД.20-21-АС;  

выполнить в полном объеме вентиляционные шахты (металлические зонты,  утепление вентиляционных шахт в чердачном помещении, оштукатурить кирпичную  кладку) - листы № № 2,7,8,9 рабочей документации 04-20/90.ПД.20-21-АС;  

утеплить фановые трубы и трубопроводы водоотведения, проходящие в чердачном  помещении крыши - рабочая документация шифр 04-20/90.ПД.20-21-АС;  

в чердачном помещении полностью выполнить работы по устройству утепления  чердачного перекрытия - рабочая документация шифр 04-20/90.ПД.20-21-АС;  

выполнить рыхление существующего утеплителя в чердачном помещении - рабочая  документация шифр 04-20/90.ПД.20-21-АС;  

обеспечить пароизоляцию и влаговетрозащитную пленку в чердачном помещении -  рабочая документация шифр 04-20/90.ПД.20-21-АС;  

установить сетки на продухи - рабочая документация шифр 04-20/90.ПД.20-21-АС;  установить ходовые трапы - рабочая документация шифр 04-20/90.ПД.20-21-АС; заменить  люки - рабочая документация шифр 04-20/90.ПД.20-21-АС; очистить кровлю дома и  

чердачное помещение от мусора и строительных материалов. Предоставить в ГЖИ  Кузбасса Акт приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 по ул.  Центральная в пгт. Зеленогорский, Крапивинского района, Кемеровской области-Кузбасса.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья О.И. Перевалова