АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2017 года

Дело №

А56-41777/2016

Резолютивная  часть  постановления объявлена 25 сентября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 сентября 2017 года.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Шпачевой Т.В., судей Дмитриева В.В. и                      Нефедовой О.Ю., 

при участии от акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гириконд» Филимоновой Н.А. (доверенность от 12.05.2017 № 8),

рассмотрев 25.09.2017 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 10.03.2017 (судья Стрельчук У.В.)  и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2017 (судьи Лущаев С.В., Горбачева О.В., Загараева Л.П.) по делу № А56-41777/2016,

 

                                     у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан», место нахождения: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.12, ОГРН 1057810178579, ИНН 7843301290 (далее – ООО «Меридиан»), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу «Научно-исследовательский институт «Гириконд» (далее – АО «НИИ «Гириконд») о взыскании  308 000 руб.  задолженности  по договору и  13  905 руб. 10 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. Также истец попросил взыскать с ответчика 2000 руб. расходов на получение выписок из ЕГРЮЛ и  15 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.03.2017, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2017, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе ООО «Меридиан» просит отменить принятые по делу судебные акты как незаконные и необоснованные. Податель кассационной жалобы оспаривает выводы судов об отсутствии у ответчика обязанности оплатить выполненные работы.

В отзыве на кассационную жалобу  АО «НИИ «Гириконд» просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, полагая их законными и обоснованными, а доводы жалобы несостоятельными.

ООО «Меридиан» о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом, однако его представитель в судебное заседание не явился.

Представитель АО «НИИ «Гириконд» в судебном заседании просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

Законность  обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как установлено судом на основании материалов дела, между                           ООО «Меридиан» (исполнителем) и АО «НИИ «Гириконд» (заказчиком) заключен договор от 27.10.2014 на выполнение работ  по обновлению топографического плана, изготовлению градостроительного плана, материалов проектной документации, экспертизе, получению  разрешения на реконструкцию, ввод в эксплуатацию, регистрации права на объекты недвижимости и заключение договора аренды на земельный участок, занятый  базой рыбаков  и охотников заказчика по адресу: Ленинградская обл., Выборгский    район, МО «Гончароское сельское  поселение» в районе  пос. Овсово.

Стоимость работ по договору  определена сторонами в пункте 3.1 договора и составляет 671 000 руб. и производится поэтапно:

выплачивается аванс  в размере 335 000 руб. (50%);  

285 000 руб. выплачивается  после получения результатов по 4 этапу (документов о вводе объектов в эксплуатацию); выполнения  пункта 34 по 4 этапу (перед регистрацией права на объекты недвижимости и регистрацией договора аренды  в Выборгском филиале Росреестра); 

50 000 руб. выплачивается по окончании работ.

Аванс исполнителю уплачен.

Ссылаясь на то, что работы до конца не выполнены по вине заказчика, исполнитель в рамках настоящего дела взыскивает с ответчиком невыплаченную ему стоимость договора.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, поскольку работы истцом не выполнены в полном объеме не по вине заказчика.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается  как   на основание своих требований и  возражений.

Вопреки названном положению, истец не доказал, что у ответчика возникло обязательство по оплате работ.

Суд критически оценил доводы истца о невозможности выполнения обязательств по договору вследствие непереоформления ответчиком свидетельства о праве собственности на землю из-за изменения наименования.

Суд установил, что истец выполнил работы, указанные  в пунктах 1-29, 32 договора, частично выполнил работы, предусмотренные  пунктами  30 и 31, а остальные пункты не выполнил. 

Истец не доказал, что он готовил, подготовил и /или сдал необходимые документы для заключения договора аренды на земельный участок.

Как установил суд, с даты получения предоплаты истец  не выполнил встреченные обязательства, определенные пунктами 33, 34 договора. В материалах дела отсутствуют доказательства подготовки и сдачи истцом документов для заключения договора аренды, равно как и доказательства получения отказа в регистрации   в связи  непредставлением необходимых документов, в том числе свидетельства о праве собственности на землю.

Оценив представленные доказательства и установив, что работы в полном объеме не выполнены (не заключен договор аренды) по причинам, не зависящим от заказчика и потому в силу статьи 311 Гражданского кодекса Российской Федерации   могут заказчиком не приниматься, суд в удовлетворении иска отказал.

Апелляционный суд согласился с судом первой инстанции.

Как установлено судами,  истец работы по договору в полном объеме не выполнил, что им не отрицается. Таким образом, обязанность по полной оплате работ не может быть возложена на ответчика.

Доводы истца о том, что работы не выполнены по вине ответчика или по причинам, зависящим от ответчика, исследовались судами, которые обоснованно с ними не согласились.

Судами сделаны выводы, соответствующие материалам дела и имеющимся в деле доказательствам и правильно применены нормы материального и процессуального права.

С учетом этого  и того обстоятельства, что доводы кассационной жалобы основаны на переоценке доказательств по делу, оснований для отмены судебных актов не имеется. 

Поскольку в удовлетворении кассационной жалобы отказывается, уплаченная при ее подаче государственная пошлина не перераспределяется.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей  286, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа				

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 10.03.2017  и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2017  по делу № А56-41777/2016 оставить без изменения, а  кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» - без удовлетворения.

 

Председательствующий

Т.В. Шпачева

Судьи

В.В. Дмитриев

 О.Ю. Нефедова