АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600005, 

<

...> тел. 

<

***>, факс 

<

***> 

е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________  

 РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А11-4190/2025

г. Владимир

23 июля 2025 года

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Смагиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Магомедовым Ш.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А11-4190/2025 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Гривна» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Администрации города Суздаля Владимирской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о внесении изменений в муниципальный контракт от 01.04.2024 № 0128200000124000876,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Водозаборные сооружения» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), государственное автономное учреждение Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 17, 65, 71, 101, 110, 112, 121, 123, 156, 167-170, 174, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Изменить условия муниципального контракта от 01.04.2024 № 0128200000124000876, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Гривна» и Администрацией города Суздаля Владимирской области, а именно:  

Пункт 2.1 контракта изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 01.10.2025». 

Приложение № 2 к муниципальному контракту от 01.04.2024 № 0128200000124000876 «График выполнения работ» изложить в следующей редакции:  

Порядковый номер этапа выполнения  

контракта 

Наименование этапа  

выполнения 

контракта  

Сроки исполнения выполнения  

этапа контракта  

Физический объем работ,  

усл. ед.  

начало  

окончание  

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Выполнение работ по  

реконструкции канализационных  

очистных сооружений по  

адресу: Суздальский район, с. Кидекша,  

ул. Центральная, 530 м, на юго-запад от  

д. № 8 

с даты заключения  

контракта  

по 01.10.2025  

1 

Взыскать с Администрации города Суздаля Владимирской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гривна» расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 000 руб.  

Выдача исполнительных листов производится в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с момента его вынесения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Смагина