АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-8431/2017

г. Чебоксары

16 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2017 года.

 

Арбитражный суд в составе судьи Цветковой С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в заседании суда дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Ростэлектро", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия, 428010, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Короленко, д. 6, корп. А, кв. 8

к обществу с ограниченной ответственностью "Кратонстрой", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия, 428024, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Мясокомбинатский 

<

...>

о взыскании 4 437 279 руб. 93 коп,

при участии:

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 19.03.2017, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Ростэлектро" (далее истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Кратонстрой" (далее ответчик) о взыскании 4 354543 руб. 60коп. долга, 82736 руб. 33 коп. пени за период с 13.07.2017 по 31.07.2017.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору подряда от 01.08.2016 №01.

Истец явку своего представителя не обеспечил, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

Представитель ответчика иск признал в полном объеме.

Суд в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствии представителя истца.

Выслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, суд установил следующее.

01.08.2016 истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор №01, по которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по монтажу внутреннего электроснабжения, монтажу розеточной группы и слаботочной сети на объекте «Девятиэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Гражданская, д.6 города Чебоксары» (пункт 1.1 договора).

Заказчик  обязался оплатить работу подрядчика в соответствии с условиями договора (пункт 5.1.2 договора).

Пунктом 5.2.2 договора предусмотрено, что подрядчик выполнит работу до 31 декабря 2016 года своим материалом, оборудованием, своими силами и средствами.

Согласно пунктам 2.1, 2.2 договора ориентировочная стоимость договора составляет 7950000 руб. Стоимость и объем работ подлежат корректировке по факту выполненных работ.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 договора  оплата выполненных работ производится заказчиком на основании актов выполненных работ, приложенных счетов-фактур к справке по форме КС-3, сданной согласно требований СНиП по данному виду работ и принятой заказчиком  исполнительной документации, в текущих ценах путем зачета взаимных обязательств по оплате квартир №9, №10 и офисного помещения по предварительному договору участия в долевом строительстве «Девятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д.6 города Чебоксары» с последующим заключением основного договора в долевом строительстве и передать подрядчику указанные квартиры и офисное помещение в плановые сроки в течение 5 рабочих дней.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту на сумму разницы между стоимостью выполненных работ и стоимостью переданных квартир и офисного помещения производится заказчиком после полного завершения работ по договору, включая устранение выявленных дефектов.

В подтверждение исполнения  истцом обязательств по договору в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ от 30.08.2016 №№1, 2, 3, от 28.10.2016 №№4, 5, от 31.05.2017 №№6, 7.

Заключив договор, стороны приняли на себя обязательства, которые в соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 740 Гражданского  кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. 

Стоимость выполненных истцом работ определена подписанными сторонами справками о стоимости выполненных работ и затрат и составила согласно справкам от 22.12.2016 №1 – 1339793, 26 руб., от 23.12.2016 №2 – 289258,33 руб.

В силу пункта 1 статьи 746 Гражданского  кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ.

Истец указывает, что вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по оплате выполненных истцом работ образовалась задолженность в размере 4354543 руб. 60 коп. В связи с просрочкой оплаты начислена неустойка в сумме 82736 руб. 33 коп. за период с 13.07.2017 по 31.07.2017.

Частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором. 

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 7.3 договора за несвоевременную передачу квартир и офисного помещения заказчик выплачивает пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от неоплаченной суммы по зачету взаимных требований.

Представитель ответчика иск признал в полном объеме.

В силу  части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Последствия признания иска представителю ответчика разъяснены и понятны.

Арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если оно противоречит закону или нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Признание ответчиком иска по настоящему делу не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, сделано полномочным представителем ответчика, в связи с чем принимается судом. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

В связи с признанием иска ответчиком суд удовлетворяет исковые требования в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины суд в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Кратонстрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ростэлектро" 4 354 543 руб. (Четыре миллиона триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три рубля) 60 коп. долга, 82 736 руб. (Восемьдесят две тысячи семьсот тридцать шесть рублей) 33 коп. пени за период с 13.07.2017 по 31.07.2017, 45 186 руб. (Сорок пять тысяч сто восемьдесят шесть тысяч) расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение одного месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

С.А. Цветкова