Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-54175/2019

29 августа 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  14 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  29 августа 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Салтыковой С.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО" (адрес:  Россия 197046, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, наб ПЕТРОГРАДСКАЯ 20/А, ОГРН:  1063905088158);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАШТЭК" (адрес:  Россия 109428, МОСКВА, ПРОСПЕКТ. РЯЗАНСКИЙ 24, 1, ОФИС 32, ОГРН:  1127746291397);

о взыскании 7 074 401 руб. 83 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.07.2019

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 25.04.2019

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАШТЭК" 7 074 401 руб. 83 коп. неустойки.

В судебном заседании представитель истца поддержал иск в полном объеме, представитель ответчика просил отказать в его удовлетворении либо, в случае признания судом наличия оснований для взыскания неустойки, снизить ее размер. 

Между обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» (далее - Истец) и обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие МашТЭК» (далее -Ответчик) заключен Договор от 03.04.2018 № ГМТ-5212.04.2018 (далее-Договор) на поставку технологического оборудования АГНКС, включая техническую документацию, комплектующие и запасные части (далее - Товар).

Согласно п. 2.1 Договора стоимость по Договору с учетом НДС составляет 161 643 220,00 (Сто шестьдесят один миллион шестьсот сорок три тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек.

Стоимость Товара, с учетом НДС, по спецификациям №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 составляет 155 853 220,00 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек.

Согласно п. 3.1 Договора поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании спецификаций (приложения №№2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 к Договору).

Сроки поставки могут быть изменены только по соглашению сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

В соответствии со спецификациями №№ 1.1, 1.2 срок поставки Товара -31.08.2018 (АГНКС-1 в а. Тахтамукай).

В соответствии со спецификациями №№ 2.1, 2.2 срок поставки Товара -28.09.2018 (АГНКС-1 в г. Константиновске).

В соответствии со спецификациями №№ 3.1, 3.2 срок поставки Товара -19.10.2018 (АГНКС-4 в г. Волжском).

11.12.2018 между Истцом и Ответчиком заключено дополнительное соглашение №1 от 11.12.2018 к Договору (далее - Дополнительное соглашение), по условиям которого стороны изменили объем поставляемого по Договору Товара и исключили из Договора условия о поставке Товара на объекты АГНКС-1 в г. Константиновске и АГНКС-4 в г. Волжском (спецификации №№ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2).

Срок поставки Товара на объект АГНКС-1 в а. Тахтамукай не изменен.

По состоянию на 28.01.2019 поставка Товара на объект АГНКС-1 в а. Тахтамукай не осуществлена, уведомления о готовности Товара к отгрузке согласно п. 3.2 Договора в адрес Истца от Ответчика не направлялись.

В соответствии с п. 10.2 Договора в случае нарушения сроков поставки Товара и/или сроков оказания Услуг Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) % от стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок Товара/не оказанных Услуг за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара/по оказанию Услуг.

Согласно п. 6 Дополнительного соглашения подписание Дополнительного соглашения влечет прекращение обязательств Ответчика по поставке Товара, предусмотренного спецификациями №№ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (приложения №№ 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 к Договору), и по оказанию услуг, предусмотренных Договором (услуги по доставке и шефмонтажу) в отношении указанного Товара, на будущее время и не освобождает Ответчика от ответственности за нарушение обязательств, в том числе уплате неустойки (пени), предусмотренных Договором до момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

Таким образом, размер неустойки в отношении поставки Товара на АГНКС-1 в а. Тахтамукай составляет 3 732 776 (Три миллиона семьсот тридцать две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 94 копейки.

Сумма долга, руб.

Период просрочки

Ставка

Формула

Пени, руб.

с

по

дни

49 280 340

01.09.2018

31.12.2018

122

0,05%

49 280 340 х 122х 0,05%/100

3 006 100,74

50 115 600

(с учетом НДС 20%)

01.01.2019

29.01.2019

29

0,05%

50 115 600 х 29 х 0,05%/100

726 676,20

Таким образом, размер неустойки в отношении поставки Товара на АГНКС-1 в г. Константиновске составляет 1 823 372 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи триста семьдесят два) рубля 58 копеек.

Сумма долга, руб.

Период просрочки

Ставка

Формула

Пени, руб.

с

по

ДНИ

49 280 340

29.09.2018

11.12.2018

74

0,05%

49 280 340х 74х 0,05%/100

1 823 372,58

Таким образом, размер неустойки в отношении поставки Товара на АГНКС-4 в г.Волжском составляет 1 518 252 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 31 копейка.

Сумма долга, руб.

Период просрочки

Ставка

Формула

Пени, руб.

с

по

дни

57 292 540

20.10.2018

11.12.2018

53

0,05%

57 292 540х 53х 0,05%/100

1 518 252,31

Общий размер неустойки составляет:

3 732 776,94 + 1 823 372,58 + 1 518 252,31= 7 074 401,83 рубль.

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования споров Ответчику была направлена претензия от 23.11.2018 №01/6490-18. Согласно информации, размещенной на сайте «Почта России», претензия была получена Ответчиком 20.12.2018. Претензия была оставлена Ответчиком без удовлетворения.

В этой связи истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В рассматриваемом случае ответчиком нарушены сроки выполнения обязательств.

Доводы ответчика о том, что требование о взыскании неустойки является злоупотреблением правом со стороны истца, судом не принимается.  В материалах дела отсутствуют доказательства того, что дополнительное соглашение, которым стороны согласовали прекращение поставки части Товара, было вызвано невозможностью со стороны истца принять данный товар. Более того, подписывая Дополнительное соглашение стороны прямо согласовали, что прекращение обязанности поставить в будущем часть товара не освобождает поставщика от обязанности выплатить неустойку до момента, когда соответствующая обязанность была прекращена.

Основания для снижения размера неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ , исходя из ее размера (0,05%) отсутствуют.   

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАШТЭК" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО"            7 074 401 руб. 83 коп. неустойки, 58 372 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья           С.С.Салтыкова