182/2018-10235(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-10570/2017

г. Салехард

05 марта 2018 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Рахимовым Р.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению государственного казённого учреждения «Дирекция капитального  строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СтройКапитаЛ»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 475 888 рублей 65 копеек и  обязании устранить дефекты,  

с привлечением к участию в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора - временного  управляющего ООО «СтройКапитаЛ» ФИО1,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2, начальник юридического отдела по доверенности от  05.05.2017;  

от ответчика – представитель не явился; от третьего лица – представитель не явился, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Уточненные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройКапитаЛ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 28.01.2011, адрес: 625001,  

<

...>) в пользу государственного казённого  учреждения «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого  автономного округа» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации:  19.01.2006, адрес: 629008, ЯНАО, 

<

...>) 1 105 120 рублей  

75 копеек штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по  государственному контракту и 857 020 рублей 89 копеек неустойки за задержку мер по  устранению недоделок и дефектов выполненных работ в пределах гарантийного срока  эксплуатации объекта за период с 16.10.2017 по 05.03.2018.  

Всего взыскать – 1 962 141 рубль 64 копейки. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитаЛ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 28.01.2011, адрес: 625001,  

<

...>) устранить недоделки и дефекты,  указанные в Акте № 1 от 14.09.2017 в следующие сроки:  

 № п/п 

Наименование 

Восстановительные 

Сроки 

дефекта 

работы 

исправления 

дефектов 

-Демонтаж штукатурки и шпатлевки 

4 дня 

Огрунтовывание, оштукатуривание, 

20 дней 

ошпатлевывание, окрашивание потолков 

2 

Повреждение 

Провести ремонт кровельного ковра 

3 дня 

кровельного ковра  

(произвести герметизация дефектов 

кровельного ковра) 

3 

Отрыв примыканий к  

Необходимо смонтировать краевую рейку, 

3 дня 

парапетам, стенкам вент  

произвести герметизация стыков 

шахт, к стоякам 

кровельными герметиками и наплавить 

вентиляции канализации  

дополнительный слой кровельного материала 

Демонтировать гидроизоляционный ковер 

1 день 

Выполнить проектные уклоны к 

7 дней 

водосточной воронке и смонтировать 

кровельный ковер 

5 

Повреждено покрытие  

Замена или ремонт покрытия вент.шахт 

10 дней 

вентиляционных шахт  

6 

Некачественно 

Заменить или исправить обделку 

3 дня 

выполнена обделка  

парапетов металлом 

парапетов металлом  

7 

Отсутствуют защитные  

Изготовить и смонтировать защитные 

14 дней 

фартуки на примыканиях  

фартуки на примыкания 

Демонтаж штукатурки 

1 день 

Оштукатуривание цементно-песчаным 

8 дней 

раствором парапетов и вент, шахт 

9 

Нарушение направления 

Смонтировать верхний слой 

6 дней 

укладки верхнего слоя  

гидроизоляционного ковра с правильным  

гидроизоляционного 

направлением гидроизоляционного ковра  

ковра 

Вскрытие кровельного ковра с последующим его восстановлением 

18 дней 

Заменить кровельный утеплитель на сухой 

2 дня 

 11 

 Подрядной 

Очистить кровлю 

3 дня 

организацией не убран  

строительный мусор с  

кровли 

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройКапитаЛ»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 28.01.2011, адрес: 625001,  

<

...>) в доход федерального бюджета  38 621 рубль государственной пошлины.  

4. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

С.В. Соколов

Судья