Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-5942/2025

01 декабря 2025 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 17.11.2025

Мотивированное решение изготовлено 01.12.2025

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Еремеевой Л.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) (ИНН 1427002940, ОГРН 1021400878047); муниципального общеобразовательного учреждения "Чериктейская средняя общеобразовательная школа им. В. Ф. Афанасьева-Алданского" муниципального района "Усть-Алданский улус (район)" Республики Саха (Якутия) (ИНН 1427007497, ОГРН 1031401225074); муниципального общеобразовательного учреждения "Наяхинская средняя общеобразовательная школа им. И.И. Гоголева-Дыргыабай" Муниципального района Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) (ИНН 1427007465, ОГРН 1031401225052) от 24.06.2025 г. № 635 к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Силим» (ИНН 1435025933, ОГРН 1051402103125) об обязании устранить допущенные нарушения при исполнении муниципальных контрактов № 06-22 от 28.03.2022 и № 08-22 от 08.04.2022.

В судебное заседание явились представители:

Администрации Усть-Алданского улуса РС(Я): ФИО1 по доверенности от 30.09.2025, паспорт, диплом;

МОУ "Чериктейская средняя общеобразовательная школа им. В. Ф. Афанасьева-Алданского" МР "Усть-Алданский улус (район)" РС(Я): ФИО1 по доверенности от 06.10.2025 №319, паспорт, диплом;

МОУ "Наяхинская средняя общеобразовательная школа им. И.И. Гоголева-Дыргыабай" МР Усть-Алданского улуса РС(Я): ФИО1 по доверенности от 03.10.2025, паспорт, диплом;

от ответчика не явились, извещены.

У С Т А Н О В И Л:

Администрация Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее истец-1), муниципальное общеобразовательное учреждение "Чериктейская средняя общеобразовательная школа им. В. Ф. Афанасьева-Алданского" муниципального района "Усть-Алданский улус (район)" Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее истец-2), муниципальное общеобразовательное учреждение "Наяхинская средняя общеобразовательная школа им. И.И. Гоголева-Дыргыабай" Муниципального района Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее истец-3) обратились в арбитражный суд с иском от 24.06.2025 г. № 635 к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Силим" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить допущенные нарушения при исполнении муниципальных контрактов № 06-22 от 28.03.2022 и № 08-22 от 08.04.2022.

Определением суда от 23.10.2025 принято уточнение истцом исковых требований.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в предварительном судебном заседании в отсутствие представителей ответчика, извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

Представитель истцов выступил с пояснениями, ответил на вопросы суда, представил доказательства. Суд, руководствуясь статьями 66, 49, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приобщил к материалам дела поступившие документы, принимает уточнение исковых требований, так как оно не противоречит закону, не нарушает прав других лиц, подписано полномочным лицом (в определении от 23.10.2025 уточнение указано не в полном объеме).

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства по делу.

Между истцом-2 и ответчиком заключён муниципальный контракт № 06-22 от 28.03.2022 на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (л.д. 27-48 т. 1).

Состав и объем работ, иные данные о работе определяются приложением № 1 к контракту (п. 1.2 контракта).

Место выполнения работ: 678364, Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, 

<

...> (п. 1.3 контракта).

Цена контракта составляет 44 310 082, 80 рублей (п. 1.4 контракта).

06.04.2022 стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 06-22 от 28.03.2022.

Во исполнение обязательств ответчик выполнил вышеуказанные государственные контракты, а истец принял работы, что подтверждаются актом о приемке выполненных работ №1 от 20.09.2022 (л.д. 49-50 т. 1).

Между истцом-3 и ответчиком заключён муниципальный контракт № 08-22 от 08.04.2022 на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (л.д. 54-73 т. 1).

Состав и объем работ, иные данные о работе определяются приложением № 1 к контракту (п. 1.2 контракта).

Место выполнения работ: 678363, Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, 

<

...> (п. 1.3 контракта).

Цена контракта составляет 27 443 055, 48 рублей (п. 1.4 контракта).

Стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 08-22 от 28.03.2022.

Во исполнение обязательств ответчик выполнил вышеуказанные государственные контракты, а истец принял работы, что подтверждаются актом о приемке выполненных работ №2 от 20.09.2022 (л.д. 74-75 т. 1).

В адрес истца-1 поступила информация от истца-2, истца-3 о наличии невыполненных работ по муниципальным контрактам № 08-22 от 28.03.2022, № 06-22 от 28.03.2022.

На основании указанных обращений по фактам невыполненных работ истцом-1 в адрес ответчика направлены уведомления о невыполненных работах № 826 от 02.11.2024, № 827 от 02.11.2024, с требованием направления представителя для совместного выездного осмотра.

В ответ на уведомления ответчик письмом № 363/24 от 07.11.2024 указал, что все работы были выполнены и приняты со стороны заказчика, ответчик не отказывается от своих гарантийных обязательств, на данный момент не могут направить представителя, в связи с активной фазой строительно-монтажных работ, связанной с завершением строительного сезона.

Истцом-1 проведено обследование объектов капитального ремонта, составлены акты обследования от 26.03.2025 (л.д. 51-53 т. 1, л.д. 76-90 т. 1), которыми выявлены недостатки работ по муниципальным контрактам.

Истец-1 обратился к ответчику с претензиями от 05.05.2025 № 459, № 460 с требованием в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные дефекты согласно актам обследования от 26.03.2025.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по устранению недостатков, выявленных в пределах гарантийных обязательств, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлено.

Частью 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно частям 1, 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Муниципальные контракты заключены между сторонами в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44).

Между сторонами возникли правоотношения, вытекающие из государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

Согласно статье 768 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Исходя из пункта 1 статьи 721 ГК РФ результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Истцами заявлены требования об обязании ответчика в рамках гарантийных обязательств в срок до 25.07.2026 устранить за свой счет и своими силами выявленные дефекты в период гарантийного срока по муниципальным контрактам от 28.03.2022 № 06-22, от 08.04.2022 № 08-22.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Смысл гарантийного срока заключается в том, что подрядчик гарантирует заказчику, что в течение обусловленного периода времени результат работ будет сохранять свои полезные свойства.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, урегулирован в разделе 11 государственного контракта.

Согласно актам обследования от 26.03.2025 выявлены многочисленные недостатки работ по муниципальным контрактам.

В соответствии с п. 1.9 муниципальных контрактов от 28.03.2022 № 06-22, от 08.04.2022 № 08-22 гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 60 месяцев с даты их приемки заказчиком.

Согласно п. 4.3.3 контрактов подрядчик обязуется своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки выполненных работ. Исключение составляют недостатки, возникшие после сдачи работ – по вине заказчика, в результате действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Акты о приемке выполненных работ №№ 1, 2 подписаны от 20.09.2022.

Таким образом, гарантийный срок действует до 20.09.2027.

На момент выявления вышеуказанных дефектов гарантийные сроки не истекли.

Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное обязательство придает отношениям сторон по договору подряда длящийся характер. Презюмируется, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств (определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-4427 от 25.08.2016 по делу № А40-50219/2015).

При разрешении споров, связанных с применением последствий нарушения требований о качестве выполненных работ в гарантийный срок, бремя доказывания того, что недостатки работ произошли вследствие неправильной эксплуатации либо нормального износа объекта или его частей, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, лежит на подрядчике (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.08.2016 № 305-ЭС16-4838 по делу № А40-59571/2015, от 07.03.2023 № 305-ЭС22-22698 по делу № А41-49147/2019).

По существу изложенных выше норм и правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации, закон освобождает заказчика от доказывания причин возникших в течение гарантийного срока дефектов, возлагая на него обязанность лишь доказать факты наличия таких дефектов и обращения к подрядчику в разумный срок с требованием об их устранении, в то время как для подрядчика существует презумпция его вины в возникновении недостатков работ, опровергнуть которую он может лишь активной позицией по представлению соответствующих доказательств. Чтобы освободиться от ответственности, подрядчик должен доказать, что недостатки результата работ возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Ответчиком доказательств того, что требуемые истцом работы не относятся к гарантийным, а также обстоятельств, изложенных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ, не представлены.

Ответчиком отзыв по существу исковых требований не представлен.

По правилам пункта 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующие в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, учитывая, что истцом подтвержден факт выявления недостатков выполненных работ, истец обратился с требованием об устранении недостатков в гарантийный срок, требования истца об обязании ответчика устранить недостатки работы в гарантийный срок не исполнены, исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Истец просит обязать ответчика устранить недостатки выполненных работ до 25.07.2026.

Согласно статье 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

На основании изложенного суд удовлетворяет исковые требования в полном объеме.

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 100 000 руб.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

На основании изложенного и с учетом результатов рассмотрения дела с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 100 000 руб.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить полностью.

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СИЛИМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 25.07.2026, устранить допущенные нарушения при исполнении муниципального контракта № 06-22 от 28.03.2022 г. с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Чериктейская средняя общеобразовательная школа им. В.Ф. Афанасьева-Алданского» муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), произвести следующие работы:

-	устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя;

-	устройство фронтона из пиломатериалов (доски обрезные);

- огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251;

- смену простильных дощатых полов с полной сменой досок, в объеме 221,00 м2;

-	окраске масляными составами по дереву: полов, объемом 221,00 м2;

-	установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, длиной 80,00 м;

-	устройство внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки, объемом 18,79 м2;

-	ремонт ступеней: бетонных в объеме 54 шт.;

- подготовка смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (МЗОО) в объеме 0,15 шт.;

- установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м, в объеме 52 м;

-	установка секции перильного ограждения из композитных материалов средняя в комплекте, высота 1 100 мм, в объеме 52 м;

- облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм, в объеме 27 м2;

- устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см, в объеме 72 м2;

- покраска масляными составами металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз, в объеме 16 м2;

- монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов, в объеме 1,17т.;

-	монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, в объеме 1,68 т.;

- производство элементов конструктивных, для зданий и сооружений преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, в объеме 1,68 т.;

- монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов, в объеме 1,17 т.;

- производство конструкций: сварные, индивидуальные, прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т, в объеме 1,17 т.;

- монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, в объеме 1,68 т.;

-	ограждение лестниц маршевых, в объеме 56 м.;

- покраску металлических грунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, в объеме 200 м2.;

- смену внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм, в объеме 182 м.;

- смену внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм, в объеме 69 м.;

- демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм, в объеме 747 м.;

- установку радиаторов: чугунных, в объеме 154 кВт, радиаторы отопительные чугунные 10 секций, в объеме 83 шт.;

- установку клапанов термозапорный КТЗ 001-25, номинальное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм, в объеме 83 шт.;

- установку указателей уровня кранового типа, в объеме 83 комплектов;

- установку клапанов термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, в объеме 83 шт.;

- установку кранов воздушных, в объеме 83 комплектов;

- установку кранов Маевского для чугунных радиаторов 15 мм, в объеме 83 шт.;

- установку воздухоотводчиков, в объеме 2 шт.;

- покраску металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, в объеме 203,00 м2., с использованием красок масляных и алкидных, готовых к применению МА-25, белила литопонные» в объеме 0,04 т.;

-	перевозку: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ, в объеме 7,2 т.;

- перевозку грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние: до 3 км, в объеме 7,2 т.;

- перевозку грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 188 км, в объеме 7,2 т.;

-	установку видеоконтрольного оборудования «Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08F200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-AH» в количестве 1 шт.

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СИЛИМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 25.07.2026, устранить допущенные нарушения при исполнении муниципального контракта № 08-22 от 08.04.2022 г. с муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Наяхинская средняя общеобразовательная школа им. И.И. Гоголева-Дыргыабай» муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), произвести следующие работы:

- установку видеонаблюдения: на кронштейне 7 шт.;

- установку видеокамер Vt 326 Н Wir уличная 4 шт.;

- снятие оконных переплетов: остекленных 199,5163 м2;

-	демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 73 шт.;

- разборку покрытий полов: из керамических плиток 102,93 м2;

- разборку покрытий кровель: из листовой стали 582 м2;

- установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСП 18-13.5. площадью 2.32 м2, ОПРСП 18- 15, площадью 2,59 м2 в объеме 199,5163м2;

- установку подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51 м в объеме 110,23 м - не выполнено, соответственно по пункту 17 Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм в объеме 110,23 м и по пункту 18 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм в объеме 146 шт. не доставлены до объекта;

- ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев 42м; п.26. Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6.5 м. ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II 3м3;

- ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок 9м п.28. Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2- 3,75 м, сорт II 0,54 м3;

- смену обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм 582 м2, доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II 7,566 мЗ;

- устройству кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности 582м2, металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием 744,96м2;

- монтаж конька для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150x150 мм, длина 2000 мм 13шт;

- установку планки карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм 25шт;

- установку огнебиозащитного покрытия деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 582 м2, покраске с использованием огнезащитной краски 0,167616т;

-	устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 582 м2, с использованием ИЗОСПАН: Э 710,04м2;

-	установку ограждение кровель перилами 48 м, элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 0,144 т;

- монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого 48 м;

- монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого 48 м;

- монтажу планки снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95x65 мм, длина 2000 мм 24 шт.;

- устройство фронтонов 59,68 м2;

-	огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен 119,36 м2;

-	огнезащитную покраску 0,049176т;

-	монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 0,24т;

-	производство конструкций: сварные, индивидуальные, прочие, масса сборочной единицы 0,24т;

-	устройство желобов: подвесных 124 м;

- устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб 56 м;

- установку труб металлических для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм 56 м;

-	устройство металлической водосточной системы: воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм 8 шт;

-	устройство металлической водосточной системы: колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм 16 шт, хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм 26шт.;

- устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля 462,5 м2;

- покраска с использованием красок масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-025 - 0,0045725 т;

- устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см - в объеме 10 % от объема локальной сметы;

-	монтаж плитки керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм -в объеме 104,98 м2, с использованием клея для плитки (сухая смесь) - 1,23 т;

- устройство покрытий: из брусков 278,46 м2;

- устройство плинтусов: деревянных 71 м;

- покраску масляными составами по дереву: полов 278,46м2;

-	покраску: масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-22, светлая серо-зеленая 0,069615т;

-	 ремонт ступеней: бетонных 54 шт.;

-	облицовку ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм 35,515 м2, с использованием плитки керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм 36,2253м2, клея для плитки (сухая смесь) 0,42618м2;

-	производство конструкций: сварные, индивидуальные, прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т - 1,17т, сталь листовая горячекатаная рифленая марки: СтЗ толщиной 3-6 мм - 1,42т;

-	установку ограждений лестниц маршевых - 56м.;

- перевозку грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 170 км - 135,6 т.;

-	демонтаж кабелей 3514,8м;

-	установку блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм -1шт.;

-	демонтаж шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм -3 шт.;

-	демонтаж: светильников для люминесцентных ламп - 67 шт.;

- установку приборов приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей, в объеме 3 шт.;

- установку извещателей ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении» в объеме 382 шт.;

-	демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм, объемом 1146,00 м;

-	демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2, объемом 1740,00 м;

-	установку приборов ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей, в объеме 1 шт.;

-	установку клавиатуры, тип С2000-К» в объеме 1шт.;

- установку преобразователя интерфейса USB/RS-485 с гальванической развязкой, в объеме 1 шт.;

-	установку контроллера двухпроводной линии связи, марка «С2000-КДЛ» в объеме 1 шт.;

-	установку прибора приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: «С2000-4» в объеме 2 шт.;

- установку блока сигнально-пусковой (релейный блок), тип «С2000-СП1» в объеме 1 шт.;

- установку блока индикации, марка «С2000-БИ» в объеме 1 шт.;

- установку информатор телефонный, марка «С2000-ИТ» в объеме 1 шт.;

-	установку расширителя адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 01» в объеме 1 шт.;

- установку извещателей ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении -в объеме 382 шт.;

- установку извещателей пожарный дымовой: ИП 212-141» в объеме 382 шт.;

- установку извещателей ПС автоматический: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении - в объеме 3 шт.;

- установку извещателей пожарный тепловой: ИП 103-5/1 A3» в объеме 3 шт.;

- установку ключа или кнопки на панели - в объеме 6 шт.;

- установку извещателей пожарный ручной: ИПР-513-10, в объеме 6 шт.;

-	установку системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством - в объеме 2 шт.;

-	установку считывателей проксимити карты врезной «С2000-Ргоху» в объеме 2 шт.;

- установку прибора приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок линейный - работы выполнены в виде переноса старого оборудования в другое помещение - в объеме 1 шт.;

-	установку блока контрольно-пусковой, марка «С2000-КПБ» в объеме 1 шт.;

- установку громкоговорителей или звуковых колонок: в помещении - в объеме 44 шт.;

- установку системы речевого оповещения пожарная, марка «Рокот» в объеме 44 шт.;

- установку световых настенных указателей - в объеме 23 шт.;

- установку указателей световых для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, НББ 02-25» в объеме 23 шт.;

- установку ключа или кнопки на панели - в объеме 1 шт.;

- установку оповещателя комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП, в объеме 1 шт.;

- затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 - в объеме 1884,00 м;

- установку кабеля пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1x2x0,5-в объеме 1258 м;

- установку кабеля пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1x2x0,75-в объеме 626м;

- установку короба пластмассовых: шириной до 40 мм - в объеме 505 м.;

- установку кабель-канала (короб) 10x15 мм - в объеме 410м;

- установку кабель-канала (короб) 40x40 мм - в объеме 95м;

-	установку труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола - в объеме 1379 м;

- установку труб полиэтиленовых, гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм - в объеме 1379 м;

- установку источника резервного питания, марка: «РИП 12» исп. 06 - в объеме 2 шт.;

- установку отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания в объеме 2 шт.;

- установку батарей аккумуляторных необслуживаемых, с номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч - в объеме 4 шт.;

- установку бокса 12В 2x17 А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты - в объеме 2 шт.;

- установку шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм - в объеме 2 шт.;

- демонтаж кабеля 3514,8м;

-	демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм 1 шт.;

- демонтаж Шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм 3 шт.;

- демонтаж светильников для люминесцентных ламп - выполнено с нарушением, выполнено 67 шт.;

- монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм - 1 шт.;

- монтаж пункта распределительный, тип: 

<

...> УЗ - 1 шт.;

- монтаж смены электросчетчиков 1шт.;

-	монтаж счетчика электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230АМ-03, 5(7,5) А - 1 шт.;

-	монтаж ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А - 1 шт.;

-	монтаж ящика силового, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А - 1 шт.;

- монтаж шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм - 3 шт.;

- монтаж шкафа силового распределительного типа ШРС: 1-24УЗ -2 шт.;

- монтаж шкафа распределительного в комплекте с предохранителями типа ШР-11: 73516-54 320 А - 1 шт.;

-	монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый 20 шт.;

-	монтаж светильника НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК – 20 шт.;

-	монтаж светильника в подвесных потолках 67 шт.;

-	монтаж светильников встраиваемых растровых с белым параболическим отражателем (5 перемычек), типа ЛВО 13-4x18-731/5 - 67 шт.;

- монтаж светильников потолочных или настенных с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый 24 шт.;

- монтаж светильников аварийного освещения 24 шт.;

- монтаж световых настенных указателей 12 шт.;

- монтаж светильников аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, типа ЛБО 29-9-831 (БС-831) - 12 шт.;

- монтаж выключателей 58 шт.;

- монтаж выключателей двухклавишных для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый 45 шт.;

- монтаж выключателей одноклавишный для открытой проводки 13 шт.;

- монтаж розеток 117 шт.;

- монтаж розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке 3 шт.;

- монтаж розеток открытой проводки 12 шт.;

- монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм - 707 м;

- монтаж кабель-каналов (коробов) 16x16 мм - 707м;

- монтаж коробов пластмассовых: шириной до 120 мм - 313 м;

- монтаж кабель-каналов (коробов) 80x40 мм - 313м;

- монтаж труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола 3163 м;

- монтаж труб полиэтиленовых гибких гофрированных, легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм-3163м;

-монтаж кабелей трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 1823 м;

- затягиваник провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 3163 м;

- монтаж кабелей силовых с медными жилами ВВГнг(А)-Ь8 3x1,5-660 - не выполнено 2638 м;

- монтаж кабелей силовых с медными жилами BBFht(A)-LS 3x2,5-660 -2348 м;

- монтаж коробок распаечных HP 70- 174 шт.;

- перевозку: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ, грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км, грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 170 км и грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 170 км;

- смену внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм - 150 м, узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм - 150м;

- смену внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм - 212 м, узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 50 мм -212 м;

- демонтаж: радиаторов весом до 160 кг - 4шт.;

- демонтаж: радиаторов весом до 240 кг - 34 шт.;

- установку радиаторов: чугунных - 88 квт,

- установку радиаторов отопительные чугунные 10 секций - 48 шт.;

-	установку клапана термозапорного КТЗ 001-25, номинальное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм - 48 шт.;

-	установку указателей уровня кранового типа - 48 шт.;

-	установку клапана термостатического из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм - 48 шт.;

-	установку кранов воздушных - 8 компл.;

-	установку крана Маевского для чугунных радиаторов 15 мм - 8 компл;

-	установку воздухоотводчиков - 1шт.;

-	установку Воздухоотводчиков автоматических с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, Т тах=120 град С, D=15 мм - 1шт.;

-	масляную окраску металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2-161 м2;

-	покраску масляной и алкидной краской, готовая к применению МА-25, белила литопонные - 0,039606 т;

-	перевозку: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ - 6,2 т, грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км -6,2т, грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 170 км - 6,4 т.

-	смену умывальников 2 шт.;

- установку умывальников полуфарфоровых и фарфоровых с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм - 2 компл.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Силим" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 100 000 рублей государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

Семёнова У. Н.