Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-7854/2024

г. Хабаровск

09 октября 2024 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Г.А.  Паликовым,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства  здравоохранения Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес:  680000, 

<

...>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ и взыскании неустойки на  случай неисполнения решения суда  

и по встречному иску индивидуального предпринимателя ФИО1  

к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению  высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет»  Министерства здравоохранения Российской Федерации  

об обязании совершить действия 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить. 

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок 30 (тридцать) дней со дня  вступления в законную силу решения суда устранить недостатки выполненных работ по  монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения в рамках контракта от  13.06.2023 № 0322100003823000002-01 «Выборочный капитальный ремонт общежития №  4 ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, расположенного по адресу: 

<

...>. Восстановление работоспособности пожарной сигнализации и  

оповещения» в здании ФГБОУ ВПО ДВМГУ Минздрава России, по адресам: 680000,  

<

...> следующим способом: 

1) Установить извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 1 - 1 шт. Передать  

Заказчику извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 1 - 3 шт. 

2) Установить извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-04 оптико-электронный  

адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) - 534 шт.; 

Передать извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-04 оптико-электронный  

адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) - 49 шт.; 3) Установить блок разветвительно-изолирующий БРИЗ - 6 шт.; 

4) Установить микрофон настольный динамический. Полоса частот 50 Гц-13,5 кГц.  

Кнопка включения без фиксации, кабель в комплекте 2,5 м., XLR-Jack ¼ МД-03 - 1 шт.; 

5) Установить оповещатель пожарный речевой настенный 100В, 3Вт, 91 Б. ОПР- 

С103.1 -5 шт.; 

6) Установить Адресный модуль контроля Рупор -300-МК - 2 шт.;  7) Произвести укладку кабеля, включающего:  

7.1) Огнестойкий кабель для ОПС и СОУЭ. КСРВнг (A)-FRLS 1x2x1,38 мм (1,5  

мм.кв) - 643,42 м, 

7.2) Огнестойкий кабель для ОПС и СОУЭ. КСРВнг (A)-FRLS 1x2x1,13 мм (1  

мм.кв) - 523,88 м.; 

7.3) Огнестойкий кабель для ОПС и СОУЭ. КСРВнг (A)-FRLS 1x2x0,97 мм (0,75  

мм.кв) - 1498,94 м 

7.4) Огнестойкий кабель для ОПС и СОУЭ. КСРВнг (A)-FRLS 1x2x0,8 мм (0,5  

мм.кв) - 1192,36 м.; 7.5) Кабель контрольный КДВВГ 7x0,75 -28,56 м. 7.6) Коробка коммутационная КС-4 - 32 шт.; 

7.7) Кабель-канал ПВХ 25x17мм, крышка в комплекте - 2557,1 м.;  7.8) Кабель-канал ПВХ 60x40 мм, крышка в комплекте - 68м.;  

7.9) Накладка соединение на стык, ПВХ, 25x17мм - 2205 шт.;  7.10) Накладка соединение на стык, ПВХ, 65мм - 50 шт.;  

7.11) Тройник для короба ПВХ 25x17 мм - 6 шт.; 

7.12) Угол плоский ПВХ для кабель-канала 25x17 мм - 48 шт.;  

7.13) Саморезы для крепления с дюбелем F3,5х50мм (для крепления  

неустановленных кабель-каналов) - 141 шт.; 

7.14) Стяжка металлическая, коррозионно-стойкая, FVC-130ST. 127x4.5x0.3мм х  

100шт. - 1 шт.; 

7.15) Трубы из самозатухающего ПВХ легкие, номинальный внутренний  

диаметр 16 мм - 227 м.; 7.16) Держатель с защелкой для труб диаметром 16 мм, полипропилен - 567 шт. 

8) произвести прочие строительные работы по восстановлению отделки  

стен и потолков помещений окрашиванием водоэмульсионными составами с  

расходом краски 0,3195т в объеме - 4,5 м2 

9) произвести - заделку отверстий смесью бетонной тяжелого бетона  

(БСТ), класс В15 (М200) в объеме - 0,607 м 

10) произвести демонтаж предыдущих элементов системы пожарной сигнализации  

и речевого оповещения в подвальных помещениях: - провода сечением 0,75 мм2 в объеме  

- 157 м.; 11) произвести демонтаж извещателей пожарных - 16 шт. 

12) смонтировать кольцевую схему прокладки сетей связи и расположения блоков  разветвительно-изолирующих БРИЗ, адресных модулей контроля линий связи Рупор-300- МК, оповещателей пожарных речевых настенных ОПР-С 103.1 в соответствии с проектом  

13) проходы кабеля между стенами выполнить с закладной металлической трубой  

14) создать непрерывность линии при прокладке шлейфов. 15) представить исполнительскую документацию: 

15.1) акты освидетельствования скрытых работ с предоставлением сертификатов и  паспортов на примененные материалы (заделка мест прохода в перекрытиях и в стенах);  

15.2) акт о выполнении демонтажных работ; 

15.3) ведомость смонтированных приборов и оборудования системы пожарной  сигнализации и речевого оповещения;  

15.4) фотоматериалы «ДО» и «ПОСЛЕ» выполнения работ с фиксацией установки  приборов.  

15.5) документацию на удаленное рабочее место, состоящее из системного блока,  монитора, ИБП, клавиатуры, мышь, программное обеспечение и ключ защиты.  

15.6) паспорта на приборы, имеющие заводской номер на каждое изделие -  оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С 103.1 в количестве 34 шт.; адресный  модуль контроля линий оповещения «Рупор-300-МК» в количестве 2 шт.  

15.7) сертификаты на оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) (Выход); Блоки  разветвительно-изолирующие БРИЗ; Блок речевого оповещения Рупор-300; Оповещатель  пожарный речевой настенный ОПР-С 103.1; Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-2; Аккумуляторные батареи АБ 1226С, АБ 1217С, АБ 1207С.  

16) представить надлежаще оформленную исполнительную документацию:  16.1) акт об окончании монтажных работ;  

16.2) протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок (данные  протокола не заполнены в полном объеме);  

16.3) акт приемки системы пожарной сигнализации и речевого оповещения в  эксплуатацию (отсутствуют документы, подтверждающие фактическое выполнение  работ).  

16.4) Кабельный журнал не соответствует исполнительным схемам, не содержит  наименования объекта ремонта, отсутствуют обозначения о начале и конце трассы  подключения кабеля к приборам и оборудованию;  

16.5) Исполнительные схемы (поэтажные структурная схема и план сетей с  расположением приборов и оборудования) не соответствуют проектной документации и  фактическим выполненным работам.  

16.6) Общий журнал не пронумерован, не прошнурован, не оформлен всеми  подписями на титульном листе и не скреплен печатью подрядной организации; не  заполнены даты производства работ, журнал не содержит полных сведений и описания  работ по каким секциям, помещениям и этажам производились работы.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства  здравоохранения Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 4 950 руб. 00 коп. за каждый  день просрочки исполнения решения, начиная с 31 (тридцать первого) дня после дня  вступления решения в законную силу и до дня фактического исполнения решения.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства  здравоохранения Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин