АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. 

<

***>; факс 

<

***>

https://irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск Дело № А19-8964/2025

18.08.2025

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 05.08.2025.

Решение в полном объеме изготовлено 18.08.2025.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Козловой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Верещагиной Т.С. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 664011, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ГОРЬКОГО, Д.31)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665302, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н КУЙТУНСКИЙ, ФИО1, 

<

...> СТР. 1А) 

об обязании выполнить технический этап рекультивации, по договору аренды лесного участка № 91-429/21 от 30.08.2021 путём демонтажа временных строений на площади 0,2 га в выделе 2ч квартала 136 Белозиминской дачи Икейского участкового лесничества до 01.06.2026 года,

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель по доверенности ФИО2, паспорт, диплом;

от ответчика: не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ:

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ" (далее – ответчик) с требованиями, уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ): об обязании выполнить технический этап рекультивации, по договору аренды лесного участка № 91-429/21 от 30.08.2021 путём демонтажа временных строений на площади 0,2 га в выделе 2ч квартала 136 Белозиминской дачи Икейского участкового лесничества до 01.06.2026 года

Уточнение исковых требований принято судом.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения спора извещен надлежащим образом в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), отзыв не представил.

В судебном заседании истец поддержал уточненные исковые требования в полном объеме.

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

На основании договора аренды лесного участка для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых № 91-429/21 от 30.08.2021, заключенного между истцом (арендодатель) и ООО "ПЕРЕСВЕТ" (арендатор), сроком действия до 11.10.2023 года с даты государственной регистрации права аренды, последнему в аренду передан лесной участок площадью 65,6830 га, местоположение: Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район", Тулунское лесничество, Икейское участковое лесничество, Белозиминская дача, защитные леса, кварталы №№ 108 (в. 24ч, 27ч, 28ч., 29ч), 109 (в. 22 ч, 26 ч., 27ч, 28 ч, 30ч), 110 (в. 20ч, 22ч, 24ч, 27ч, 29 ч, 111 (в 24ч, 25ч, 26ч, 28ч, 29ч, 31ч), 132 (в. 18ч, 25ч, 27ч, 35ч, 40ч), 133 (в 2ч, 3ч, 30ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 18ч, 20ч, 21ч, 27ч, 35ч, 40ч ,41ч), 134 (в. 1ч, 3ч, 5ч, 6ч, 39 ч), 135 (в. 1ч, 3ч, 4ч, 5ч,7ч, 11ч, 14ч, 15ч, 17ч, 20ч, 23 ч, 25ч, 29ч, 30ч, 31 ч), 136 (в. 1ч, 2ч, 4ч, 7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 16ч, 17ч, 30ч, 31ч), 159 (в. 16ч, 17ч, 19ч, 33ч), 160 (в. 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 12ч, 13ч, 34ч), 161 (в. 1ч, 2ч, 7ч, 8ч, 11ч, 13ч, 30ч, 31ч), 162 (в. 5ч, 7ч), 163 (в. 1ч, 2ч, 6ч, 24ч); кадастровые номера: 39:15:020301:276 (607708+-13642 кв.м.), 38:15:020301:277 (49122+-3879 кв.м.); категория защитности: ценные леса; вид разрешенного использования: осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых).

Согласно подпункту «т» пункта 3.4 договора арендатор обязан по истечении срока действия договора или в случае досрочного прекращения срока действия договора освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и осуществить рекультивацию земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию в соответствии с проектом рекультивации земель и требованиями законодательства Российской Федерации. 

Проектом освоения лесов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности, нарушенных и загрязненных земель, а именно:

- технический этап включает в себя демонтаж оборудования, очистка территории от строительных остатков, временных строений, строительных отходов;

- планировка площадей (засыпка и выравнивание ям, рытвин, за счет имеющихся повышенных форм рельефа: холмов, бугров); мероприятия по предотвращению эрозионных процессов;

- нанесение (возврат) плодородного слоя почвы.

Согласно акту натурального осмотра № 433 от 09.10.2023 в отношении ответчика установлено, что мероприятия по рекультивации земель в соответствии с проектом освоения лесов в части демонтажа временных строений в квартале 136 в 2ч Белозиминская дача Икейского участкового лесничества на 0,2 га (временные постройки, домик, баня находятся на арендуемом участке) не выполнены.

Ненадлежащее исполнение обязательства послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

В силу части 2 статьи 3 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ), если иное не установлено лесным кодексом, другими федеральными законами.

Согласно части 4 статьи 71 ЛК РФ к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные гражданским и земельным кодексами, если иное не установлено лесным кодексом.

Спорные правоотношения сторон вытекают из договора аренды лесного участка № 91-383/21 от 28.07.2021, регулируются главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ЛК РФ и ЗК РФ.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 ЗК РФ лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. 

Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.

Пунктом 6 статьи 13 ЗК РФ определено, что порядок проведения рекультивации земель устанавливается Правительством Российской Федерации.

Частью 2 статьи 60.12 ЛК РФ предусмотрено, что при использовании лесов, охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве лесов, в том числе при выполнении лесосечных работ, должны соблюдаться установленные законодательством Российской Федерации требования по охране окружающей среды от загрязнения и иного негативного воздействия, выполняться меры по охране лесов от загрязнения (в том числе нефтяного, радиоактивного и другого) и иного негативного воздействия, включая меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных объектов в лесах, а также должна осуществляться, в том числе посредством лесовосстановления и лесоразведения, рекультивация земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию.

В силу части 4 этой статьи особенности рекультивации указанных выше земель, меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных объектов в лесах утверждаются Правительством Российской Федерации.

Правила о проведении рекультивации и консервации земель (далее – Правила), утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800.

Как указано в пункте 2 названных Правил «рекультивация земель» – мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.

Рекультивация земель осуществляется согласно утвержденному проекту рекультивации земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий (пункт 8 Правил).

Технические мероприятия могут предусматривать планировку, формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий. 

Из содержания представленного в дело Проекта освоения лесов усматривается, что им предусмотрено выполнение мероприятий указанных в пункте 7 О рекультивации нарушенных земель при геологическом изучении недр, разработке месторождений полезных ископаемых.

Невыполнение мероприятий по рекультивации земель отражено в акте натурального осмотра № 433 от 09.10.2023, составленном с участием представителя ответчика.

По акту приёма-передачи (возврата) от 10.10.2023 лесной участок по окончании срока действия договора аренды №91-429/21 от 30.08.2021 возвращен арендатором арендодателю. При этом арендатором на момент возврата лесного участка технический этап рекультивации земель не выполнен.

Таким образом, поскольку предусмотренная договором (подпункт «т» пункта 3.4) обязанность по рекультивации лесного участка площадью 65,6830 га ответчиком не исполнена, факт неисполнения данной обязанности им не оспорен, суд полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

Суд считает достаточным срок для выполнения технической рекультивации на лесном участке площадью 65,6830 га как заявлено истцом – до 01.06.2026.

Государственная пошлина за рассматриваемый спор составляет 50 000 руб. 

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов или ответчиков.

Из части 3 статьи 110 АПК РФ следует, что государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Поскольку удовлетворено неимущественное требование, с учетом положений абзаца второго пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», государственная пошлина по настоящему делу в сумме 50 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражных судов в сети «Интернет» по адресу: https://kad.arbitr.ru/.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) выполнить технический этап рекультивации по договору аренды лесного участка №91-429/21 от 30.08.2021 путем демонтажа временных строений на площади 0,2 га в выделе 2ч квартала 136 Белозиминской дачи Икейского участкового лесничества в срок до 1 июня 2026 года.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50 000 рублей.

 Решение может быть обжаловано в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Судья И.В.Козлова