АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-19411/21

г. Уфа

18 мая 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 11.05.2022

Полный текст решения изготовлен 18.05.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Каримовой С. Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению 

Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее - учреждение) 

к Обществу с ограниченной ответственностью СК "Империя" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее - общество) 

об обязании ООО СК "Империя" передать исполнительную документацию по выполненным работам в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу,

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда, в судебное заседание не явились. 

Учреждение обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу об обязании ООО СК "Империя" передать исполнительную документацию по выполненным работам в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Определением от 27.07.2021 исковое заявление принято к производству суда.

Истец до рассмотрения спора по существу уточнил исковые требования: просил обязать ответчика передать исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с государственным контрактом от 14.05.2020 № 04/2020-45, а также приложением № 2 к гос. контракту от 14.05.2020 № 04/2020-45 на осуществление строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставку оборудования, неразрывно связанных с производством работ по объекту: «Строительство школы на 375 мест в с.Старый Сибай, Баймакский район Республика Башкортостан» (далее - Объект), по содержанию и составу соответствующую требованиям действующих СНиП в течении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения ООО СК «ИМПЕРИЯ» судебного решения в 10 -дневный срок по передаче исполнительной документации по выполненным работам, взыскать судебную неустойку в размере 200 000 тыс. руб. единовременно, далее по 50 000 тыс. руб. за каждый месяц не исполнения судебного акта до фактического исполнения. 

Уточнение требований принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о дате и времени судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, возражений по существу заявленных требований не выразил, отзыв на иск не подготовил и не направил, несмотря на требования суда исполнить указанную процессуальную обязанность (часть 1 статьи 131 АПК РФ), каких-либо ходатайств не заявил.

Определение суда от 15.12.2021, направленное по юридическому адресу ответчика, получено им 22.12.2021, что подтверждается имеющимся в материалах дела уведомлением органов связи о вручении, почтовые конверты с определениями суда от 27.07.2021, от 13.09.2021, от 13.10.2021, от 15.11.2021, от 02.02.2022, от 10.03.2022 возвращены органами связи с юридического адреса ответчика с отметкой об истечении срока хранения.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон в соответствии со статьей 156 АПК РФ. 

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между учреждением (государственный заказчик) и обществом (генеральный подрядчик) заключен государственный контракт от 14.05.2020 №04/2020-45, в соответствии с которым генеральный подрядчик обязался выполнить по заданию Государственного заказчика строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставку оборудования, неразрывно связанного с производством работ (далее - Работы), по объекту «Строительство школы на 375 мест в с. Старый Сибай, Баймакский район Республики Башкортостан» в соответствии с условиями Контракта, действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, проектной документацией (с учётом положений, установленных в пунктах №1,2 Раздела № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключён Контракт) и в установленные Контрактом сроки, а Государственный заказчик обязуемся принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы и оплатить их в установленном Контрактом порядке.

В пункте 2.1 контракта определены его сроки: в течение 7 дней с момента передачи генеральному подрядчику строительной площадки под строительство по сентябрь 2021 года.

Работы считаются выполненными Генеральным подрядчиком в полном объеме после подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) и при наличии «Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», выданного Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта государственный заказчик обязан передать Генеральному подрядчику по акту приёма-передачи в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Контракта:

- проектную документацию на бумажном носителе в двух экземплярах, на электронном носителе - в одном экземпляре в соответствии с пунктом 5.4 Контракта;

строительную площадку и разрешительную документацию на строительство.

В соответствии с пунктом 5.27 контракта генеральный подрядчик обязан передать Государственному заказчику по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического окончания Работ, но не позднее дня направления Государственному заказчику извещения, указанного в пункте 5.26 Контракта:

схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения Работ и сохраняемых до их фактического окончания (в случаях выполнения соответствующих работ);

исполнительную документацию в 3 экземплярах, в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объектов капитального и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения» согласно перечню, указанному в Приложении № 2 к Контракту.

Как указывает истец, письмом от 08.06.2021 №11-124 он обратился к ответчику с требованием доработать и передать по описи исполнительно-техническую документацию.

Письмом от 22.06.2021 №11-140 истец вновь обратился к ответчику с требованием доукомплектовать и представить исполнительно-техническую документацию в полном комплекте (по разделу: АР, КЖ, ГП, ТС, НВК, ОСК, ГСН).

Письмом от 30.06.2021 №11-146 истец вновь обратился к ответчику, в котором указал, что им не представлена на выполненный и оплаченный заказчиком объем работ в двух экземплярах исполнительно-техническая документация в полном объёме, согласно приложению №2, указал на необходимость забрать направленную исполнительно-техническую документацию на доработку, доукомплектованность и предоставить ее в полном комплекте.

Ссылаясь на нарушение генеральным подрядчиком условий государственного контракта в части своевременного представления исполнительной документации по выполненным работам, истец обратился в суд с рассматриваемым иском. 

Правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 ГК РФ и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе). 

В соответствии со статьей 726 Гражданскою кодекса Российской Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре. 

Присуждение к исполнению обязательства в натуре как способ защиты гражданских прав предусмотрен статьей 12 ГК РФ. Исполнение обязательства в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося обязательства. 

Согласно пункту 1 статьи 398 ГК РФ в случае неисполнения обязательства передать индивидуально определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях. 

В соответствии с пунктом 5.27 контракта генеральный подрядчик обязан передать Государственному заказчику по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического окончания Работ, но не позднее дня направления Государственному заказчику извещения, указанного в пункте 5.26 Контракта:

исполнительную документацию в 3 (Tpqx) экземплярах, в соответствии с РД-11 -02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объектов капитального и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения» согласно перечню, указанному в Приложении № 2 к Контракту.

Согласно части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации. 

Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения предусмотрен Требованиями, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору от 26.12.2006 г. N 1128 (РД-11-02-2006). 

Исполнительная документация включает в себя документы, свидетельствующие об объеме и качестве выполнения работ и состоящие из сертификатов, технических паспортов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ, также актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственным конструкций, актов индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, журналов производства работ и иных материалов, без которых невозможно сдать объект и эксплуатировать. 

Таким образом, условиями договора, нормами Градостроительного кодекса, СниПами предусмотрено наличие запрашиваемых у ответчика пакета документов. 

В рассматриваемом деле исполнительная документация является результатом действий подрядчика по договору, и указанный результат подлежит передаче заказчику. 

Судом установлено, что в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, свидетельствующие о передаче ответчиком истцу исполнительной документации в полном объеме. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований. 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", на основании п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 названного Кодекса), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя. 

В силу п. 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства. 

Согласно п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. 

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.). 

Таким образом, суд считает необходимым по заявлению истца присудить ко взысканию с ответчика судебную неустойку в размере 200 000 руб., далее по 50 000 руб. за каждый месяц неисполнения судебного акта в указанной части до даты фактического исполнения решения суда. 

Согласно части 3 статьи 110 АПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета. Поскольку исковые требования удовлетворены, государственная пошлина в сумме 6000 руб. подлежит взысканию с ответчика непосредственно в доход федерального бюджета 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственность СК "Империя" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) передать государственному казенному учреждению Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнительную документацию по выполненным работам по выполненным работам в соответствии с государственным контрактом от 14.05.2020 № 04/2020-45, а также приложением № 2 к гос. контракту от 14.05.2020 № 04/2020-45 на осуществление строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставку оборудования, неразрывно связанных с производством работ по объекту: «Строительство школы на 375 мест в с.Старый Сибай, Баймакский район Республика Башкортостан» (далее - Объект), по содержанию и составу соответствующую требованиям действующих СНиП в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственность СК "Империя" в 10-дневный срок решения суда в части передачи исполнительной документации по выполненным работам взыскать с общества с ограниченной ответственность СК "Империя" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 200 000 руб. единовременно, далее - по 50 000 руб. за каждый месяц неисполнения до даты его фактического исполнения. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственность СК "Империя" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. сумму государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья С.Х. Каримова