Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

06 ноября 2018 годаДело № А56-111843/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Суркова А. А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

Государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" (адрес:  Россия 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д 42, ОГРН: 1027809256254, ИНН 7830000426, дата регистрации 26.12.2002г.);

к закрытому акционерному обществу "ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ" (адрес:  Россия 191144, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул МЫТНИНСКАЯ 9/ЛИТЕР А/ПОМ.4-Н, ОГРН:  1117847090206; ИНН 7842448678, дата регистрации 16.03.2011);

о взыскании, 

приняв во внимание, что проектная документация передана ответчику только 20.02.2018, между  тем впоследствии о приостановлении работы в порядке ст.716 ГК РФ ответчик не заявлял,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с закрытого акционерного общества "ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ" в пользу Государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга":

- неустойку по государственному контракту № 30/17Д от 07.02.2018за период с 17.04.2018 по 16.07.2018 в размере 108661,47 рублей;

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 4189 рублей.

 В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Сурков А. А.