Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980  тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-3477/2024

04 июня 2024 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т.С.,  рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению  Акционерного общества Холдинговая компания "Якутуголь" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Евромет" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 306 000 рублей,  

без вызова сторон, 

По сведениям, размещенным в Картотеке арбитражных дел по веб-адресу:  https://kad.arbitr.ru, по состоянию на 04.06.2024 по делу № А76-30410/2023 судебное  заседание по заявлению Межрайонной ИФНС России № 23 по Челябинской области  21.09.2023 о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Евромет" отложено на  01.07.2024, процедура банкротства в отношении ООО "Евромет" не введена.  

В соответствии с п. 1.5 договора от 18.05.2023 № 1648 на выполнение работ в  редакции протокола разногласий от 18.05.2023 плановый объем переработки металлолома  июнь 2023 г. - 200 тонн. Плановый объем переработки металлолома в последующих  отчетных периодах (за месяц): не менее 400 тонн.  

Надлежащим результатом работ является порезанный с соблюдением габаритных  размеров к правилам перевозки, погруженный в железнодорожный вагон/транспортное  средство металлолом (п.1.6 договора).  

В соответствии с п.3.1 договора календарные сроки начала и завершения  производства работ по договору определены сторонами следующим образом:  

- срок начала работ – 18.05.2023; - срок окончания работ – 17.05.2024. 

Уведомлением от 25.10.2023 № 1-14-06/4917 истец расторг договор с 30.11.2023. 

Согласно п.9.15 договора в редакции протокола разногласий в случае  неисполнения предусмотренных договором объемов работ в отчетном периоде (месяце),  подрядчик по соответствующему требованию обязуется уплатить заказчику неустойку в  размере 5% от определенной в соответствии с п.7.1 договора стоимости невыполненных  относительно предусмотренного п. 1.5 договора плана работ.  

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за невыполненные в сентябре,  октябре, ноябре 2023 г. работы исходя из расчета: 1 200 тн (400 *3) х 5 100 руб. х 5%.  

Расчет неустойки судом проверен, признан верным, ответчиком не оспорен. 

На основании изложенного, исковые требования являются обоснованными и  подлежат удовлетворению в полном объеме.  

По результатам рассмотрения дела, на основании ч.1 ст.110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате  государственной пошлины, подтверждаемые платежным поручением от 04.04.2024 №  3941, относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Евромет" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Акционерного общества Холдинговая  компания "Якутуголь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере  306 000 руб., а также расходы по государственной пошлине 9 120 руб.  

2. Решение подлежит немедленному исполнению. 

3. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое  решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи  апелляционной жалобы.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней  со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда  - со дня принятия решения в полном объеме.  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха  (Якутия).  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,  размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru  

Судья Т.С. Шамаева