Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47287/2018

22 сентября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  05 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  22 сентября 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Закрытое акционерное общество "СУ-11" (адрес:  198097, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ТРЕФОЛЕВА, 42, ЛИТ.А, ОГРН:  

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ" (адрес:  198152, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, Д. 65, ЛИТЕР А, ОГРН:  

<

***>)

о взыскании

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: ФИО2, по доверенности от 18.06.2018

установил:

Закрытое акционерное общество «СУ-11» (далее – ЗАО «СУ-11) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ») далее – ООО «СК «ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ») о взыскании 272 161,09 руб. по договору генерального подряда от 17.02.2014 № 02/14.

Истец заявил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ЗАО «СУ-11» (генподрядчик) и ООО «СК «ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ» (техзаказчик), принимая во внимание, что между ЗАО «СК «Двадцатый трест» и Обществом с ограниченной ответственностью «Развитие здоровья и спорта» (ООО «ДеФиС»), именуемым в дальнейшем «Инвестор» («Застройщик»), заключен договор №01/14 от 09.02.2014 г, о выполнении ЗАО «СК «Двадцатый трест» функций технического заказчика при строительстве объекта (как он определен п. 1.15 настоящего договора), по условиям которого генподрядчик по заданию заказчика обязуется в установленные договором сроки (Приложение №1 - График производства Работ) выполнить собственными и или) привлеченными силами работы по строительству объекта (физкультурное оздоровительного комплекса), расположенного на земельном участке но адресу Санкт-Петербуг Кировский район, ул. Солдата Корзуна, участок 1 (северо-западнее пересечения с пр. Ветеранов кадастровый номер земельного участка № 78:15:8434А:16), и совместно с Техзаказчиком обеспечить получение Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее 01.07 2016 и передачу объекта Техзаказчику, а Техзаказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и обеспечить их оплату в соответствии с условиями договора.

По пункту 3.1 договора общая стоимость работ по договору является суммой стоимостей различных стадий работ и(или) конкретных видов работ по соответствующим локальным сметам, и, в ходе исполнения Договора и по мере формирования локальных смет, определяется нарастающим итогом. 

На дату заключения договора стоимость работ, утвержденная сторонами, с учетом пункта 2.1. пп.2.1.1. договора составляет 14 124 865,31 руб. и на основании Приложения № 4 (Локальная смета № 1 «Устройство шпунтового ограждения на объекте» и Локальная смета № 2 «Обратный выкуп шпунтового ограждения») к договору (пункт 3.1.1 договора).

В силу пункта 4.1 договора техзаказчик оформляет (подписывает) акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за последний отчетный период в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения их от генподрядчика. Подписание техзаказчиком акта о приемке выполненных работ по формам КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам № КС-3, проставление в них даты составления и печати техзаказчика признается сторонами приемкой работ техзаказчиком.

При наличии возражений по объему или цене выполненных работ техзаказчик вправе возвратить генподрядчику представленные акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат с исправлением объема выполненных Работ с приложением мотивированного объяснения. 

Согласно пункту 5.1 договора оплата выполняемых генподрядчиком работ производится техзаказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет генподрядчика в соответствии с локальными сметами на соответствующую стадию работ, а также Графиком платежей (Приложение № 2 к договору), утвержденным сторонами. На дату заключения договора График платежей составлен на основании Графика производства работ, исходя из затрат, планируемых к осуществлению генподрядчиком при производстве работ в каждый из периодов (мероприятий), предусмотренных Графиком производства работ.

При этом стороны согласились, что:

1. при определении размера, а также даты и порядка перечисления очередного аванса, приоритетное значение будет иметь локальная смета, утвержденная сторонами в отношении соответствующей стадии работ. Не подлежит перечислению в пользу генподрядчика какой-либо платеж, хотя и указанный в Графике платежей, но не подтвержденный локальной сметой на работы, планируемые к производству; и, в этой связи,

2. наступление даты, указанной в Графике платежей, само по себе не является основанием для осуществления в пользу генподрядчика очередного аванса; 

3. неисполнение (отставание) генподрядчиком от Графика производства работ (Стадии работ) является основанием для пересмотра Графика платежей техзаказчиком в одностороннем порядке.

Согласно пункту 5.3 договора оплата выполненных генподрядчиком работ, стоимость которых будут определяться локальными сметами, утверждаемыми сторонами в ходе исполнения договора, производится на основании выставляемого генподрядчиком счета, подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, счета-фактуры на суммы работ, выполненных в отчетном периоду, за вычетом аванса пропорционально объемам Работ, выполненных в отчетном периоде, и с удержанием ежемесячного резерва в размере 5% (пять процентов) от стоимости выполненных работ, до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

Удерживаемый резерв в размере 5% (пять процентов) от общей стоимости выполненных работ выплачивается техзаказчиком по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки объекта рабочей комиссией и подписанного акта законченного строительством объекта, при наличии письменного требования, направленного генеральным подрядчиком в адрес Технического заказчика.

В соответствии с пунктами 6.2, 6.3 договора дата начала работ – дата подписания сторонами акта передачи строительной площадки – 17.02.2014, дата окончания работ – дата получения разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию – 28.03.2016.

В силу пункта 10.2 договора за нарушение предусмотренного договором порядка оплаты работ генподрядчик вправе взыскать с техзаказчика пени в размере 0,05% от размера платежа, осуществленного с задержкой, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ, определяемой по Смете на строительные работы, действующей на момент такого взыскания.

Между ООО «СУ-11» и ООО «СК «ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ» заключены дополнительные соглашения № 1 – 68.

Согласно новой редакции пункта 3.1 договора, изложенной в дополнительном соглашении от 28.03.2016 № 68 к договору, общая стоимость работ по договору является суммой стоимостей различных стадий работ и (или) конкретных видов работ по соответствующим локальным сметам, и, в ходе исполнения договора и по мере формирования локальных смет, определяется нарастающим итогом.

В соответствии с новой редакцией пункта 3.1.1 договора, изложенной в дополнительном соглашении от 28.03.2016 № 68 к договору, на дату заключения договора фиксированная стоимость работ, утвержденная сторонами, составляет 489 492 000 руб.

Стоимость работ в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями составляет – 473 926 009,97 руб.

ООО «СУ-11» выполнило работы, которые приняты заказчиком без замечаний, что подтверждается подписанными с обеих сторон актом приема-сдачи результата выполненных работ от 28.03.2016 на сумму 408 793 305,80 руб. и актом  от 28.03.2016 № 1 о приемке законченного строительством объекта.

Сторонами 25.03.2016 подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, окончательная оплата техзаказчиком выполненных работ по договору, без учета гарантийных удержаний в размере 5% произведена 17.05.2017. 

ООО «СУ-11» направило в адрес ООО «СК «ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ» претензию от 02.10.2017 № 214 с требованием об оплате неустойки в размере 6 207 114,14 руб. за нарушение сроков оплаты выполненных по спорному договору работ.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

В представленном отзыве ООО «СК «ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ» признает пени в размере 270 669,54 руб., просил уменьшить ее размер на основании статьи 333 ГК РФ.

Стороны произвели сверку расчетов, ответчиком представлен контррасчет.

Суд, проверив расчет ответчика, пришел к выводу о том, что истцом не верно рассчитан периоды просрочки по строке 60 (не учтено, что срока платежа приходится на выходной день) и не верно рассчитан ответчиком по строкам 328 и 329, необоснованно уменьшено на 2 дня, в связи с чем согласно расчету суда размер неустойки составил 272 066,17 руб.

В соответствии с частью первой статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений

Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ вправе уменьшить неустойку.

Оснований для применения статьи 333 ГК РФ судом не установлено, поскольку размер пеней составляет 0,05% от размера платежа, незначительно превышающей двукратную ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации.

Доказательств, свидетельствующих о несоразмерности либо чрезмерности начисленной неустойки, ответчик не представил.

Поскольку исковые требования удовлетворены частично, истцу была предоставлена отсрочка при подаче иска, то государственная пошлина по иску взыскивается со сторон в федеральный бюджет Российской Федерации пропорционально удовлетворенным требованиям с каждой из сторон.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ» в пользу закрытого акционерного общества «СУ-11» 272 066,17 руб. неустойки.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ» в доход федерального бюджета 8440 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Косенко Т.А.