Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-98589/2018

29 января 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  17 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  29 января 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Г.А.ТОВСТОНОГОВА"

ответчик: Федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" 

третье лицо: Министерство Культуры Российской Федерации 

о понуждении к исполнению обязательств

при участии

- от истца: адвокат Жиганова А.А. по доверенности №01 от 09.01.2019

- от ответчика: ФИО1 представитель по доверенности №818/18 от 27.12.2018

установил:

Истец - Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Г.А.ТОВСТОНОГОВА" обратился в суд с иском о понуждении к исполнению обязательств ответчика - Федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

Данные требования были заявлены во встречном иске по делу А56-52713/2017, в процессе слушания были выделены в отдельное производство с присвоением номера А56-98589/2018.

Определением от 22.11.2018 г. в качестве третьего лица без самостоятельных требований было привлечено Министерство культуры РФ как учредитель ответчика. 

Истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнял исковые требования,  в окончательной редакции просит обязать ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» в тридцатидневный срок устранить замечания к ведомостям №3/1, №4/1, №5/1, №6, части позиций ведомостей №7/1 и №8/1, по ведомостям №10/1 и 11/1, в частности:

1.1. осуществить допоставку недостающего имущества и оборудования на сумму 1 608 649 рублей 22 коп.

1.2. предоставить комплект документов, подтверждающий правомерность замены позиций имущества и оборудования на сумму 9 827 507 руб. 19 коп.

1.3. обязать ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» предоставить Театру лицензии и иные документы, подтверждающие право пользования Театра на программное обеспечение, поставленное в Театр в рамках государственных контрактов №001/13-БДТ от 03.06.2013 и №004/11-БДТ от 13.12.2011.

1.4. устранить иные замечания, связанные с отсутствием документации, непроведением работ по монтажу, некомплектностью оборудования и другие, согласованные сторонами в ведомостях №3/1, 7/1,8/1,11/1 в графе «замечания».

После устранения замечаний согласно п.1 просительной части иска обязать ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» в тридцатидневный срок передать вложения и оформить их документально.

По ведомостям №2(электрооборудования), а также ведомостям №21 (ПНР -пуско-наладочных работ), №24 (СМР - строительно-монтажных работ литер А), №25 (ПИР - проектно-изыскательских работ) обязать ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» предоставить инвентаризационные документы на произведенный объем вложений.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

Третье лицо не явилось, отзыв, ходатайства не представило. 

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что в рамках реконструкции, проводимой Ответчиком как Заказчиком работ на объекте «Реконструкция, реставрация и техническое перевооружение Российского государственного академического большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 65, литер А, Б, В, Г, Д, К и М», Ответчик не в полном объеме выполнил строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, недопоставил часть оборудования и имущества, а по ряду позиций осуществил произвольную замену оборудования и имущества, то есть поставил на объект не то оборудование, которое принял по КС-2 и оплатил своим подрядчикам (ЗАО «БалтСтрой», ЗАО «ТДМ» и др.), и при этом не представил документов  в  обоснование  замены.  

Кроме того,  на  программное обеспечение, установленное на оборудование Истца, стоимостью свыше 50 миллионов рублей Ответчик не предоставил документы, подтверждающие правомерность его использования, что влечет угрозу наложения штрафных санкций на Истца за использование контрафактных экземпляров программ. Объем прав Истца как лицензиата  на  использование  программных  продуктов  должен  быть  определен лицензионным договором, что предусмотрено ст.1235 ГК РФ. Ответчик не передал техническую, исполнительную и иную необходимую для использования и обслуживания оборудования документацию, хотя заключенными Ответчиком контрактами предусмотрено ее предоставление  в обязательном  порядке.  Согласно действующим  СНиП, такая документация изготавливается в 4 экземплярах, то есть резервные копии остаются и у заказчика работ, и у подрядчика. Несмотря на многократные обращения Истца по вопросу предоставления такой документации, в адрес  Истца она не передается уже более трех лет.

Указанные выше нарушения и недостачи были выявлены при первой же проверке представленных ответчиком документов комиссиями Истца, созданными в апреле 2015 года. С этого момента и до настоящего времени Истец обращается с многочисленными письмами к ответчику и в Министерство культуры с требованием об устранении нарушений.

Факт отсутствия строительно-монтажных работ в отношении сценического оборудования подтверждается Актом проверки №72-11-02/202 от 22.12.2015, проведенной Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. Проверкой Прокуратуры Центрального района, проведенной в период с января по апрель 2017 года, установлено отсутствие имущества и невыполнение работ на сумму свыше 68 миллионов рублей.

Наличие недостачи подтверждается также самими подрядчиками СЗД - компаниями АО «БалтСтрой» и АО «ТДМ».

В гарантийном письме от 11.05.2016 и письмах подрядчика АО «БалтСтрой» от 27.04.2016 и от 28.04.2016 в адрес Ответчика содержится обязательство допоставить отсутствующее оборудование. Однако оборудование (тепловые завесы в количестве 6 штук) так и не поставлено, что установлено проверкой Прокуратуры Центрального района (акт проверки от 09.03.2017).

Письмами АО «ТДМ» от 24.05.2017, 25.05.2017, 05.06.2017, 27.06.2017 в адрес Ответчика АО «ТДМ» подтверждает готовность выполнить монтаж оборудования, находящегося на объекте Истца. Однако данные работы так и не были выполнены.

Только после вынесенного 26.04.2017 Прокуратурой Центрального района представления в адрес ответчика об устранении нарушений бюджетного законодательства Ответчик приступил к оформлению документации для поэтапной приемки, хотя Истец ранее многократно предлагал осуществить передачу части вложений, по которым у Истца не имелось замечаний.

За период с мая по июль 2017 года ответчик направил в адрес Истца проекты ведомостей, акты приема-передачи вложений и извещения для приемки оборудования и имущества на сумму всего около 409 миллионов рублей из 6,157 миллиардов. После проверки было установлено, что Истец может принять только имущество и работы на сумму 300 миллионов рублей, что и было сделано, а оборудование и работы на сумму более 108 миллионов рублей не могут быть приняты до устранения замечаний. 

По вложениям в сценическое оборудование на сумму 1,9 миллиардов рублей ответчик не осуществляет никаких действий по оформлению передачи, не отвечает на запросы Истца и не высылает документы. Истец готов принять вложения на сумму более 1,4 миллиардов рублей, а в отношении остальной части сценического оборудования, имущества и строительно-монтажных работ на сумму свыше 497 миллионов рублей имеются замечания, препятствующие его приемке. В сентябре 2017 года Театром подготовлены и направлены в адрес Дирекции соответствующие ведомости №12, 12-СМР и 13 для подготовки документов по приемке (письма исх.№577 и №612), а также ведомости №12/1, 12-СМР/1 и 13/1, в которых зафиксированы замечания, препятствующие приемке.

По остальным вложениям на сумму свыше 3,5 миллиардов никакие документы для проверки, приемки и подписания Истцу не представлены, хотя Истец неоднократно запрашивал их у СЗД. Последнее из писем исх.№ 597 было направлено в адрес СЗД 28.09.2017.

В настоящее время процесс приемки полностью остановлен Ответчиком, документы для приемки Истцу не передаются, хотя Истец неоднократно выражал готовность к приемке имущества, в отношении которого у Истца нет замечаний. Затягивание приемки-передачи мешает производственному процессу Истца и существенно затрудняет эксплуатацию оборудования. Допущенное Ответчиком нарушение длится начиная с даты фактического въезда Истца в здание после реконструкции, то есть с 2014 года. За указанный период Истец многократно обращался с претензиями и требованиями о допоставке, об осуществлении приемки-передачи и устранении допущенных недостатков. Так, претензии были направлены 12.03.2015, 29.06.2015, 14.12.2015, 12.12.2016, 15.12.2016 и др. Последние из претензий направлялись Истцом 28.09.2017, 09.10.17, 11.10.2017, 27.10.2017, 30.10.2017.

Истцом до настоящего времени было принято вложений и поставлено на баланс имущества и оборудования на общую сумму 2 186 701 269,10 руб. На момент начала инвентаризации, проводимой Сторонами на основании Поручения Министра культуры РФ от 15.06.2018, Истцу не передано и находилось на балансе Ответчика имущества на сумму 3 970 994 935,89 руб. (подтверждено инвентаризационной описью №1СЗД от 15.06.2018).

В ходе инвентаризации Сторонами была проведена проверка наличия имущества и оборудования, Ответчиком были составлены проекты инвентаризационных ведомостей и направлены Истцу. По результатам проверки установлено, что значительная часть проектов инвентаризационных ведомостей содержит технические и фактические ошибки, о которых Истец многократно уведомлял ответчика. К настоящему времени инвентаризация не завершена и сроки ее окончания неизвестны в связи с невозможностью установить точные сроки предоставления Ответчиком корректной документации.

По ведомостям №3/1, №4/1, №5/1, №6, оставшимся позициям ведомостей №7/1 и №8/1, по ведомостям №10/1 и 11/1 сформированы перечни недостач, замен и определен объем претензий Театра.

По ведомостям №2 (электрооборудование), а также ведомостям №21 (ПНР - пуско-наладочные работы), №24 (СМР - строительно-монтажные работы литер А), №25 (ПИР - проектно-изыскательские работы) в настоящий момент объем претензий Истца не может быть определен в связи с тем, что со стороны Ответчика не представлены корректные инвентаризационные документы, а в представленных проектах указаны несуществующие работы, часть позиций пропущена, в связи с чем требуется получение корректных инвентаризационных документов.

Ответчик возражает против удовлетворения иска по следующим основаниям.

Истец просит обязать ответчика передать оборудование по контракту от 03.06.2013 №001/13-БДТ, а именно: водяная воздушная завеса AGV4020WH (6 шт.), блок внутренний кондиционера PLFY-P20VCM-E.

При этом в материалы дела истец приобщает копию представления Прокуратуры Центрального района г. Санкт-Петербурга от 26.04.2017 № 03-02/2017-133, согласно которому данное оборудование не было поставлено подрядчиком. По факту недопоставки данного оборудования возбуждено уголовное дело, в рамках которого осуществляются следственные мероприятия по поиску оборудования.

Место нахождения оборудования в данный момент неизвестно, закупка и поставка его за счет ответчика, являющегося казенным учреждением, невозможна.

В случае установления органами следствия местонахождения оборудования оно незамедлительно будет предоставлено ответчику.

В п. 3 просительной части иска истец прилагает список компьютерного и коммуникационного оборудования, которое отличается по наименованию производителя от списка в приложении к техническому заданию, но соответствует заданию по техническим характеристикам, и просит суд обязать ответчика поставить именно такое оборудование, какое указано в техническом задании.

Ответчик считает неправомерным требование о замене оборудования, используемого истцом с 2014 года, на новое. Ответчик представлял истцу сличительные ведомости, согласно которым технические характеристики соответствуют условиям государственных контрактов.

При приемке имеющегося оборудования возможно сделать отметку о несоответствии наименования производителя, при соответствии иных характеристик и стоимости.

В п. 4 просительной части иска истец просит обязать ответчика устранить замечания к оборудованию и имуществу согласно ведомостям № № 3/1, 4/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1:

Ведомость № 3/1 - обосновать замену производителя оборудования, допоставить 2 насоса; Ведомость № 4/1 - обосновать замену производителя компьютерного оборудования; Ведомость №7/1 - предоставить документы для эксплуатации технологического оборудования;

Ведомость № 8/1 - предоставить документы для эксплуатации театрального оборудования;

Ведомость № 10/1 - обосновать замену производителя 2х краскопультов;

Ведомость № 11/1 - в результате изготовления с нарушениями одежда сцены не подлежит использованию. Исходя из ведомости невозможно сделать вывод, в результате чего возникли дефекты - при изготовлении или вследствие неправильного хранения.

В просительной части иска истец просит обязать ответчика предоставить лицензии и иные документы для использования программного обеспечения согласно представленному ответчиком перечню.

Однако вышеупомянутый перечень в настоящее время не актуален. В настоящее время не передано лишь незначительное количество запрошенных документов, что не свидетельствует о невозможности приемки и использования иных позиций, по которым все необходимые документы в наличии.

Оценив доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Ответчик, выступая заказчиком работ по объекту «Реконструкция, реставрация и техническое перевооружение Российского государственного академического большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 65, литер А, Б, В, Г, Д, К и М», обязан был принимать исполнение у привлеченных к работам подрядчиков, и передавать результат работ истцу (Театру) как выгодоприобретателю. 

Тот факт, что подрядчики по контрактам с ответчиком не в полном объеме выполнили строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, недопоставили часть оборудования и имущества, а по ряду позиций осуществили произвольную замену оборудования и имущества, подтверждается проверками, проведенными на объекте органами Росфиннадзора и Прокуратуры, а также самими подрядчиками - компаниями АО «БалтСтрой» и АО «ТДМ».

Театр лишен возможности заявлять требования непосредственно к исполнителям работ, вследствие чего им правомерно предъявлены требования к ответчику о надлежащем оформлении результата работ и сопроводительной документации, передаче недостающего оборудования и программного обеспечения.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Доказательства надлежащего исполнения обязательств в части, указанной в заявленных истцом требованиях, ответчик не представил, ссылаясь на недобросовестность подрядчиков, что не может являться основанием для освобождения ответчика от исполнения его обязательств перед истцом. 

Слушание дела неоднократно откладывалось по ходатайству ответчика, который выражал намерение урегулировать проблемы во внесудебном порядке, однако стороны не достигли взаимоприемлемых результатов.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции иреставрации» в шестидесятидневный срок с момента вступления решения в законную силу устранить замечания к ведомостям №3/1, №4/1, №5/1, №6, №7/1 и №8/1, №10/1 и 11/1, изложенные в графе «Замечания» указанных ведомостей.

Обязать ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» передать ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА" лицензии и иные документы, подтверждающие право пользования на программное обеспечение, поставленное в рамках государственных контрактов №001/13-БДТ от 03.06.2013 и №004/11-БДТ от 13.12.2011 согласно Реестрам непереданного программного обеспечения и оборудования с предустановленным программным обеспечением (приложение №1 к решению).

Обязать ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции иреставрации» передать ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА" инвентаризационные ведомости на товары, работы, программное обеспечение, указанные в п.п. 1 и 2 настоящего решения.

Обязать ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции иреставрации» передать ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА" инвентаризационные ведомости по ведомостям №2 (электрооборудование), №21 (ПНР-пуско-наладочные работы), №24 (СМР-строительно-монтажные работы литер А), №25 (ПИР-проектно-изыскательские работы).

Взыскать с Федерального Государственного казенного учреждения «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА" 18 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.

Приложение №1 к решению.

Реестр непереданного программного обеспечения и оборудования с предустоновленным программным обеспечением

№ акта по ф.КС-2 и дата

№ п/п в КС-2

Контракт

Полное наименование системы

Наименование оборудования

Ед. изм.

Кол-во

Цена без учета НДС

Сумма без учета НДС (компенсации на НДС)

НДС (компенсация) 18%

Сумма с учетом НДС (компенсации)

Подтверждающий документ

Примечание

31

17

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер Б.

Программное обеспечение предустановленное Unified Communications Manager Enchanced Single User-Under 1KILC-CUCM-USR-A

шт.

11

5919,86

65118

11721,24

76839,24

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

31

18

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер Б.

Программное обеспечение предустановленное UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier AUCSS-U-UCM-A-3-1

шт.

11

733,04

8063

1451,34

9514,34

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

43

19

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер В.

Программное обеспечение предустановленное UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier AUCSS-U-UCM-A-3-1

шт.

17

732,94

12460

2242,8

14702,8

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

43

20

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер В.

Программное обеспечение предустановленное Unified Communications Manager Enchanced Single User-Under 1KILC-CUCM-USR-A

шт.

17

5919,86

100638

18114,84

118752,84

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

54

18

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер Г.

Программное обеспечение предустановленное UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier AUCSS-U-UCM-A-3-1

шт.

22

732,94

16125

2902,5

19027,5

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

54

19

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер Г.

Программное обеспечение предустановленное Unified Communications Manager Enchanced Single User-Under 1KILC-CUCM-USR-A

шт.

22

5919,86

130237

23442,66

153679,66

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

63

4

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер Д.

Программное обеспечение предустановленное UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier AUCSS-U-UCM-A-3-1

шт.

2

732,94

1466

263,88

1729,88

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

63

5

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер Д.

Программное обеспечение предустановленное Unified Communications Manager Enchanced Single User-Under 1KILC-CUCM-USR-A

шт.

2

5919,86

11840

2131,2

13971,2

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

73

18

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер К.

Программное обеспечение предустановленное UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier AUCSS-U-UCM-A-3-1

шт.

18

732,94

13193

2374,74

15567,74

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

73

19

001/13 от 03.06.2013г.

Структурированная кабельная система. Литер К.

Программное обеспечение предустановленное Unified Communications Manager Enchanced Single User-Under 1KILC-CUCM-USR-A

шт.

18

5919,86

106557

19180,26

125737,26

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

112

76

001/13 от 03.06.2013г.

Система сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС)

Device Driver BacNet EX-5-BCNET-NAOO

шт.

1

89351,69

89352

16083,36

105435,36

Переданы диски           Необходимо предоставить лицензию и провести процедуру переоформления согласно лицензионной политики разработчика ПО

112

77

001/13 от 03.06.2013г.

Система сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС)

Driver ModBus JPC-MODBUS-NAOO

шт.

1

55121,19

55121

9921,78

65042,78

Переданы диски           Необходимо предоставить лицензию и провести процедуру переоформления согласно лицензионной политики разработчика ПО

112

78

001/13 от 03.06.2013г.

Система сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС)

SNMP Driver. Ping Driver(1-15 устройств) EX5-BCNET-BA15

шт.

1

52809,37

52809

9505,62

62314,62

Переданы диски           Необходимо предоставить лицензию и провести процедуру переоформления согласно лицензионной политики разработчика ПО

112

79

001/13 от 03.06.2013г.

Система сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС)

OPS сервер для С2000-ПП (исп. 10) НВП "Болид"

шт.

1

27686,44

27686

4983,48

32669,48

Согласно лицензионного соглашения необходим электронный ключ

Необходимо передать электронный ключ

112

80

001/13 от 03.06.2013г.

Система сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС)

OPS сервер для оборудования Siemens SiemensS7 PLC OPC Server

шт.

1

62923,73

62924

11326,32

74250,32

Передана буммажная лицензия на ООО"Сфера"

Необходимо провести процедуру переоформления согласно лицензионной политики разработчика ПО

112

85

001/13 от 03.06.2013г.

Система сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС)

SQL Svr Standart Edtn 2012 Russian Russia DVD 10 Clt 228-09589

шт.

1

135082,14

135082

24314,76

159396,76

Ответ-Microsoft на запрос

Необходимо предоставить заверенные копии документов, подтверждающих приобретение ПО

112

95

001/13 от 03.06.2013г.

Система сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС)

Офисный пакет приложений Office 2010 Microsoft

шт.

1

11863,22

11863

2135,34

13998,34

Ответ-Microsoft на запрос

Вместо Офисный пакет приложений Office 2010 Microsoft передан  ПО MS Office Home and Business 2013 BOX.                   Необходимо предоставить заверенные копии документов, подтверждающих приобретение ПО

113

69

001/13 от 03.06.2013г.

Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций (СМИК)

Программный комплекс сервера системы мониторинга инженерных конструкций (базовый модуль на 360 точек) ПК Сервера СМИК

шт.

1

4692128,49

4692128

844583,04

5536711,04

Переданы бумажные лицензии на ПО на ПК АРМ СМИК

113

72

001/13 от 03.06.2013г.

Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций (СМИК)

SQL Svr Standart Edtn 2012 Russian Russia DVD 10 Clt 228-09589

шт.

1

135082,14

135082

24314,76

159396,76

Ответ-Microsoft на запрос

Необходимо передать SQL Svr Standart Edtn 2012 Russian Russia DVD 10 Clt 228-09589 и предоставить заверенные копии документов, подтверждающих приобретение ПО

113

84

001/13 от 03.06.2013г.

Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций (СМИК)

Операционная система Microsoft Windows 7 professional FQC-05347

шт.

1

9732,2

9732

1751,76

11483,76

Ответ-Microsoft на запрос

Необходимо предоставить заверенные копии документов, подтверждающих приобретение ПО

113

85

001/13 от 03.06.2013г.

Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций (СМИК)

ПО MS Office Home and Business 2013 BOX TSD-01763

шт.

1

11863,22

11863

2135,34

13998,34

Ответ-Microsoft на запрос

Ошибка в наименовании (вместо T5D-01763 написано TSD-01763) Необходимо предоставить заверенные копии документов, подтверждающих приобретение ПО

115

67

001/13 от 03.06.2013г.

Система информирования и оповещения населения (ОКСИОН)

Windows 7 Professional Edition (Win Pro 7 Russian DVD) FQC-00265

шт.

1

9782,54

9783

1760,94

11543,94

Ответ-Microsoft на запрос

Ошибка в наименовании (вместо FQC-05347 написано  FQC-00265) Необходимо предоставить заверенные копии документов, подтверждающих приобретение ПО

115

69

001/13 от 03.06.2013г.

Система информирования и оповещения населения (ОКСИОН)

Team Viewer

шт.

1

39600

39600

7128

46728

Ответ-TeamViewer

не установлено             Необходимо провести процедуру передачи лицензии

124

9

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

Операционная система ОС Windows 7

шт.

1

6186,44

6186,44

1113,56

7300

Ответ-Microsoft на запрос

Вместо Операционная система ОС Windows 7 передана Операционная система Windows 7 Professional (BOX)  Необходимо предоставить платежные дакументы, подтверждающие приобретение ПО

124

10

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

WinCC V7.0 RT (Runtime, вкл. 512 архивных тегов) 8 192 переменных

шт.

1

120127,12

120127,12

21622,88

141750

Ответ-Siemens на запрос

Вместо WinCC V7.0 RT (Runtime, вкл. 512 архивных тегов) 8 192 переменных передано WinCC V7.2 RT

124

11

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

WinCC / Connectivity Station V7.0 (для доступа с внешнего ПК к серверам WinCC, в т.ч. CAS)

шт.

1

84205,34

84205,34

15156,96

99362,3

Ответ-Siemens на запрос

Вместо WinCC / Connectivity Station V7.0 (для доступа с внешнего ПК к серверам WinCC, в т.ч. CAS) передано WinCC / Connectivity Station V7.2

124

12

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

Операционная система ОС Windows Server 2005

шт.

1

18864,41

18864,41

3395,59

22260

Ответ-Microsoft на запрос

Вместо  Операционная система ОС Windows Server 2005 передана Операционная система Windows Server 2012 R2 Необходимо предоставить платежные дакументы, подтверждающие приобретение ПО

124

13

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

WinCC V7.0 RC (полный пакет RC = Runtime + проектирование, вкл. 512 архивных тегов) 8 192 переменных

шт.

1

208928,18

208928,18

37607,07

246535,25

Ответ-Siemens на запрос

Вместо WinCC V7.0 RC (полный пакет RC = Runtime + проектирование, вкл. 512 архивных тегов) 8 192 переменных передано WinCC V7.2 RC

124

14

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

WinCC V7.0 Archive (лицензии на архивные теги суммируются: 1500 + 5000 = 6500, 512 базовых бесплатных архивных тегов не суммируется) 5000 переменных

шт.

1

69167,48

69167,48

12450,15

81617,63

Ответ-Siemens на запрос

Вместо WinCC V7.0 Archive (лицензии на архивные теги суммируются: 1500 + 5000 = 6500, 512 базовых бесплатных архивных тегов не суммируется) 5000 переменных передано WinCC V7.2 Archive

124

15

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

WinCC / Server 1

шт.

1

88248,47

88248,47

15884,72

104133,19

Ответ-Siemens на запрос

Вместо WinCC / Server 1 передано  WinCC / Server  V7.2

124

16

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

WinCC / Web Navigator V7.0 10 клиентов

шт.

1

308142,19

308142,19

55465,59

363607,78

Ответ-Siemens на запрос

Вместо WinCC / Web Navigator V7.2  написано WinCC / Web Navigator V7.0 10 клиентов

124

17

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

WinCC / Connectivity Pack V7.0 1

шт.

1

29784,66

29784,66

5361,24

35145,9

Ответ-Siemens на запрос

Вместо WinCC / Connectivity Pack V7.0 1 передано WinCC / Connectivity Pack V7.2

124

18

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизированная система управления доступом. Литер А

WinCC / IndustrialDataBridge V7.0 2 048 переменных

шт.

1

53024,8

53024,8

9544,46

62569,26

Ответ-Siemens на запрос

Вместо WinCC / IndustrialDataBridge V7.0 2 048 переменных передано WinCC / IndustrialDataBridge V7.2

128

36

004/11 от 13.12.2011г.

Локальная вычислительная сеть. Литер А

Экземпляр ПО в электронном виде Unified Communication  E-Delivery PAK for Cisco 2901-2951L-SL-29-UC-K9

шт.

2

19932,2

39864,4

7175,59

47039,99

Необходимо предоставить  лицензию в электронном виде и провести процедуру передачи ПО Театру

128

41

004/11 от 13.12.2011г.

Локальная вычислительная сеть. Литер А

Программное обеспечение предустановленное Unified Communications Manager Enhanced Single User-Under 1KLIC-CUCM-USR-A

шт.

240

5979,66

1435118,4

258321,31

1693439,71

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Переданы диски.   Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

128

42

004/11 от 13.12.2011г.

Локальная вычислительная сеть. Литер А

Программное обеспечение предустановленное  UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier AUCSS-U-UCM-A-3-1

шт.

240

740,34

177681,6

31982,69

209664,29

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

128

51

004/11 от 13.12.2011г.

Локальная вычислительная сеть. Литер А

Программное обеспечение на CD ASA 5500 5 Security Contexts License

шт.

2

106778,66

213557,32

38440,31

251997,63

Переданы диски.               ПО не установлено на оборудование.  Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

128

55

004/11 от 13.12.2011г.

Локальная вычислительная сеть. Литер А

Экземпляр ПО в электронном виде Prime Infrastructure 1.1 Software - 100 Device Base Lic

шт.

1

256128,48

256128,48

46103,13

302231,61

Необходимо предоставить  лицензию в электронном виде и провести процедуру передачи ПО Театру

129

17

004/11 от 13.12.2011г.

Система контроля и управления доступом. Литер А

Программное обеспечение на CD Cisco PAM Software Version 1.X (MSP ) CIAC-PAME-M1X-K9

шт.

2

227796,61

455593,22

82006,78

537600

Переданы диски.   Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

132

10

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение Paper IP to Ent Services LicenseC4500E-IP-ES

шт.

2

293141,49

586282,98

105530,94

691813,92

Необходимо предоставить бумажную лицензию и провести процедуру передачи ПО Театру

132

21

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение на CD Nexus 5500 Storage License, 8 PortsN55-8P-SSK9

шт.

2

91118,64

182237,28

32802,71

215039,99

Необходимо предоставить бумажную лицензию, ПО на материальном носителе и провести процедуру передачи ПО Театру

132

22

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение на CD Layer 3  License for Nexus 5500 PlatformN55-LAN1K9

шт.

2

284745,76

569491,52

102508,47

671999,99

Необходимо предоставить бумажную лицензию, ПО на материальном носителе и провести процедуру передачи ПО Театру

132

27

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение на CD Cisco Virtualization Experience Client ManagerCVXCM-K9

шт.

120

2562,71

307525,2

55354,54

362879,74

Необходимо предоставить бумажную лицензию, ПО на материальном носителе и провести процедуру передачи ПО Театру

132

28

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение на CD Cisco Virtualization Experience Client Manager UCSS 3 YrUCSS-CVXCM-3-1

шт.

120

541,02

64922,4

11686,03

76608,43

Ответ-Cisco от 11.07.2018 на Запрос-Cisco от 10.07.2018

Необходимо предоставить бумажную лицензию, ПО на материальном носителе и провести процедуру передачи ПО Театру

132

31

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение на CD VMware vCenter 5 Server Standard, 3 yr support requiredVMW-VC5-STD-3A

шт.

1

339985,51

339985,51

61197,39

401182,9

Ответ-VmWare на Запрос -VmWare исх. №101от 09.03.2017

Необходимо предоставить CD и провести процедуру передачи ПО

132

54

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение на CD Bundle of VMware Ent Plus and Nexus 1K LicenseUCS-VMW-N1K-BUN

шт.

8

237905,08

1903240,64

342583,32

2245823,96

Ответ-VmWare на Запрос -VmWare исх. №101от 09.03.2017

Необходимо предоставить CD и провести процедуру передачи ПО

132

55

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение на CD Bundle of VMware Ent Plus and Nexus 1K LicenseUCS-VMW-N1K-BUN

шт.

4

237905,08

951620,32

171291,66

1122911,98

Ответ-VmWare на Запрос -VmWare исх. №101от 09.03.2017

Необходимо предоставить CD и провести процедуру передачи ПО

132

56

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение на CD Bundle of VMware Ent Plus and Nexus 1K LicenseUCS-VMW-N1K-BUN

шт.

4

237894,08

951576,32

171283,74

1122860,06

Ответ-VmWare на Запрос -VmWare исх. №101от 09.03.2017

Необходимо предоставить CD и провести процедуру передачи ПО

132

57

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение на CD  Cisco UCS VIC 1240 modular LOM for M3 blade serversUCSB-MLOM-40G-01

шт.

2

42683,39

85366,78

15366,02

100732,8

Необходимо передать лицензию, ПО на материальном носителе и провести процедуру передачи ПО Театру

132

77

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Протокол CIFS 3240A -C, SW-3240A-CIFS-C

шт.

2

495335,59

990671,18

178320,81

1168991,99

требуется получить ответ от разработчика о способе передачи лицензии Театру

132

78

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение Software Support Plan, CS-S-SSP

шт.

1

2314260,92

2314260,92

416566,97

2730827,89

не является программным обеспечением

требуется получить ответ от разработчика о способе передачи лицензии Театру

132

79

004/11 от 13.12.2011г.

Серверные решения и система хранения данных. Литер А

Программное обеспечение IT-GRAD Storage System Support Spares + Install (3 year),ITG-PROFS-SS

шт.

1

2755220,34

2755220,34

495939,66

3251160

не является программным обеспечением

требуется получить ответ от разработчика о способе передачи лицензии Театру

133

7

004/11 от 13.12.2011г.

Электронные афиши. Литер А

Программное обеспечение на CD DMP 4310 Firmware Version 5.3DMP-4310G-SW53-K9

шт.

7

25484,75

178393,25

32110,79

210504,04

Необходимо предоставить бумажную лицензию, ПО на материальном носителе и провести процедуру передачи ПО Театру

133

10

004/11 от 13.12.2011г.

Электронные афиши. Литер А

Программное обеспечение на CD DMS DMP NOD Feature License for Up To 10 DMPsDMS-DMPNOD-FL-10

шт.

1

455593,22

455593,22

82006,78

537600

Необходимо предоставить бумажную лицензию, ПО на материальном носителе и провести процедуру передачи ПО Театру

344

36

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизация общеобменной вентиляции. Литер А

Программное обеспечение на CD CIVS-MS Media Server v6.3 Software Lic. with Hardware  CIVS-MS-SW6.3  Cisco System, Inc.

шт.

5

33742,37

168711,85

30368,13

199079,98

Вместо CD переданы USB.  Необходимо предоставить бумажную лицензию  и провести процедуру передачи ПО Театру

344

37

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизация общеобменной вентиляции. Литер А

Программное обеспечение на CD CIVS-OM Operations Manager v6.3 Software Lic.  CIVS-OM-SW6.3 Cisco System, Inc.

шт.

1

213559,32

213559,32

38440,68

252000

Необходимо предоставить бумажную лицензию, ПО на материальном носителе и провести процедуру передачи ПО Театру

344

38

004/11 от 13.12.2011г.

Автоматизация общеобменной вентиляции. Литер А

Операционная система  Windows 7

шт.

2

6186,94

12373,88

2227,3

14601,18

Ответ-Microsoft на запрос

Вместо Операционная система Windows 7 передана Операционная система Windows 7  Professional (BOX)                          Необходимо предоставить заверенные копии документов, подтверждающих приобретение ПО

345

68

004/11 от 13.12.2011г.

Система контроля управления доступом. Литер А

Операционная система Windows 7 Professional (BOX)

шт.

3

6186,44

18559,32

3340,68

21900

Ответ-Microsoft на запрос

Необходимо предоставить заверенные копии документов, подтверждающих приобретение ПО

26 447 265,35