24/2022-5302(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-5537/2021

г. Петропавловск-Камчатский

07 февраля 2022 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи О.Н. Бляхер, при  

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания С.О.  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных  домов Камчатского края  

к обществу с ограниченной ответственностью  «Новострой-М»  

об устранении недостатков работ, выполненных по договору от 10.05.2018  

 № 74/2018, о взыскании судебной неустойки, о взыскании 25 000 руб. судебных  

издержек, при участии: 

от истца: ФИО2 – представитель по  доверенности № 21/2021 от 21.05.2021 (сроком  до 21.05.2022);  

от ответчика: не явились. 

Руководствуясь статьями 104, 110, 167–170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Новострой М» в срок  до 15.07.2022 устранить недостатки выполненных работ по договору № 74/2018 от  10.05.2018, а именно:  

1. Демонтировать трубопровод центрального отопления диаметром до 100 

мм в многоквартирном доме № 3 по ул. Пономарева в г.  Петропавловске-Камчатском в следующих помещениях:  

а) подвальные помещения подъезды 1 - 6; 

б) квартиры № 1,2,3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54,  65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79;  

в) подъезды 1-6 - подводка труб центрального отопления к радиаторам.   2. Смонтировать трубопровод центрального отопления из  многослойных полипропиленовых труб наружным диаметром до 100 мм в  многоквартирном доме № 3 по ул. Пономарева в г. Петропавловске-Камчатском,  соответствующих требованиям «ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из  термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и  отопления. Общие технические условия», а также СП 347.1325800.2017  «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила  эксплуатации» с проведением гидравлических испытаний с обеспечением передачи  смонтированной системы организации, осуществляющей управление указанным  многоквартирным домом в следующих помещениях:  

а) подвальные помещения подъезды 1-6; 

б) квартиры № 1,2,3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54,  65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.  

в) подъезды 1-6 - подводка труб центрального отопления к радиаторам. 

3. В случае неисполнения решения суда в срок до 15.07.2022 взыскать  с общества с ограниченной ответственностью «Новострой М» в пользу Фонда  капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края судебную  неустойку в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения  суда, начиная с 16.07.2022 по день его фактического исполнения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новострой М» в  пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края  судебные издержки в сумме 25 000 руб. и 6 000 руб. расходов по оплате  государственной пошлины, всего – 31 000 руб.  

Выдать Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского  края справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной  государственной пошлины в сумме 2 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья О.Н. Бляхер 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.12.2021 2:33:18Кому выдана Бляхер Ольга Николаевна