29/2017-47484(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-3813/2017

г. Тюмень

15 июня 2017 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрел в  исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ТД-стройсервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Федеральному государственному автономному  образовательному учреждению высшего образования «Тюменский государственный  университет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о внесении изменений в договор   № 1К/00063-16 и продлении срока выполнения работ, руководствуясь статьями 167-170,  176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить. 

Внести изменения в п. 3.1. договора № 1К/00063-16 от 28.04.2016 года и  календарный график выполнения работ, являющейся приложением № 1 к договору,  определив срок выполнения работ по договору с момента заключения договора до  31.07.2017 года».  

Внести изменения в п. 10.1. договора № 1К/00063-16 от 28.04.2016 года, изложив его  в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и  действует до 31.07.2017 года, а в части принятых сторонами договору обязательств до  полного их исполнения сторонами.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи  жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской  области.  

 Судья Соловьев К.Л.