﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

  Дело № А48 – 8805/2021

г. Орёл

12 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 09.11.2021. 

Решение в полном объеме изготовлено 12.11.2021.

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи А.Г. Кудряшовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовой Т.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Дубрава» (241035, г. Брянск, ул. Кромская, д. 101, оф. 8, ОГРН 1093254013544, ИНН 3255509505) к Обществу с ограниченной ответственностью «Галея» (302030, г. Орел, ул. Степана Разина, д. 3, пом. 36, 37, ОГРН  1165749055031, ИНН 5751058620) о взыскании задолженности по договору выполнения работ № 16/11/2020 от 16.11.2020 в размере 3 051 000 руб. 13 коп., 

при участии: 

от истца -  представитель Соколова Т.А. (паспорт, доверенность №01 от 11.01.2021, диплом);

от ответчика - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Дубрава» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Галея» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору выполнения работ № 16/11/2020 от 16.11.2020 в размере 3 051 000 руб. 13 коп.

В ходе судебного заседания истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

В обосновании заявленных требований истец ссылается на то, что надлежащим образом исполнил условия договора и дополнительного соглашения к договору, однако ответчиком оплата за подрядные работы не была произведена в полном объёме.

Ответчик отзыва по существу заявленных требований не представил, в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в деле имеется почтовое уведомление.

Учитывая, что у арбитражного суда имеются доказательства надлежащего извещения ответчика о рассмотрении дела по существу, дело рассмотрено по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд считает установленными следующие обстоятельства, 16.11.2020 между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Дубрава» (далее – истец, субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Галея» (далее – ответчик, генподрядчик) был заключен договор выполнения работ № 16/11/20, (далее – договор).

Согласно пункту 1.1. договора субподрядчик обязуется в установленные договором сроки и порядке выполнить работы согласно заказам (далее - работы) и передать результат выполненных работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в сроки и порядке, предусмотренном договором. Подробный перечень выполняемых работ, их описание, количество используемых материалов, их описание, технические и иные характеристики результата выполненных работ, подлежащего передаче генподрядчику, могут приводиться в приложениях к договору.

Работы выполняются на объекте заказчика по адресу: Россия, Калужская область, Людиновский р-н, ОЭЗ «Калуга».

Работы по договору выполняются силами и средствами субподрядчика, если сторонами письменно не согласовано иное. Если для выполнения работ требуется специальное оборудование, субподрядчик обязуется его предоставить, либо заблаговременно до начала выполнения работ уведомить генподрядчика о необходимости предоставления генподрядчиком такого оборудования и согласовать с ним порядок такого предоставления (п. 1.4 договора). 

В соответствии с пунктом 2.1 договора, цена выполняемых по договору работ является твердой и указывается в приложениях (Заказе). Все расходы на персонал субподрядчика (включая, но не ограничиваясь, транспортные расходы, расходы на проживание, питание, рабочую одежду и средства защиты, привлечение спецтехники, надбавки за работу в праздничные дни и сверхурочную работу и прочие выплаты социального характера) включены в цену выполняемых работ и дополнительно генподрядчиком не оплачиваются..

В пунктах 2.2 и 2.3 договора сторонами предусмотрено, что все расчеты осуществляются в соответствии с действующим законодательством путем безналичного перевода в следующем порядке: Расчеты между генподрядчиком и субподрядчиком производятся на основании акта приема-передачи выполненных работ в течение 30 календарных дней после их подписания сторонами. Моментом исполнения обязанности по оплате выполненных работ считается момент поступления денежных средств на счета субподрядчика

Согласно пункта 4.3.1 договора генподрядчик обязан выполнять свои обязанности надлежащим образом и в срок, предусмотренный договором и приложениями к нему.

Пунктом 4.3.7 договора предусмотрено, что генподрядчик обязан оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, которые предусмотрены пунктом 2.2. договора. За несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы – генподрядчик обязуется оплатить субподрядчику штраф в размере 0,1 % не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

К указанному договору стороны 18.01.2021 заключили дополнительное соглашение №1 к договору выполнения работ №16/11/20 от 16.11.2020, в котором были внесены изменения в п. 2.1 договора: «Цена выполняемых по настоящему договору работ является твердой и указывается в приложениях (Заказе), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена выполняемых работ включает в себя стоимость выполненных работ и стоимость материалов подрядчика. Все расходы на персонал субподрядчика (включая, но не ограничиваясь, транспортные расходы, расходы на проживание, питание, рабочую одежду и средства защиты, привлечение спецтехники, надбавки за работу в праздничные дни и сверхурочную работу и прочие выплаты социального характера) включены в цену выполняемых работ и оплачиваются. Генподрядчик удерживает с Субподрядчика 10 (десять) % от стоимости выполненных работ подрядчиком без учета стоимости материалов приобретенных Субподрядчиком за оказанные генподрядные услуги, в том числе НДС 20 %». 

Истцом, надлежащим образом были выполнены работы, предусмотренные условиями договора, о чем имеется подтверждение в виде актов сдачи - приемки выполненных работ №1 от 28.01.2021 и №2 от 25.02.2021.

Истцом в материалы дела представлено письмо ООО «Галея», согласно которому последний обязался погасить задолженность, возникшая в ходе выполнения строительных работ.

Выполненные работы ответчиком оплачены не были, сумма задолженности составила 3 051 000 руб. 13 коп.

Истец 29.07.2021 Исх.№29/07/01-2021 обратился к ответчику с требованием оплаты образовавшейся задолженности, однако ответчик не оплатил задолженность, что и послужило основанием для обращения истца с исковым заявлением в суд. 

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришёл к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, в связи со следующим.

К отношениям сторон подлежат применению правила главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также ГК РФ).

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных  в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

В силу статей 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и в установленный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) общие положения о подряде применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно п.1 ст. 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В соответствии с положениями статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

На основании статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащая выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Субподрядчик обратился с иском о взыскании с генподрядчика стоимости выполненных работ, в соответствии с ценой, установленной договором выполнения работ и дополнительным соглашением к нему.

Так, из материалов дела следует, что истец выполнил работы обусловленные договором, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами -  актом сдачи – приемки выполненных работ №1 от 28.01.2021 на сумму 1 440 897 руб. 58 коп. и актом сдачи – приемки выполненных работ №2 от 25.02.2021 на сумму 1 610 102 руб. 55 коп. подписанные ответчиком и скрепленные круглыми печатями без замечаний и возражений.

О фальсификации представленных в материалы дела доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 АПК РФ, лицами, участвующими в деле не заявлено.

Поскольку ответчик взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ  не исполнил, доказательств погашения задолженности на день рассмотрения дела суду не представил, а наличие и размер задолженности подтверждаются материалами дела, то с ответчика в пользу истца подлежит взысканию основной долг в сумме на сумму 3 051 000 руб. 13 коп.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о некачественности выполненных работ ответчиком, в материалы дела не представлено. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч.1 ст.9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч.2 ст.9 АПК РФ).

Судебные расходы распределены судом следующим образом.

При обращении в арбитражный суд с исковым заявлением истцом по платежному поручению от 15.09.2021 №15 уплачена государственная пошлина в размере 38 255 руб. 00 коп. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в связи с удовлетворением исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Галея» (302030, г. Орел, ул. Степана Разина, д. 3, пом. 36, 37, ОГРН  1165749055031, ИНН 5751058620) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Дубрава» (241035, г. Брянск, ул. Кромская, д. 101, оф. 8, ОГРН 1093254013544, ИНН 3255509505) задолженность по оплате выполненных по договору выполнения работ №16/11/2020 от 16.11.2020 в размере 3 051 000 руб. 13 коп., а также взыскать 38 255 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 3 ст. 319 АПК РФ исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с момента его принятия. 

Судья				                                       		А.Г. Кудряшова