АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-666/2024

город Новосибирск

25 марта 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола секретарем судебного заседания Никоненко А.Д., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (ОГРН  1065406101265), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью «СТС-Плюс» (ОГРН 1165476085345),  г. Новосибирск,  

при участии третьего лица: общества с ограниченной ответственностью  «Новосибдорстрой» (ОГРН 1115476108956), г. Новосибирск,  

об обязании устранить недостатки по муниципальному контракту № 37/21 от  02.07.2021.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «СТС-Плюс» (ОГРН  1165476085345) при наступлении климатических условий (в сухую погоду, при  температуре окружающего воздуха не ниже 50С) в срок не позднее 01.06.2024,  устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по  муниципальному контракту от 02.07.2021 № 37/21:  

1) на объекте «ул. Волочаевская» от ул. Лазурная до ул. Лазурная,27а: 

1. Выкрашивание а/б в месте отбора проб – 2 шт. (лево и право от ул. Лазурная  до ул. Лазурная,27а) – нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

2) на объекте «ул. Высоцкого» от ул. Волочаевская до въезда между домами   № 29 и № 31 по ул. Высоцкого:  

1. Выкрашивание а/б в месте отбора проб- 1 шт. (ул. Высоцкого, 43) - нарушено  

требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

2. Выкрашивание поперечного стыка – 20м.п. (на пересечении поворот с ул.  Волочаевская на ул. Лазурная начало участка) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р  50597-2017;  

3) на объекте «ул. Кирова» от ул. Автогенной до дома № 258(четная), от дома   № 319 до № 301 (нечетная):  

1. Выкрашивание а/б в местах отбора проб – 4шт. (от ул. Автогенной до дома   № 258) нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

2. Выкрашивание а/б покрытия вокруг колодцев и просадка решетки  дождеприемника и смотрового колодца – 3 шт. (между домами по ул. Кирова, 319 и  317; ул. Кирова, 317 перед пешеходным переходом; ул. Кирова, 313) - нарушено  требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

3. Выбоины на а/б покрытии проезжей части – 1 м2 (поворот с ул. Кирова  направо на ул. Алтайская) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

4) на объекте «ул. Короленко» от дома № 136 до ул. Никитина: 

1. Выкрашивание а/б в месте отбора проб – 3 шт. (в районе домов по ул.  Короленко, 124, 126, и 136) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

2. Выкрашивание а/б покрытия проезжей части – 1 м2 (от дома № 136 до ул.  Никитина) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017,  

5) на объекте «ул. Кошурникова» от дома по ул. Кошурникова,22/4 до дома по  ул. Бориса Богаткова, 213 к1 до осевой по ходу движения, от ул. Красина до дома по  ул. Красина,7/2 до осевой по ходу движения; от ул. Стофато до ул. Добролюбова:  

1. Выкрашивание а/б в месте отбора проб – 7 шт. (ул. Федосеева, 2 левая и  средняя полоса; ул. Кошурникова, 5 средняя полоса; ул. Кошурникова,26-28) -  нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

6) на объекте «ул. Лескова» от ул. Автогенная до ул. Грибоедова:  

1. Выкрашивание а/б в местах отбора проб – 2 шт. (ул. Лескова, 243; между  домами по ул. Лескова,265 и 253) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

7) на объекте «ул. Гурьевская» подъем от Зыряновской до № 38 по ходу  движения и вдоль Кирова, 108 до ул. Кирова:  

1. Выкрашивание а/б в местах отбора проб – 2 шт. (вдоль здания по ул.  Добролюбова,31) – нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

2. Просадка колодцев на проезжей части – 2 шт. (вдоль здания по ул.  

Добролюбова,31) -нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

8) на объекте «Ремонт ул. Зыряновская»: 

1. Выкрашивание а/б в местах отбора проб – 2 шт. (вдоль здания по ул.  Зыряновская,43) – нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

9) на объекте «Ремонт ул. Ленинградская» от ул. Гурьевская до ул. Никитина: 

1. Выкрашивание а/б в местах отбора проб – 3 шт. (в районе домов по ул.  Ленинградская, 98,100 и 106) – нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

2. Выбоины на а/б покрытии проезжей части – 0,5м2 (возле поворота на  территорию Сибстрина ул. Ленинградская,113) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ  Р 50597-2017;  

10) на объекте «Ремонт ул. Сакко и Ванцетти»: 

1. Выкрашивание а/б в местах отбора проб – 4 шт. (от ул. Зыряновская до дома  по ул. Сакко и Ванцетти, 42) – нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

11) на объекте «Ремонт ул. Автогенная» от ул. Короленко до дома по ул.  Красноармейская, 173:  

1. Выкрашивание а/б в местах отбора проб – 2 шт. (ул. Далидовича,139  шиномонтаж) – нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;  

2. Колейность на а/б покрытии проезжей части – h=30-40мм (на подъеме от ул.  Далидовича,229 до ул. Красноармейской) – нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р  50597-2017;  

3. Выкрашивание а/б покрытия проезжей части – 0,5м2 (примыкание ул.  Автогенная право с ул. Красноармейской,184) – нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р  50597-2017.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТС-Плюс» (ОГРН  1165476085345) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6000 рублей  государственной пошлины.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина