АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край  

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-2641/2022

г.Чита

06 октября 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ по  муниципальному контракту № 0191300010917000031 от 02.08.2017 на выполнение  работ по благоустройству территории общего пользования городского округа «Город  Чита» в целях формирования современной городской среды (ремонт площади имени  Ленина в 

<

...> очередь), в течение 30 дней с момента вступления решения в  законную силу, а именно:  

1) устранить причины образования высолов по всему контуру эстрады, очистить  плитку по всему контуру эстрады от образовавшихся высолов, выполнив следующие  виды работ:  

- выполнить разборку облицованной поверхности со всей площади стен эстрады;  

- удалить высолы с поверхности плит (как с лицевой, так и нелицевой стороны  плитки), применяя химические очистители с использованием смывочной смеси;  

- произвести отбивку с поверхности стен старого клеевого раствора;  

- поверхности перед облицовкой очистить, промыть и перед нанесением  клеящей прослойки из раствора и других составов, увлажнить;  

- обработать расчищенные поверхности стен грунтовкой грубого  проникновения, применяя грунтовку типа «Бетон-контакт» или аналог;  

- выполнить облицовку стен эстрады плитами, подготовленными к облицовке, с  заменой поврежденных плит. Растворы, применяемые для заполнения зазора между  облицовываемой поверхностью и облицовочными элементами, не должны содержать  растворимых солей, образующих высолы на поверхности облицовки. Для этой цели  использовать растворы на пуццолановом портландцементе и промытом песке с  добавкой пластификатора;  

- последующее оформление вертикальных и горизонтальных швов выполнить  водонепроницаемыми составами согласно нормативным требованиям для данного вида  работ;  

- обработать облицованные поверхности гидрофобизирующими составами. При  

производстве работ производить операционный контроль процесса облицовки плитами,  

результаты операционного контроля фиксировать в журнале производства работ  

2) выполнить прокладку выступающих частей трубопроводов под землей,  

согласно проектной документации. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. расходов  

по оплате государственной пошлины. 

Перечислить денежные средства в размере 50000 руб. с депозитного счета  

Арбитражного суда Забайкальского края на расчетный счет общества с ограниченной  

ответственностью «СтройАвтоЭксперт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) за  

производство по делу судебной экспертизы по счету на оплату № 010-2023 от  

06.03.2023 по следующим реквизитам: 

Банк получателя г.Чита Читинское ОСБ № 8600 ПАО «Сбербанк России»  БИК 047601637  

кор.счет 30101810500000000637 счет № 40702810474000005691 ИНН 

<

***> КПП 752401001 Получатель – ООО «СтройАвтоЭкспертиз» 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Л.В. Бочкарникова