Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-121639/2022

21 августа 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 июля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  21 августа 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Сухаревской Т.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплект" (адрес:  195253, 

<

...> литер А, помещение 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.02.2020, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Управление строительством" (адрес:  191014, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, Парадная ул., д. 8, литера Б, помещ. 61, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.11.2009, ИНН: 

<

***>);

при участии

- от истца: представитель Луговик В.Н. по доверенности от 21.07.2022

- от ответчика: представитель ФИО2 по доверенности от 03.10.2022

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомплект" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Управление строительством" о взыскании 532 758,95 руб. долга по договору подряда от 14.08.2020 № 14/08/20; 1 742 783,84 руб. задолженности по выплате гарантийного удержания; 501 328,26 руб. долга по договору подряда от 16.11.2020 № 16/11/20; 1 177 925,36 руб. задолженности по выплате гарантийного удержания;  524 436,39 руб. долга по договору подряда от 25.11.2020 № 25/11/20; 630 651,85 руб. задолженности по выплате гарантийного удержания; 11 584,77 руб. долга по договору от 25.03.2021 № 25/03/2021; 508 894,20 руб. задолженности по договору от 10.01.2022 № 10/01-ПС2-СК; 62 400 руб. долга по договору от 07.12.2020 № 07/12/20-2.

Определением суда от 02.12.2022 исковое заявление принято к рассмотрению в общем порядке искового производства, назначено предварительное судебное заседание и судебное заседание.

В судебном заседании 16.02.2023 присутствовали представители истца и ответчика.

Истец заявил ходатайство о приобщении дополнительных документов.

Ответчик в судебном заседании просил суд приобщить к материалам дела отзыв на исковое заявление.

Протокольным определением от 16.02.2023 судебное заседание отложено.

В судебном заседании 11.05.2023 присутствовали представители истца и ответчика.

Протокольным определением от 11.05.2023 судебное заседание отложено.

В судебном заседании 06.07.2023 присутствовали представители истца и ответчика.

Истец просил суд приобщить к материалам дела дополнительные документы.

Арбитражный суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и поскольку от лиц, участвующих в деле, не поступило возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, с учетом обстоятельств дела, суд, завершив предварительное судебное заседание в порядке статей 136-137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), рассмотрел исковое заявление по существу.

В обоснование требований Общество указало, что между ООО «Управление строительством» и ООО «Стройкомплект» заключены договоры подряда и договор оказания услуг по предоставлению спецтехники.

1.Договор подряда от 14.08.2020 №14/08/20 (договор).

В соответствии с пунктом 1.1. договора, подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы из своих средств и материалов, своими и/или привлеченными силами в соответствии с Приложениями к Договору (проектно-техническая документация/техническое задание/задание на выполнение работ и т.п.) в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, нормами, правилами и стандартами, в т.ч. СНиП, на комплекс работ по благоустройству территории на объекте строительства: Многоэтажного жилого комплекса, 1 этап строительства, 2 корпус, по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Ручьи», шоссе в Лаврики, д.64, кад.номер 47:07:0722001:4614, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную Договором цену согласно (Приложения №2).

В соответствии с пунктом 2.1. договора, дата начала выполнения работ по договору 18.08.2020.

В соответствии с пунктом 2.2. договора, дата окончания выполнения работ по договору 18.12.2020.

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения от 16.06.2021 № 2, дата окончания выполнения работ по договору изменена на 01.08.2021.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, сумма договора составляет: 23 753 690,72 руб.

На основании пункта 3.3. договора, окончательная стоимость работ и материалов определяется по факту (акту) приемки результата выполненных работ с учетом реально выполненных работ, количества и качества использованных материалов в пределах суммы Договора.

В соответствии с пунктом 3.4.2. договора, оплата выполненных работ производится заказчиком ежемесячно на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и приложенных к нему документов (исполнительная документация, отчеты об использовании материалов и т.п.) и счет-фактуры в течение 21 (двадцати одного) банковского дня с момента предоставления подрядчиком указанных документов, завизированных в порядке, установленном п.6.3. Договора. Заказчик не позднее срока, указанного в настоящем подпункте обязан уплатить подрядчику сумму, указанную в счете за выполненные работы. При этом подрядчик выставляет счет на оплату выполненных работ в размере 90% от суммы, указанной в подписанном за соответствующий месяц Акте по форме КС-2.

Оставшаяся часть суммы за выполненные работы за соответствующий месяц выплачивается в соответствии с условиями, изложенными в подпункте 3.4.3. настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.2. договора, сдача-приемка работ, выполненных подрядчиком за отчетный период, осуществляется путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В соответствии с пунктом 8.3. договора, при нарушении заказчиком сроков оплаты, подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

В соответствии с КС-2 №1 от 24.09.2020 и КС-3 №1 от 24.09.2020 выполнено работ на сумму 1 955 026,20 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 195 502,62 руб. Итого к оплате 1 759 523,58 руб.

В соответствии с КС-2 №2 от 20.10.2020 и КС-3 от 20.10.2020 № 2 выполнено работ на сумму 4 361 373 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 436 137,30 руб. Итого к оплате 3 925 235,70 руб.

В соответствии с КС-2 №3 от 20.11.2020 и КС-3 №3 от 20.11.2020 выполнено работ на сумму 3 977 898,34 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 397 789,83 руб. Итого к оплате 3 580 108,51 руб.

В соответствии с КС-2 от 15.12.2020 № 4 и КС-3 №4 от 15.12.2020 выполнено работ на сумму 3 645 309,14 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 364 530,91 руб. Итого к оплате 3 280 778,23 руб.

В соответствии с КС-2 от 29.01.2021 №5 и КС-3 от 29.01.2021 № 5. выполнено работ на сумму 1 416 351 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 141 635,10 руб. Итого к оплате 1 274 715,90 руб.

В соответствии с КС-2 №6 от 16.02.2021г. и КС-3 №6 от 16.02.2021г. выполнено работ на сумму 987 739,72 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 98 773,97 руб. Итого к оплате 888 965 ,75 руб.

В соответствии с КС-2 №7 от 30.05.2021 и КС-3 №7 от 30.05.2021 выполнено работ на сумму 492 186,60 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 49 218,66 руб. Итого к оплате 442 967,94 руб.

В соответствии с КС-2 №8 от 30.06.2021 и КС-3 №8 от 30.0б.2021 выполнено работ на сумму 591 954,40 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 59 195,44 руб. Итого к оплате 532 758,96 руб.

Акт приемки результата выполненных работ подписан 20.01.2022. Фактически выполнен объем работ на сумму:17 427 838,40 руб.

На сегодняшний день, с учетом частичной оплаты по договору, сумма основного долга составляет: 532 758,95 руб.

Задолженность по выплате гарантийного удержания составляет: 1 742 783,84 руб.

Всего задолженность по договору подряда от 14.08.2020 № 14/08/20 составляет 2 275 542,79 руб.

2. Договор подряда от 16.11.2020 № 16/11/20 (далее-Дотовор).

В соответствии с п. 1.1. Договора, Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы из своих средств и материалов, своими и/или привлеченными силами в соответствии с Приложениями к Договору (проектно-техническая документация/техническое задание/задание на выполнение работ и т.п.) в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, нормами, правилами и стандартами, в т.ч. СНиП, на комплекс работ по благоустройству территории вокруг 1-й секции и пристроенной автостоянки на объекте строительства: Многоквартирный жилой комплекс, со встроенными помещениями и пристроенными автостоянками на земельном участке по адресу: г.Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, уч. 12 (северо-восточнее дома 4 литера А по Заречной улице), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную Договором цену согласно (Приложения №2).

В соответствии с п.2.1. договора, дата начала выполнения работ по договору 25.11.2020.

В соответствии с пунктом 2.2. договора, дата окончания выполнения работ по договору 15.06.2021.

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения от 16.06.2021№ 1, дата окончания выполнения работ по договору изменена на 01.08.2021.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, сумма договора составляет: 11 364 285,20 руб.

На основании пункта 3.3. договора, окончательная стоимость работ и материалов определяется по факту (акту) приемки результата выполненных работ с учетом реально выполненных работ, количества и качества использованных материалов в пределах суммы договора. 

В соответствии с пунктом 3.4.2. договора, оплата выполненных работ производится заказчиком ежемесячно на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),3.

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и приложенных к нему документов (исполнительная документация, отчеты об использовании материалов и т.п.) и счет-фактуры в течение 21 (двадцати одного) банковского дня с момента предоставления Подрядчиком указанных документов, завизированных в порядке, установленном п.б.З. Договора. Заказчик не позднее срока, указанного в настоящем подпункте обязан уплатить Подрядчику сумму, указанную в счете за выполненные работы. При этом Подрядчик выставляет счет на оплату выполненных работ в размере 90% от суммы, указанной в подписанном за соответствующий месяц Акте по форме КС-2.

Оставшаяся часть суммы за выполненные работы за соответствующий месяц выплачивается в соответствии с условиями, изложенными в подпункте 3.4.3. настоящего Договора.

В соответствии с п.6.2. Договора, сдача-приемка работ, выполненных Подрядчиком за отчетный период, осуществляется путем подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В соответствии с п.8.3. Договора, при нарушении Заказчиком сроков оплаты, подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

В соответствии с КС-2 №1 от 28.12.2020г. и КС-3 №1 от 28.12.2020г. выполнено работ на сумму 2 434 048 рублей 80 коп.

Удержание гарантийного фонда 10%: 243 404 рубля 88 коп. Итого к оплате 2 190 643 рубля 92 коп.

В соответствии с КС-2 №2 от 29.01.2021 и КС-3 №2 от 29.01.2021 выполнено работ на сумму 1 306 361,03 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 130 636,10 руб. Итого к оплате 1 175 724,93 руб.

В соответствии с КС-2 №3 от 20.02.2021 и КС-3 от 20.02.2021 №3. выполнено работ на сумму 811 379 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 81 137,90 руб. Итого к оплате 730 241,10 руб.

В соответствии с КС-2 от 18.03.2021 № 4 и КС-3 от 18.03.2021 №4 выполнено работ на сумму 195 050 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 19 505 руб. Итого к оплате 175 545 руб.

В соответствии с КС-2 №5 от 30.05.2021 и КС-3 от 30.05.2021 № 5 выполнено работ на сумму 1 172 991,30 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 117 299,13 руб. Итого к оплате 1 055 692,17 руб.

В соответствии с КС-2 от 22.06.2021 № 6 и КС-3 от 22.06.2021 № 6 выполнено работ на сумму 1 165 794,20 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 116 579,42 руб. Итого к оплате 1 049 214,78 руб.

В соответствии с КС-2 №7, КС-2 №8 от 30.06.2021 и КС-3 от 30.06.2021 № 7 выполнено работ на сумму 433 340 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 43 334 руб.

Итого к оплате 390 006 руб.

В соответствии с от 31.07.2021 КС-2 №9, КС-2 №10 и КС-3 от 31.07.2021 № 8. выполнено работ на сумму 4 260 289,29 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 426 028,93 руб. Итого к оплате 3 834 260,36 руб.

Акт приемки результата выполненных работ подписан 21.12.2021. 

Фактически выполнен объем работ на сумму: 11 789 253,62 руб.

С учетом частичной оплаты по договору долг составляет: 501 328,26 руб.

Задолженность по выплате гарантийного удержания составляет: 1 177 925,36 руб.

Всего задолженность по договору подряда от 16.11.2020 № 16/11/20. составляет 1 679 253,62 руб.

3. Договор подряда от 25.11.2020 №25/11/20.

В соответствии с пунктом 1.1. договора, подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию заказчика выполнить работы из своих средств и материалов, своими и/или привлеченными силами в соответствии с Приложениями к Договору в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, нормами, правилами и стандартами, в т.ч. СНиП, комплекс работ по благоустройству территории (переключению дренажа ТП, устройству сетей НВК, устройство временной дороги, устройство газонов) на объекте строительства: Многоэтажного жилого комплекса, 1 этап строительства, 2 корпус, по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Ручьи», шоссе в Лаврики, д.64, кад.номер 47:07:0722001:4614, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную Договором цену согласно.

В соответствии с пунктом 2.1. договора, дата начала выполнения работ по договору 25.11.2020.

В соответствии с пунктом 2.2. договора, дата окончания выполнения работ по Договору 15.06.2021.

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения от 16.06.2021 № 1, дата окончания выполнения работ по договору изменена на 01.08.2021.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, сумма договора составляет 7 218 842 руб.

На основании пункта 3.3. договора, окончательная стоимость работ и материалов определяется по факту (акту) приемки результата выполненных работ с учетом реально выполненных работ, количества и качества использованных материалов в пределах суммы договора.

В соответствии с пунктом 3.4.1 договора, оплата выполненных работ производится заказчиком ежемесячно на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и приложенных к нему документов (исполнительная документация, отчеты об использовании материалов и т.п.) и счет-фактуры в течение 21 банковского дня с момента предоставления подрядчиком указанных документов, завизированных в порядке, установленном пунктом 6.3. договора. Заказчик не позднее срока, указанного в настоящем подпункте обязан уплатить подрядчику сумму, указанную в счете за выполненные работы. При этом Подрядчик выставляет счет на оплату выполненных работ в размере 90% от суммы, указанной в подписанном за соответствующий месяц Акте по форме КС-2.

Оставшаяся часть суммы за выполненные работы за соответствующий месяц выплачивается в соответствии с условиями, изложенными в подпункте 3.4.3. настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.2. договора, сдача-приемка работ, выполненных подрядчиком за отчетный период, осуществляется путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В соответствии с пунктом 8.3. договора, при нарушении заказчиком сроков оплаты, подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

В соответствии с КС-2 от 01.12.2020 № 1. и КС-3 от 01.12.2020 № 1 выполнено работ на сумму 2 372 960 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 237 296 руб. Итого к оплате 2 135 664 руб.

В соответствии с КС-2 №2 от 15.12.2020 и КС-3 № 2 от 15.12.2020 выполнено работ на сумму 935 255 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 93 525,50 руб. Итого к оплате 841 729,50 руб.

В соответствии с КС-2 от 16.02.2021 №3 и КС-3 от 16.02.2021 №3 выполнено работ на сумму 1 171 016 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 117 101,60 руб. Итого к оплате 1 053 914,40 руб.

В соответствии с КС-2 от 30.05.2021 №4 и КС-3 от 30.05.2021 № 4 выполнено работ на сумму 736 767 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 73 676,70 руб. Итого к оплате 663 090,30 руб.

В соответствии с КС-2 № 5 от 30.06.2021 и КС-3 от 30.06.2021 № 5 выполнено работ на сумму 790 520,50 руб.

Удержание гарантийного фонда 10%: 79 052,05 руб. Итого к оплате 711 468,45 руб.

Акт приемки результата выполненных работ подписан 10.01.2022. Фактически выполнен объем работ на сумму: 6 006 518,50 руб.

На сегодняшний день, с учетом частичной оплаты по Договору, сумма основного долга составляет: 524 436,39 руб.

Задолженность по выплате гарантийного удержания составляет: 630 651,85 руб.

Всего задолженность по договору подряда от 25.11.2020 № 25/11/20 составляет 1 155 088,24 руб.

4. Договор подряда от 25.03.2021 №25/03/21.

В соответствии с п. 1.1. договора, подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы из своих средств и материалов, своими и/или привлеченными силами в соответствии с Приложениями к Договору в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, нормами, правилами и стандартами, в т.ч. СНиП, комплекс работ по восстановлению благоустройства после прокладки тепловых сетей (геотекстиль, основание из щебня, основание из OGC, асфальтобетонное покрытие нижний слой 50мм) на объекте строительства: Многоэтажного жилого комплекса, 1 этап строительства, 2 корпус, по адресу: Л О, Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Ручьи», шоссе в Лаврики, д.64, кад.номер 47:07:0722001:4614, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную Договором цену согласно (Приложения №1).

В соответствии с пунктом 2.1. договора, дата начала выполнения работ по договору 29.03.2021.

В соответствии с пунктом 2.2. договора, дата окончания выполнения работ по договору 30.04.2021.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, сумма договора составляет: 914 618,20 руб.

На основании пункта 3.3. договора, окончательная стоимость работ и материалов определяется по факту (акту) приемки результата выполненных работ с учетом реально выполненных работ, количества и качества использованных материалов в пределах суммы Договора.

В соответствии с пунктом 3.4.1. договора, оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и приложенных к нему документов (исполнительная документация, отчеты об использовании материалов и т.п.) и счет-фактуры в течение 21 (двадцати одного) банковского дня с момента предоставления Подрядчиком указанных документов, завизированных в порядке, установленном п.6,3. Договора. Заказчик не позднее срока, указанного в настоящем подпункте обязан уплатить Подрядчику сумму, указанную в счете за выполненные работы.

В соответствии с пунктом 6.2. договора, сдача-приемка работ, выполненных Подрядчиком за отчетный период, осуществляется путем подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В соответствии с пунктом 8.3. договора, при нарушении заказчиком сроков оплаты, подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

В соответствии с КС-2 от 05.04.2021 №1 и КС-3 от 05.04.2021 №1 выполнено работ на сумму 914 618,20 руб.

Акт приемки результата выполненных работ подписан 20.01.2022. Фактически выполнен объем работ на сумму: 914 618,20 руб.

На сегодняшний день, с учетом частичной оплаты по Договору подряда от 25.11.2020 №25/11/20, сумма задолженности составляет 11 584,77 руб.

5. Договор подряда №10/01-Пс2-СК от 10.01.2022 (Договор), 

В соответствии с пунктом 1.1. договора, подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы из своих средств и материалов, своими и/или привлеченными силами в соответствии с Приложениями к Договору (проектно-техническая документация/техническое задание/задание на выполнение работ и т.п.) в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, нормами, правилами и стандартами, в т.ч. СНиП, на комплекс подготовительных работ по благоустройству территории на объекте строительства: Многоквартирный жилой комплекс, со встроенными помещениями и пристроенными автостоянками, Секция 2, расположенный на зем.участке с кад. номером 78:36:1310101:39 по адресу: г.Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, уч. 12 (северо-восточнее дома 4 литера А по Заречной улице), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную Договором цену согласно.

В соответствии с п.2.1. договора, дата начала выполнения работ по Договору 10.01.2022.

В соответствии с пунктом 2.2. договора, дата окончания выполнения работ по договору 31.01.2022.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, сумма договора составляет: 508 894,20 руб.

На основании пунктом 3.3. договора, окончательная стоимость работ и материалов определяется по факту (акту) приемки результата выполненных работ с учетом реально выполненных работ, количества и качества использованных материалов в пределах суммы Договора.

В соответствии с пунктом 3.3.1. договора, оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и приложенных к нему документов (исполнительная документация, отчеты об использовании материалов и т.п.) и счет-фактуры в течение 21 (двадцати одного) банковского дня с момента предоставления Подрядчиком указанных документов, завизированных в порядке, установленном п.б.З. Договора. Заказчик не позднее срока, указанного в настоящем подпункте обязан уплатить Подрядчику сумму, указанную в счете за выполненные работы.

В соответствии с пунктом 6.2. договора, сдача-приемка работ, выполненных Подрядчиком за отчетный период, осуществляется путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В соответствии с пунктом 8.3. договора, при нарушении заказчиком сроков оплаты, подрядчик вправе потребовать уплаты заказчиком пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

В соответствии с КС-2 №1 от 31.01.2022г. и КС-3 от 31.01.2022 №1. выполнено работ на сумму 508 894 рубля 20 коп.

Указанные выше документы были переданы Вам на подписание 22.02.2022 по реестру документов.

В соответствии с пунктом 6.1. договора, при отсутствии замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписываются Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты их получения от подрядчика и 1 экз. направляется Подрядчику. Возражений на сегодняшний день от Заказчика не поступало, соответственно, работы приняты Заказчиком. Датой подписания Актов считаем 01.03.2022.

Задолженность по договору подряда от 10.01.2022 № 10/01-Пс2-СК составляет 508 894,20 руб.

6. Договор от 07.12.2020 № 07/12/20-2 на оказание услуг предоставления спецтехники (далее-Договор),

В соответствии с пунктом 1.1. договора, исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, связанные с предоставлением спецтехники с экипажем (далее по тексту «техника») перечень и стоимость техники определены в Приложении №1 к настоящему Договору.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, стоимость предоставляемых услуг (с учетом НДС) по договору определяется из стоимости 1 машино-часа работы «Техники», указана в приложении №1 к договору. Окончательная стоимость услуг отражается в подписанном с двух сторон акте выполненных услуг.

В соответствии с пунктом 3.2. договора, расчет заказчик производит исходя из данных в рапортах в течение десяти рабочих дней с момента предъявления исполнителем счета, на сегодняшний день, сумма задолженности по договору №07/12/20-2 на оказание услуг предоставления спецтехники от 07.12.2020 составляет 62 400 руб.

Итоговая сумма задолженности 5 692 763,62 руб.

20.10.2022 в адрес ответчика была направлена претензия с просьбой погасить задолженность по указанным выше договорам, которая осталась без ответа.

После соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, истец обратился с настоящим иском в суд.

Заслушав доводы сторон и оценив представленные в материалах дела доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункты 1 и 4 статьи 753 ГК РФ).

Учитывая приведенные нормы права и основываясь на общем принципе доказывания в арбитражном процессе, предусмотренном в статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), истец по настоящему делу обязан представить доказательства того, что ответчик не выполнил взятые на себя обязательства, то есть принял выполненные истцом работы и не оплатил их.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Факт выполнения предусмотренных договорами работ (от 14.08.2020 №14/08/20; от 16.11.2020 № 16/11/20; от 25.11.2020 №25/11/20; от 25.03.2021 №25/03/21; от 07.12.2020 № 07/12/20-2) подтверждается актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и соответствующим справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанными со стороны заказчика.

Ответчик возражал по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление, в частности ссылался на тот факт, что истцом выполнены работы ненадлежащего качества по договору от 14.08.2020 №14/08/20.

Истцом заявлено требование о взыскании задолженности по договору подряда от 14.08.2020№14/08/20, в рамках которого выполнены работы по благоустройству территории на объекте строительства: Многоэтажного жилого комплекса, 1 этап строительства, 2 корпус, по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Ручьи», шоссе в Лаврики, д.64, кад.номер 47:07:0722001:4614, что подтверждается представленными истцом в материалы дела двусторонне-подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Исходя из пункта 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязанности заказчика по оплате работ является сдача подрядчиком результата работ надлежащего качества и их приемка заказчиком.

Материалами дела подтверждается, что между истцом и ответчиком подписан без претензий и замечаний по качеству и срокам итоговый акт приемки результата выполненных работ от 20.01.2022.

Доказательств мотивированного отказа от приемки работ с указанием конкретных замечаний, ответчиком не представлено.

Таким образом, у ответчика возникло обязательство по оплате выполненных работ по договору подряда от 14.08.2020 №14/08/20.

Оснований для отказа в удовлетворении исковых требований в части взыскания задолженности по вышеуказанном договорам   у суда первой инстанции не имеется.

Вместе в отношении требований о взыскании задолженности по договору от 10.01.2022 №10/01-Пс2-СК суд пришел к выводу об их отклонении, так как представленные в материалы дела договор не подписан со стороны ответчика.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управление строительством" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплект" 5 121 469,42 руб. долга; 46 299 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сухаревская Т.С.